새만금방조제

내·외측 사설항로표지 인양 정비 공사 시방서

2019. 03.

	한국농어촌공사 새만금사업단

【목    차】

□ 등부표 인양정비 공사

Ⅰ. 일반시방서

Ⅱ. 특별시방서

Ⅰ.일반시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

본 공사 시방서는 한국농어촌공사 새만금사업단이 발주하는 새만금방조제 내.외측 사설항로표지 인양 정비 공사에 적용한다.

1.1.2 적용순서

(1) 설계서(목적물 물량이 표시된 내역서는 제외한다)는 상호보완의 효력을 가지며 상호모순이 있어 적용상의  혼란 등의 문제가 발생할 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

① 본 공사 시방서

② 설계도면

③ 공사비 내역서

(2) 본 공사시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방내용 간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된  내용을 우선 적용한다.

(3) 공사계약일반조건 제3조에 의한 계약문서는 상호보완의 효력을 가지되 계약문서 간에 상호 모순이 있어 해 석이 불가능할 경우에는 다음의 순서에 따른다.

① 관련법규

② 공사입찰유의서

③ 공사계약특수조건

④ 공사계약일반조건

⑤ 본 공사 시방서

(4) 설계서를 구성하는 어느 한 문서의 사항이 특별히 불합리하거나, 중대한 하자가 있는 등, 특별한 경우에는 발주자의 사실 판단이나 설계 및 공사 관계자 등의 의견을 들어 조정 시행할 수 있다.

1.2 용어의 정의

1.2.1 발주청 또는 발주자

본 공사시방서에서『발주청』또는『발주자』라 함은 한국농어촌공사 새만금사업단 또는 관련 규정(내부규정을 포함한다)에 따라 본 공사의 공사업무를 담당하고 있는 보조기관과 동 보조기관 소속의 담당자를 말한다.

1.2.2 수급인

본 공사시방서에서『수급인』이라 함은 공사계약일반조건 제2조의『계약상대자』를 말하며 본 시방서에서『시공자』또는『도급자』라고 표기된 경우도 또한 같다.

1.2.3 공사감독자

본 공사시방서에서『공사감독자』라 함은『공사계약일반조건 제2조 제3호』의『공사감독자』로서 발주청에서 임명한 기술직원 또는 그의 대리인이나 또는 건설기술관리법 시행령 제50조의 규정에 의하여 책임 감리를 하는 공사에 있어서는 본 공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다. 본 공사시방서에서 공사감독자 또는 감리원이라고 표현될 수 있다.

1.2.4 현장요원

본 공사시방서에서『현장요원』이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 수급인이 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

1.2.5 현장대리인

본 공사시방서에서『현장대리인』이라 함은 공사계약일반조건 제14조의『공사현장대리인』을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자(전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

1.2.6 이 시방서 에서『공사』라 함은 본 공사와 가설공사 또는 이에 준하는 공사를 말한다.『본 공사』라 함은 계약에 의하여 시공되는(설비를 포함한) 영구(永久)공사를 말한다.『가설공사』라 함은 공사의 실시 및 준공과 하자보수에 필요한 모든 종류의 임시공사를 말한다.

1.2.7 『제작자』라 함은 공사에 사용할 제품을 제조 또는 제작하여 공급하는 제조업체 또는 제작업체를 말하며, 관련부분 시방서에서는 이들을 별도 구별하지 아니하고 모두 제작자라 칭한다.

1.2.8 『납품자』라 함은 공사에 사용할 제품을 공급하는 업체로서 납품업자 또는 공급업자를 말한다.

1.2.9 『하수급인』이라 함은 수급인으로부터 건설공사를 하도급 받은 자를 말한다.

1.2.10 『설계도서』라 함은 발주청이 제공한 본 공사의 모든 설계도면과 계산서 및 계약서에 의해서 발주청 또는 공사감독자가 수급인에게 제공하는 모든 종류의 기술자료 및 도면, 계산서, 견본, 양식, 모형, 그리고 수급인이 제출하고 공사감독자가 승인한 유사한 종류의 다른 기술자료를 말한다.

1.2.11 『현장』이라 함은 공사가 실시되는 장소로서 발주청이 제공하는 장소와 현장의 부분을 구성하는 것으로 계약에 의해 특별히 지정된 다른 장소를 말한다.

1.2.12 『승인』이라 함은 수급인으로부터 서면으로 제출되어 요청 받은 사항에 대하여 공사감독자가 그 권한의 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

1.2.13 『지시』라 함은 발주청 또는 공사감독자가 수급인에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 서면으로 지시하여 실시토록 하는 것을 말한다.

1.2.14 『협의』라 함은 공사감독자 또는 발주청이 수급인으로부터 서면으로 제출된 내용을 수급인과 토의를 통해 상호 합의에 도달하여 공사감독자 또는 발주청이 서면으로 인정하는 것을 말하며, 공사감독자 또는 발주청이 서면으로 수급인에게 제출하여 수급인과의 상호 합의를 통해 수급인이 서면으로 인정하는 경우도 또한 같다.

1.2.15 『확인』이라 함은 발주청 또는 공사감독자가 본 공사시방서 또는 관련 법규 및 계약내용의 관련내용을 검측, 계측, 목측 등으로 확인하고, 서면으로 동의하는 것을 말한다.

1.3 공사감독자의 업무

1.3.1 공사감독자는 계약된 공사의 원활한 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원, 수급인이 이 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 수급인과 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련 법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사, 승인 등을 행하며 그 권한의 범위 내에서 공사전반에 대하여 발주청을 대신하여 업무를 행한다.

1.3.2 공사감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인, 확인 등 공사추진과 관련된 모든 행위는 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 행할 수 있되 수급인이 필요하다고 판단할 경우 문서로 이를 확인할 수 있으며 공사감독자는 이 같은 수급인의 요구에 응하여야 한다.

1.3.3 공사감독자는 수급인이 건설공사의 설계도서·시방서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 해당건설공사를 시공하는 경우에는 재시공·공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

1.3.4 공사감독자는 수급인에게 재시공·공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 수급인에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 공사 재개 지시 등 필요한 조치를 한다.

1.3.5 공사감독자는 계약변경을 유발하거나 발주청에 비용 부담이 되는 어떠한 행위도 발주청의 승인을 받지 않고는 할 수가 없다.

1.4 수급인의 책무

1.4.1 일반적 의무

(1) 수급인은 본 공사의 계약에 따라 공사를 근면하고 성실하게 설계(계약에서 규정한 경우)하고 시행·완공하여야 하며 또한 관련법규 및 계약조건에 명시된 어떠한 하자에 대해서도 계약에 따라 성실하게 보수하여야 한다.

(2) 수급인은 계약내용에서 수급인이 제공하도록 명시되어 있거나 또는 계약내용으로부터 합리적으로 추정할 수 있는 한, 관련설계 또는 공사를 수행함에 있어서나 하자 보수 시 그 수행내용을 스스로 감독하여야 하며 노동력, 재료 또는 자재, 플랜트, 수급인의 장비 등 동 업무수행을 위하여 필요한 모든 것을 제공하여야 한다.

(3) 수급인은 공사감독자의 업무수행에 특별한 사유가 없는 한 적극적인 자세로 협조하여야 한다.

1.4.2 설계도서 검토

(1) 수급인은 공사착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치하여야 한다. 공사가 진행 중이라도 같다.

(2) 수급인은 공사 착공 전 또는 진행 중에 설계도서를 검토한 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공종 착수 전까지 검토의견서를 첨부하여 발주청에 통지하고 발주청의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

①『본 시방서 1.6.1 설계변경 사유』에 명시한 사유가 있는 경우

②『1-2-2 공사협의 및 조정』에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

③ 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

④ 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

⑤ 수급인이 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

⑥ 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

⑦ 기타 공사시행과 관련하여 수급인의 판단으로 발주청의 해석, 지시 또는 발주청과 협의할 사항이 있을 경우

(3) 앞의 (2)항과 관련하여 발주청이 해석 또는 지시 등을 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 발주청의 재량으로 기성량으로 인정하지 않을 수 있다. 또, 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 발주청의 원상복구나 시정지시가 있을 때에는 수급인은 자신의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

1.4.3 책임한계

(1) 수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 수급인과 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련된 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물을 발주청에 서면으로 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 수급인 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다. 수급인은 공사 중 또는 공사 중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

(3) 수급인은 본 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료하여야 한다.

(4) 수급인은 공기가 연장되는 경우에도 공사구간을 관리할 책임이 있으며, 적절한 배수처리 등 공사구간에서의 피해를 방지하기 위한 필요한 예방조치를 취하여야 한다.

(5) 수급인이 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력을 발생한다.

1.4.4 현장대리인 등의 현장상주

(1) 수급인이 지정·배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 품질관리자, 시험사는 현장에 상주하여야 한다.

(2) 공사의 전부, 또는 일부의 착공지연기간 동안의 현장요원, 안전 관리자, 품질관리자, 시험사 등의 상주여부 및 인원수 등에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

1.4.5 감리원 또는 공사감독자 경유

수급인 및 현장대리인이 발주청에 통지 또는 제출하는 서류는 특별한 언급이 없는 한 건설공사 감리원 또는 공사감독자를 경유하여야 한다.

1.4.6 설계도서 등의 관리

수급인은 현장사무실에 공사계약문서 사본 및 설계도서와 관련자료 등을 비치하여야 하고, 관리번호에 의한 관리대장을 작성·관리하여야 하며 관리책임자를 선임하여 공사관계자 외 출입제한 등 보안관리를 철저히 하여야 한다.

1.5 공사기간 연기

1.5.1 연기요청

수급인이『공사계약일반조건제26조제1항』에 따라 계약기간(공사기간) 연장을 발주청에 요청할 수 있는 일수는 수급인이 제출한 공사예정표 상의 주공정이 해당 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없다. 다만, 완성물의 사용일정계획을 감안하여 발주청과 협의하여 승인을 득하였을 경우에는 그러하지 아니하다.

1.5.2 제출

공사기간의 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 공사감독자와 협의하여야 한다.

1.6 설계변경

1.6.1 설계변경 사유

(1) 설계변경에 관련한 사항은『공사계약일반조건』의 관련규정에 의한다.

(2) 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피한 경우에는 발주청의 승인을 득하여 설계변경을 할 수 있다.

① 본 시방서『1.13 법령 및 규정의 준수』의 규정에 따라 설계도서의 변경이 수반되는 경우.

②『1-2-2 공사협의 및 조정의 1.2.2 협의 및 조정에 따른 설계변경』에 규정되어 있는 사항.

③ 설계도서와 당해 공사의 관급자재 구입계약서 및 시방서가 합치되지 않는 사항.

④ 기타 이 공사시방서의 각 절에 설계변경에 대하여 명시되어 있는 사항.

(3) 공사계약일반조건에 의거 발주청이 수급인에게 설계변경을 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야 하며 이를 이유로 계약에 대한 어떤 이의도 제기할 수 없다. 다만, 동 설계변경에 의하여 계약금액의 조정이 필요할 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 의하여 계약금액을 조정한다.

(4)  계류구 교체 변경에 따른 설계 변경 사항

① 계류구 점검 및 교체 기준

- 계류구(사슬) : 원지름 20%이상(30.4mm이하) 마모 시 교체

- 계류구 접환(환링, 샤클), 전환(스위블), 아연판 : 교체

② 점검결과에 기준치 미만 시 계류구 주요부품(사슬) 추가 교체 필요시 계약금액의 조정이 필요할 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 의하여 계약금액을 조정한다.

③ 인양 점검 결과 정상 시 재사용으로 인한 계약금액 감소 또는 규격 이하 시 추가 교체에 따른 계약금액 증가 필요시 관련규정에 의하여 계약금액을 조정한다.

1.6.2 변경요청서류

설계변경 요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은『공사계약일반조건』및『1-2-3 제출서류 및 공정관리의 1.3.11 기타제출 및 보고서류』에 따른다.

1.7 계약금액의 조정

『공사계약일반조건』의 관련규정을 따르되 본 시방서에 특별한 언급이 있을 경우에는 이에 따른다.

1.8 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차

1.8.1 청구 또는 요구의 통지

수급인이 본 공사의 수행과 관련하여 그 자신의 귀책이 아닌 사유로 손실이 발생하여 본 공사 계약의 관련항목을 근거로 계약금액의 증액을 가져오는 어떠한 청구나 요구를 하고자 하는 경우에는 계약의 다른 규정에도 불구하고 그 청구 또는 요구의 원인이 되는 사안이 처음으로 발생한 후 30일 이내에 공사감독자와 발주청에 그 같은 의사를 통지하여야 한다.

1.8.2 기록 및 입증서류의 보관

(1) 앞의 1.9.1항에서 언급되어진 사안이 발생하면 수급인은 이후에 제기할지도 모르는 청구 또는 요구를 뒷받침하는데 필요한 당시의 기록 및 서류를 유지하여야 한다.

(2) 공사감독자와 발주청은 앞의 1.9.1항에 의한 통지를 받으면 발주청의 책임여부에 대한 판단 없이도 당시의 기록이나 서류 등을 조사·검토하고 객관적으로 입증할 수 있는 자료를 요구하거나 기록을 유지하도록 지시할 수 있다.

1.8.3 청구 또는 요구의 입증

(1) 앞의 1.9.1항에 의한 통지를 하고 30일 이내에 수급인은 공사감독자와 발주청에 상세한 청구 또는 요구액의 산출내역서와 청구의 근거를 송부해야 한다.

(2) 청구 또는 요구를 제기하게 한 사안이 계속하여 지속될 때에는 앞의 (1)항에 의한 계산서는 중간산출내역서로 간주하며 수급인은 발주청이나 공사감독자가 요구하는 간격 또는 시기에 추가적인 중간산출내역서(이전의 금액을 포함)와 그 추가근거를 송부하여야 한다.

(3) 앞의 (2)항에 의하여 중간 산출내역서를 제시하는 경우에는 앞의 (2)항에 의한 사안이 종료되고 30일 이내에 최종 산출내역서를 송부해야 한다.

1.8.4 불이행

수급인이 제기하려고 하는 청구 또는 요구에 대해서 이 시방서의『1.9 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차』에서 정한 규정에 따르지 아니한 경우, 발주청은 수급인이 그의 청구 또는 요구의 권리의 상당부분을 포기한 것으로 간주할 수 있으며 발주청이 당시의 기록을 근거로 명확하게 입증된 부분에 한하여 청구 또는 요구에 대한 적절한 금액을 결정하였을 때 수급인은 이에 따라야 한다.

1.8.5 청구 또는 요구에 의한 계약금액 조정

발주청은 수급인이 제기한 청구 또는 요구의 내용이 정당하다고 판단하여 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 수급인이 제출한 산출내역서와 입증서류를 검토하여 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정한다.

1.10 공사중지

1.10.1 수급인은 관련법령에 따라 공사감독자의 지시가 있을 경우 공사감독자가 필요하다고 판단하는 기간과 방법에 따라 공사의 진행을 중지하여야 하며, 중지기간 중에는 공사감독자의 지시에 따라 수행된 공사의 부분 또는 전체를 적절하게 보호하여야 한다.

1.10.2 공사감독자의 공사중지 명령이 건설기술관리법 관련 규정에 근거하였을 경우에는 동 규정에 따라야 한다. 그 외의 경우로 공사중지를 지시할 경우에는 공사감독자는 공사중지 지시 이전에 발주청의 승인을 받아야 한다.

1.10.3 앞의 1.10.1에 의한 공사중지가 다음에 의하지 아니한 경우에는 발주청은 수급인의 요청이 있을 경우 수급인과 협의하여 적절한 공사기간과 손실비용을 보전해 줄 수 있다.

(1) 계약에 별도로 규정되거나 계약문서에 의해 명백히 의도된 경우

(2) 공사 중지가 수급인의 태만 또는 계약위반의 사유로 인한 경우나 수급인의 귀책사유로 인한 경우

(3) 공사 중지가 현장의 기상조건으로 인한 경우

(4) 공사 중지가 공사의 적절한 시행과 안전을 위하여 필요한 경우(공사의 중지가 공사감독자 또는 발주청의 잘못이나 행위로 인한 경우와 발주청의 위험사유에 의한 경우는 제외)

1.10.4 수급인이 공사를 중지하고자 할 경우에는 공사계약 일반조건 관련조항의 절차에 따라야 한다.

1.11 손실 또는 손상 복구의 책임

1.11.1 수급인의 복구책임

(1) 공사 시공 중에 1.11.3에 의한 규정된 발주청의 위험 이외의 원인으로 인하여 공사의 전체 또는 부분, 재료, 플랜트 등에 손실 또는 손상이 발생되는 경우에는 수급인은 그 원인을 불문하고 발생된 손실 또는 손상을 자신의 부담으로 복구하여야 한다. 복구는 계약의 관련 규정에 적합하고 발주청 또는 공사감독자의 요구수준에 부합되게 이루어져야 한다.

(2) 공사 시공 중 또는 하자 담보책임 기간 중 수급인에 의한 손실 또는 손상의 복구공사 시행과 관련, 그로 인하여 발생하는 모든 손실 또는 손상에 대한 책임은 수급인에게 있다.

1.11.2 발주자의 책임

(1) 공사 시공 중에 다음의 1.11.3항에서 규정한 발주청 부담의 위험이나 또는 복합적인 원인으로 인하여 발생하는 모든 손실 또는 손상의 경우 수급인은 공사감독자 또는 발주청이 요구하는 수준에 부합되게 손실 또는 손상을 복구하여야 한다.

(2) 앞의 (1)항에 의하여 소요되는 비용은 발주청의 부담으로 하되, 손실 또는 손상의 원인이 복합적일 경우에는 손실 또는 손상에 대한 발주청과 수급인의 책임의 비율에 따라 서로 협의하여 적절하게 결정되어지도록 한다.

1.11.3 발주청이 부담하는 위험은 다음과 같다.

(1) 공사계약 일반조건의 관련 규정에 따른다. 다만, 불가항력의 경우 수급인이 불가항력의 사유에 대하여 그 위험을 면하거나 최소로 하기 위하여 경험 있는 기술자로서 합리적이고 적절한 대책을 세운 경우에 한한다.

(2) 수급인이 제공하였거나 수급인에게 책임이 있는 설계의 일부가 아닌 공사설계에 기인하는 손실 또는 손상.

1.12 인명 및 재산에 대한 손상

1.12.1 수급인은 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 공사의 시행 및 하자보수와 관련하여 발생될 수도 있는 다음의 모든 손실과 청구에 대하여 변상의 책임을 진다.

(1) 인명의 사망 또는 상해

(2) 공사목적물 이외의 재산 (이하『1.12 인명 및 재산에 대한 손상』에서『재산』이라함)에 대한 손실이나 손상

1.12.2 앞의 1.12.1항에 의한 수급인의 변상은 다음의 1.12.3항에 의한 예외사항을 제외하고는 모든 청구, 소송, 손해배상, 비용, 부과금 기타 모든 경비를 포함한다.

1.12.3 앞의 1.12.2항에서 언급한 예외사항은 다음과 같다.

(1) 공사목적물의 전부 또는 일부에 의한 토지의 영구적 사용 또는 점용과 관련하여 발생하는 재산상의 손실이나 손상

(2) 계약내용에 의거한 공사의 시공 또는 하자보수 시행의 불가피한 결과로서 발생되는 재산상의 손실 또는 피해

(3) 발주청이나 그의 대리인 또는 피고용자, 수급인에 의하여 고용되지 않은 타 시공자의 행위나 과실로 인하여 발생한 인명, 재산상의 손실이나 피해 또는 이와 관련하여 발생하는 (2)항의 모든 경비

1.12.4 앞의 1.12.3의 (3)항과 관련, 수급인이나 그의 대리인 또는 피고용자가 피해나 손상 등에 책임이 있는 경우에는 수급인은 그에 상당하는 변상을 하여야 한다.

1.12.5 근로자의 사고 또는 상해

발주청이나 그의 대리인 또는 피고용자의 행위나 태만에 기인하는 경우를 제외하고는 발주청은 수급인 또는 하수급인이 고용한 근로자나 다른 사람에게 지불하는 손해 또는 보상 등의 일체의 책임을 지지 않는다.

1.13 법령 및 규정의 준수

1.13.1 수급인은 모든 점에서 다음의 규정을 준수하여야 하며 이는 통지의 발급과 수수료 지불 등을 포함한다.

(1) 대한민국의 법령 또는 공사의 실시와 준공, 하자보수 등과 관련하여 적법하게 구성된 기관의 규칙이나 조례, 훈령(해양수산부와 지방해양수산청을 포함한다)

(2) 공사의 시행과 관련하여 어떤 식으로든 재산이나 권리가 영향을 받게 되는 공공기관 또는 회사의 규칙이나 규정.

1.13.2 수급인은 앞의 1.13.1항의 규정 등의 위반으로 인한 모든 종류의 책임과 벌칙에 대하여 발주청에게 책임이 없도록 해야 한다.

1.13.3 수급인은 이 공사시방서에서『관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서는 같다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다.』라고 명시 또는 그와 유사한 취지의 별도 명시가 있지 않는 한, 이 공사시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하되 발주청에서 특별히 요구하는 경우에는 이에 따라야 한다.

1.14 교통 및 인접재산의 간섭

1.14.1 공사시행과 관련한 모든 작업은 계약의 조건을 이행하는 한 다음의 사항이 불필요하게 또는 부적절하게 간섭되지 않도록 시행되어져야 한다.

(1) 공공의 편의시설

(2) 발주청 또는 기타 누구의 소유에 관계없이 재산 또는 공공도로, 사설도로, 보도 등으로의 진출과 점용 및 사용

1.14.2 수급인은 수급인 자신에게 책임이 있는 앞의 1.14.1항과 관련하여 발생하는 모든 청구, 소송, 비용, 부과금 및 경비에 대하여 일체의 책임을 져야한다.

1.14.3 수급인은 공사시행과 관련하여 사용하는 도로, 교량 등이 손상 또는 파손되지 않도록 적절한 예방수단을 강구하여야 하며 공사용 자재 또는 장비 등의 운송으로 인하여 도로, 교량 등이 파손 또는 손상됨으로서 발생하는 변상 등 모든 법적인 책임을 짐으로서 발주청에 손해가 없도록 하여야 한다.

1.14.4 앞의 1.14.1 내지 1.14.3항은 수상운송의 경우에는 갑문, 안벽, 항로 등도 대상시설물에 포함하는 것으로 해석한다.

1.15 타 시공자에 대한 편의 및 시설 등의 제공

1.15.1 수급인은 공사감독자 또는 발주청의 요구에 따라 다음의 사람들이 그들의 공사 시행을 위하여 필요한 모든 적절한 편의를 제공하여야 한다.

(1) 발주청에 고용된 타시공자와 근로자

(2) 발주청의 직원

(3) 공공기관 등에서 본 공사의 현장이나 인근에서 본 계약에 포함되지 아니한 작업을 시행하거나 발주청이 본 공사와 관련하여 부수적으로 체결한 계약을 시행하는 근로자

1.15.2 앞의 1.15.1항에 따라서 수급인은 발주청이나 공사감독자의 서면요구가 있으면 다음 사항을 타시공자, 발주청 또는 공공기관에게 제공하여야 한다.

(1) 수급인이 유지관리에 책임이 있는 도로나 통로의 이용

(2) 현장에 있는 수급인의 장비 또는 가설공사물의 사용에 대한 허용

(3) 수급인이 제공할 수 있는 모든 종류의 역무

1.15.3 수급인이 앞의 1.15.2항에 규정된 사항을 제공함으로서 추가비용이 발생될 때에는 발주청은 이에 대한 비용(이윤을 제외한다)을 수급인에게 지급할 수 있다.

1.16 자재, 설비 및 시공기술

1.16.1 자재, 설비 및 시공기술의 품질

(1) 모든 자재, 설비, 시공기술은 다음을 충족시켜야 한다.

① 계약에 기재되거나 규정된 종류의 것으로서 공사감독자 또는 발주청의 지시에 일치하여야 한다.

② 제조, 제작, 조립 또는 준비 장소나, 공사현장, 계약에 명시된 장소, 기타 지정된 다른 장소에서 수시로 공사감독자 또는 발주청이 지시하는 시험을 받아야 한다.

(2) 수급인은 자재나 설비의 시험 및 검사, 검측에 통상적으로 필요한 지원, 노무, 전기, 연료, 창고, 선박, 기구 및 기기를 제공하여야 하며, 공사감독자나 발주청이 요구하는 시험 등을 위하여 필요하다고 지시하는 경우 공사에 사용하기 전에 자재의 견본을 시험용으로 공급하여야 한다.

1.16.2 견본의 비용

모든 견본은 계약에 명백하게 명문화되어 있거나 규정되어 있는 경우에는 수급인의 비용부담으로 공급되어야 한다.

1.16.3 시험비용

다음과 같은 시험을 실시하는데 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

(1) 계약에 의하여 명백하게 명문화되거나 규정되어 있는 경우

(2) 재하시험이나 완공 또는 부분적으로 완공된 공사에 대하여 당초 설계가 의도한 목적에 부합되는지를 확인하기 위한 시험인 경우 수급인이 제출한 입찰서등에 그와 같은 비용이 계상되었거나 설계서등 계약문서에서 수급인이 그 같은 비용을 계상할 수 있을 정도의 내용으로 명시되어 있는 경우

1.16.4 규정외의 시험비용

(1) 공사감독자나 발주청이 요구한 시험이 다음과 같은 경우에는 그 비용(이윤을 제외한다)을 발주청이 부담한다. 또한 이로 인하여 공기연장의 사유가 발생하였을 경우에는 발주청은 적절한 공기의 연장을 허가하여야 한다.

① 계약에 명문화되거나 규정되어 있지 않은 경우

② 비록 계약에서 명문화되거나 규정되어 있을 경우라도 공사현장 또는 제조, 제작, 조립장소 또는 준비 장소가 아닌 다른 곳에서 공사감독자 또는 발주청의 지시에 따라 시험을 실시할 경우

(2) 앞의 (1)항에 의한 시험의 경우라도 시험의 결과가 공사감독자나 발주청에서 만족할 수 있도록 계약의 관련규정에 부합되지 않을 경우에는 수급인이 그 비용을 부담하여야 한다.

1.16.5 검사 및 시험

(1) 공사감독자는 자재나 설비가 제조, 제작, 조립 또는 준비되는 공장 등 모든 장소에 적절한 시간대에는 언제든지 출입할 수 있으며 수급인은 이를 위하여 모든 지원과 편의를 제공하여야 한다.

(2) 공사감독자는 제조, 제작, 조립, 준비 중에 있는 자재나 설비를 검사하고 시험할 권리가 있다. 만약 그 장소가 수급인의 장소가 아닌 공장이나 기타, 다른 장소일 경우에는 수급인은 공사감독자가 그 장소에 출입하여 검사 또는 시험을 시행할 수 있도록 필요한 허가 등을 얻어야 한다.

(3) 공사감독자가 앞의 (2)항에 의하여 시행하는 검사나 시험은 계약에 근거한 수급인의 의무나 책임을 면제시키지는 아니한다.

(4) 수급인은 계약에 규정된 바에 따라 자재나 설비에 대한 검사나 시험을 실시하기 위한 일시와 장소에 관해서 공사감독자와 합의하여야 한다. 공사감독자는 수급인에게 검사를 시행하거나 시험에 입회한다는 의향을 적어도 24시간 전에 통지하여야 한다. 공사감독자가 합의한 일시에 입회하지 않고 또한 다른 지시가 없을 경우에도 수급인은 시험을 진행할 수 있으며, 이 경우의 시험은 공사감독자가 입회한 것으로 간주하고 수급인은 시험성과에 대하여 정당하게 확인된 사본을 공사감독자에게 제출해야 하며 공사감독자는 그 시험성과를 정당한 것으로 받아 들여야 한다.

1.16.6 불합격 자재 또는 설비의 거부

(1) 앞의 1.16.5항에서 합의된 일시와 장소에서 자재와 설비가 검사나 시험을 위하여 준비되어 있지 않거나 시험 또는 검사의 결과가 결함이 있거나 계약에 합치되지 않을 때에는 동 자재 또는 설비의 사용을 거부하고 이를 수급인에게 즉시 통보하여야 한다. 이 통지에는 거부의 사유가 포함되어야 한다.

(2) 수급인은 공사감독자로부터 거부의사를 통보받은 경우 신속하게 동 자재 또는 설비의 결함을 제거하거나 계약의 내용에 부합되도록 하여야 한다. 또한 공사감독자의 요구가 있는 경우 거부된 자재 또는 설비에 대하여 동일한 조건으로 시험을 시행 또는 반복하여야 한다.

(3) 시험의 반복으로 인하여 발주청에 야기되어진 비용이 있는 경우에는 수급인이 이를 부담하여야 한다.

1.16.7 검사의 의뢰

공사감독자는 자재나 설비의 검사와 시험을 외부기관이나 독립적인 자에게 의뢰할 수 있다. 이러한 의도는 적어도 7일전에 수급인에게 통보되어져야 한다.

1.16.8 복개, 피복, 매몰 또는 차폐 전 공사의 검사

(1) 공사의 어느 부분도 공사감독자의 승인 없이는 복개, 피복, 매몰, 차폐 등(이하 이 조항에서『차폐 등』이라 한다)을 해서는 안 되며, 수급인은 차폐 등을 하려고 하는 부분과 후속공사가 이어질 기초부분에 대한 검사 또는 검측을 시행할 충분한 여유를 공사감독자에게 주어야 한다.

(2) 수급인은 상기 (1)항에서 언급한 공사의 부분 또는 기초에 대한 검사 또는 검측을 받을 준비가 되었을 때에는 공사감독자에게 이를 통보하여야 한다. 공사감독자는 통보를 받았을 경우 부당하게 지체하지 않고 검사 또는 검측을 하기 위해 입회하여야 한다. 다만, 공사감독자가 검사나 검측이 불필요하다고 판단하여 수급인에게 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

1.16.9 차폐물 등의 철거 또는 제거

(1) 수급인은 공사감독자가 수시로 지시하는 바에 따라 공사의 어느 부분의 차폐물을 철거 또는 제거하고 해당부분을 보수 및 차폐 또는 복개하여야 한다.

(2) 만약, 철거 또는 제거된 부분이 앞의 1.16.8 항 규정에 따라 차폐 또는 복개 등이 되었고 계약에 부합되게 시공되었다면, 발주청은 차폐 등에 소요되는 비용을 포함한 전체비용(이윤을 제외한다)을 계약금액에 가산하여야 한다. 이와 다른 경우에는 모든 비용을 수급인이 부담하여야 한다.

1.16.10 부실공사, 자재 또는 설비의 제거

(1) 공사감독자는 수시로 다음 사항에 관한 지시를 내릴 권한을 갖는다.

① 공사감독자의 견해로 계약에 위배된다고 판단하는 자재와 설비를 지시된 기간 내에 공사 현장으로부터 철수.

② 적절하고 적합한 자재 또는 설비로의 대체.

③ 이전에 시험을 실시하였거나 기성을 받은 부분이라도 공사감독자의 견해로 자재나 설비 또는 시공기술, 수급인에 의한 설계 또는 수급인이 책임이 있는 설계에 의한 공사가 계약에 합치되지 않는 경우 이들의 제거와 적절한 재시험.

1.16.11 수급인의 준수 태만

(1) 수급인(수급인의 고용인, 대리인, 하수급인등을 포함)이 지시된 시간 내에 또는 합리적이고 적절한 시간 내(시간에 대한 지시가 없을 경우)에 지시된 사항을 이행하는데 태만한 경우에는 발주청은 다른 사람을 고용하여 동 지시사항을 이행할 수 있게 할 권리가 있다.

(2) 상기 (1)항에 의하여 소요된 비용은 발주청이 수급인에게 청구하며 동 비용은 기성금 등 발주청의 수급인에 대한 채무에서 공제할 수 있다.

1.17 공사의 착공과 지연

1.17.1 공사의 착공

수급인은 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공 시에는 본 시방서의『1-2-3 제출서류 및 공정관리』에서 규정하는 서류 등을 제출하여야 한다.

1.17.2 공사현장의 점유 및 출입

(1) 발주청은 계약에 규정되어 있는 경우에는 계약내용에 따라 공사수행에 지장이 없도록 적어도 수급인이 수시로 출입 및 점유할 필요가 있는 넓이의 공사현장을 제공하여야 한다.

(2) 발주청은 계약에 명시되어 있지 않더라도, 적어도 수급인이 그가 제출한 공사공정예정표에 따라 공사를 착수하고 시행하는데 필요한 만큼의 공사현장에 대한 점유와 이의 출입권을 제공하여야 한다.

1.17.3 공사현장 인도의 불이행

발주청의 과실로 앞의 1.17.2항에 의한 공사현장을 인도하지 못하므로 인하여 공기지연 또는 비용이 발생하게 될 경우에는 공기연장 또는 비용(이윤을 제외한다)을 수급인의 신청에 따라 지급할 수 있다. 다만, 공기연장의 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 따르며, 손실 비용의 경우에는 수급인은 본 시방서『1.9 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차』를 따른다.

1.17.4 공사현장 출입

수급인은 공사현장 출입에 필요한 특별 또는 일시적 통행권 또는 통행로에 대한 모든 비용과 부과금을 부담하여야 한다. 또한, 수급인은 공사수행을 위하여 필요로 하는 추가시설(공사현장 밖의 시설 등)은 자신의 비용으로 준비하여야 한다.

1.17.5 공정지연

(1) 수급인에게 공사기간을 연장해줄 사유가 없다고 하더라도 공사감독자는 공사의 전체 또는 특정 공종의 공사 진행이 지연되고 있어 준공기한을 준수할 수 없다고 판단할 때에는 이를 수급인과 발주청에 통지하여야 한다.

(2) 수급인은 앞의 (1)항의 통지를 받은 때에는 공사감독자의 승인을 받아 부진공정을 만회하기 위한 조치를 취해야 한다. 이러한 조치의 시행을 위하여 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

(3) 앞의 (2)항에 의한 공정만회 조치를 위하여 야간 및 휴일작업이 필요할 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 따른다. 다만, 1.17.5항의 책임을 위하여 추가로 공사감독(감리 및 발주청 직원에 의한 공사감독)을 위하여 소요되는 비용이 있을 경우 발주청은 수급인과 협의하여 추가비용을 결정하고 이 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

1.18 하자책임 등

1.18.1 도장 및 인양(보수)공사의 하자책임

(1) 도장 및 인양(보수)공사공사는 설계서에 따라 공사가 완료되어 계약내용에 의하여 적정하게 준공검사가 완료되었을 경우에 수급인은 하자에 대한 책임을 지지 아니한다.

(2) 하자담보 책임기간 : 2년

(3) 하자보수 보증금율 : 100분의 2

1.18.2 수급인에 의한 하자조사

(1) 하자책임기간의 종료 전에 하자 등의 결함이 있어 발주청에서 수급인에게 하자보수 지시를 할 경우 수급인은『공사계약일반조건』의 관련 규정에 따라 하자보수를 하되, 발주청의 지시를 수용할 수 없을 경우에는 공사감독자의 지시를 받아 그 원인을 조사할 수 있다.

(2) 하자의 원인이 계약에 의해서 수급인에게 책임이 있는 경우가 아니라면 발주청은 공사감독자 및 수급인과 협의하여 조사비용을 수급인에게 지불하여야 한다. 하자의 원인이 수급인의 책임인 경우에는 조사비용 및 보수비용은 수급인이 부담하여야 한다.

1.19 관련규준 등의 비치

1.19.1 수급인은 항만공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사무실에 아래의 규준 등을 상시 비치하여야 한다.

(1) 본 공사와 관련된 계약문서 사본 일체

(2) 관련 지급자재 구입계약서 및 자재시방서

(3) 본 공사와 관련된 계약 및 건설 관련 법규 및 조례

(4) 관련 한국산업규격(KS)

(5) 적격심사서류 및 부대입찰심사서류

(6) 기타『1-2-3 제출서류 및 공정관리』에 명시되어 있는 서류

1.20 용어의 해석

1.20.1 본 공사시방서에 사용된 용어의 해석은 아래의 우선순위에 따라서 그에 명시된 용어의 정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

(1) 계약문서(국가를당사자로하는계약에 관한법 및 동법 시행령, 시행규칙 포함)

(2) 건설기술관리법 및 동법 시행령 및 시행규칙

(3) 기타 건설관련법규

(4) 표준시방서

(5) 토목공사 등에 대한 전문용어사전

(6) 국어사전

1.21 공사준공

1.21.1 적용 범위 : 이 항은 공사 준공 절차, 최종청소, 조정, 공사기록문서, 운전 및 유지관리자료 그리고 개별 제품시방에서 직접 참조할 수 있는 제품보증 등에 관한 일반적인 요건을 제시한다.

1.21.2 준공 절차

가. 수급인은 준공예정일 30일 전에 예비 준공검사를 실시하여 공사시설물의 완성을 확인하고 공사감독자에게 준공계획서를 작성 제출하여야 한다.

나. 수급인은 다음의 제출 자료를 발주자 또는 공사감독자에게 제출해야 한다.

(1) 보관용 도면 : 최초 도면으로부터 변경된 작업범위를 표시한 도면과 최종 시공 제작도면(CD-ROM 포함)

(2) 보관용 시방서 등 : 공사 기간 중 각종양식으로 발행한 추가보고서, 설계와 공사변경 명령 및 이와 유사한 변경사항이 포함된 자료

(3) 시공 상세도면

(4) 준공사진이 포함된 공사사진첩 및 CD

(5) 최종현황 측량보고서 : 측량 원부 및 원도면이어야 한다(실시할 경우)

(6) 기타 공사감독자 또는 발주자가 요구하는 최종기록 자료

(7) 공사 중 발생한 사고에 대한 현황을 정리한 보고서(유형, 원인 및 조치결과 등)

다. 조정된 계약금액, 기 수령액 및 수령 잔액을 명기한 최종 기성부분 신청서를 제출해야 한다.

라. 발주자는 준공완료 전이라도 시설물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

마. 도구, 부품, 잉여자재 및 이와 유사한 품목과 자물쇠 시스템을 최종 확정하여 발주자에 그 열쇠를 양도하고 이에 대한 참고사항을 알려준다.

바. 시설물의 유지관리 지침과 각 시스템에 대한 시험운전을 끝내고 발주자에 유지관리지침서를 작성·정리하여 제출한다.

Ⅱ.특별시방서

1. 항로표지시설(등부표) 공통사항

1.1 일반사항

1.1.1 개요

이 시방서는 항로표지(등부표)의 인양점검(보수) 및 보수공사에 적용한다.

1.1.2 적용법령

가. 항로표지기능및규격에관한기준(해양수산부 고시 제2013-104호)

나. 표준형부표제작및품질관리기준에관한규정(해양수산부훈령 제128호)

다. IALA 해상부표식 (Maritime Buoyage System Rules)

라. 기타 본 공사와 관련된 관계법령, 훈령, 고시, 예규, 지침 등

1.1.3 대관업무

가. 사설항로표지현황변경신청서(현황변경시)

나. 동 해역을 관장하는 관할지방청(군산지방해양수산청)과의 항로표지 배치에 따른 적정성 확인

다. 수급인은 위 항의 모든 필요한 수속을 처리하여야 한다.

1.1.4 사설항로표지의 운영

가. 사설항로표지 준공확인

나. 사설항로표지 항로고시 요청(항로표지법 제11조)

다. 사설항로표지 운영(고시 및 기능유지)

1.1.5 시공계획서 제출

가. 수급인은 설계도서 및 시방서를 검토한 후 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 설계 및 사양변경은 별도의 승인을 받은 후 제작하여야 한다.

1.1.6 시험 및 검사

가. 수급인은 설계도서 및 시방서를 검토한 후 각 항목별 또는 각 공정별로 시험 및 검사계획서를 제출하여야 한다.

나. 자재는 반입전 성적서를 첨부하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

다. 제작 완료된 재료는 제조 공장에서 검사를 받아야 한다.

라. 국토해양부에서 규정된 품목에 대해서는 정부에서 지정한 연구기관 또는 공인시험기관에서 시험을 필하고 시험성적서 원본을 제출하여야 한다.

1.1.7 설치 및 시운전

가. 설치공사는 인원 및 장비투입계획서를 감독자에 제출하여 승인을 받은 후 감독자 입회하에 시공하여야 한다.

나. 설치된 항로표지는 점등 및 설치위치를 반드시 다시 확인한다.

1.1.8 문서관리

가. 문서의 제출

1) 모든 문서는 한글로 작성하며, 외국장비를 설치할 경우에는 해당 장비 제작사에서 발행한 지침서를 함께 제출하여야 한다.

2) 제작설치의 승인을 위한 설계도서는 계약 일로부터 10일 이내에 제출한다.

3) 설계변경 시 변경된 설계도서의 수정 및 교정의 책임도 수급인이 져야 한다.

4) 준공과 동시에 준공설계서 및 도면을 정리하여 제출한다.

나. 사진대장 제출

1) 각 공정별로 주요작업 진행사항을 사진 촬영하여야 한다.

2) 준공과 동시에 준공사진대장을 제출하여야 한다.

1.1.9 예비용 항로표지용품

가. 예비용 항로표지용품의 수량은 “예비용 항로표지용품 확보기준”(항로표지법시행규칙제11조)의 적합해야 한다.

나. 시방서에 맞게 제작되어야 한다.

1.1.10 준공검사

가. 수급인은 공사 완료 후 감독자에게 준공검사를 받아야 한다.

나. 모든 장비(장치)는 설계도서 및 해양수산부의 기준에 적합해야 한다.

제2장 공사용 등부표

1. 등부표 및 부대시설 개요

1.1 일반사항

공사 중 부근을 항해하는 선박의 안전유도와 공사구역을 침범하는 선박이 없도록 접근위험 및 출입금지를 알리는 기능으로 그 위치의 선에 정확성이 요구되며 공사용 등부표의 설치시기는 해상 작업 착수전이나 오탁방지막 설치와 동시에 설치되어야 한다.

1.2 등부표 인양점검(보수) 현황

구 분	규 격	수 량	설치장소	비 고
등부표	LL-26	4기	신시배수갑문전후방 2.000m해상 : 4기 가력배수갑문전방(내) 2.000m해상 : 2기	부대시설 일체포함
	LS-24	2기	가력배수갑문전방(외) 2.000m해상 : 2기

* LL-26, LS-24 예비품 각 1기를 도장 및 보수 후 해상에 대체 설치, 최종 인양 등부표는 창고 보관(최종 인양 등부표의 사슬은 녹제거 및 이물질 제거 후 방청 처리하여 창고 보관)

2. 공사용 등부표의 제원

2.1 부표 : LL-26, LS-24

2.1.1 두표 : X자형

2.1.2 레이다반사기 : AL 10방향

2.1.3 사슬 : Ø38

2.1.4 침추 : 콘크리트 4톤 2EA

2.2 해상용등명기 : LED-200

2.3 태양전지 : 80W

2.4 축전지 : 12V 100Ah 4EA

2.5 충방전조절기 : 12V 10A

3. 등부표 도장공사

3.1 “표면처리”는 이물질과 녹을 완전 제거한 후 작업을 하여야 한다.

3.2 “전처리도장”은 금속전처리 도료 또는 동 품종이상으로 도장하여야 한다.

3.3 도장 표면은 다음 조건을 만족하여야 한다.

3.3.1 도장된 표면은 매끄러워야 한다.

3.3.2 표면에는 흘러내린 자국, 울퉁불퉁함이 없어야 한다.

3.3.3 표면에 들뜨기, 변색  또는 오손 등이 없어야 한다.

3.3.4 표면에는 균열, 흠 등이 없어야 한다.

3.4 다음과 같은 경우에는 도장작업을 하여서는 아니 된다.

3.4.1 온도가 5℃이하일 때

3.4.2 상대습도가 80%를 초과하는 경우

3.4.3 바람에 모래와 먼지가 날릴 때

3.4.4 일출3시간 이내 일몰 3시간 전(단, 옥내 작업의 경우 제외)

3.5 일반적인 부표의 도장은 다음 기준에 따라야 한다.

3.5.1 표체 전체 : 무기질 ZINC도료(녹막이 방지용), 에폭시계 도료(방청 A/C용, 중도용) 각1회 도장

3.5.2 수선하부 : 염화고무계 도료(접착제 상부용), 선저도료(방오 A/F) 각1회 도장

3.5.3 수선상부 : 폴리우레탄계 도료(상도용 마감도료 2회) 도장

3.6 세라믹 도료 등 특수 도료를 사용하는 경우에는 도장 특성에 따른 도료 제조회사의 별도의 기준에 따라야 한다.

3.7 도료의 색도 기준은 다음과 같다.

표준색 이름 (KSA0011)	KS기호 (KSA0062)	비고
빨강 초록 노랑 파랑 주황 검정	6R 4.5/14 2.5G 4/10 1.7Y 8/11.7 5PB 3/12 2.5YR 6/14 N1.0	홍색 녹색 황색 청색 오렌지 검정

3.8 도장작업에 사용할 도료는 도장작업 전에 감독관에게 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

4. 시험 및 검사

4.1 “재료검사”라 함은 주요 재료에 대해서 가공 전에 외관, 치수, 규격 등을 검사하는 것을 말한다.

4.2 “용접검사”라 함은 용접한 부위를 검사 기준에 따라 시행하되 제조과정 중 중간검사를 시행하고, 용접 완료 후에는 다음 각목에 대하여 검사하는 것을 말한다.

4.2.1 Crack 완전제거, 수정시공 할 것.

4.2.2 Overlap(겹치는 부분)3.0㎜이하로 할 것.

4.2.3 Undercut(절단부위)최소화 할 것.

4.2.4 Porosity(각종구멍)제거 및 Tack Weld(용접 찌꺼기)제거 할 것.

4.2.5 용접사는 용접 전 용접시험 통과하고 및 용접관련 자격증(기능사 이상)을 보유한 자가 실시 할 것.

4.3 “제조검사” 라 함은 완성 단계에서 각부의 치수, 구조, 기능 등에 대하여 검사하는 것을 말한다.

4.4 “치수검사”라 함은 도면대로 제작되었는지에 대하여 검사하는 것을 말한다.

4.5 “기압시험”은 아래와 같이 시행하는 것을 원칙으로 한다.

4.5.1 공기압 시험은 등부표에 가압을 천천히 유입하여 세제류(액체비누․ 비누거품 등)를 청수에 희석한 다음 붓으로 용접된 각부에 도포 하여 공기의 누출(거품의 생성)여부와 기타 이상 유무를 육안으로 검사하여야 한다.

4.5.2 공기압 유지시간은 15분 이상으로 하며 규정압력(1㎏/㎠)이상을 초과하여서는 안 된다.

4.6 “도장검사”는 다음 각목과 같이 시행한다.

4.6.1 “중간검사”란 칠 회수마다 도장하여 검사하는 것을 원칙으로 한다.

4.6.2 “완성검사”란 가공조립 및 도장 공정이 완료된 후 제작자의 공장에서 실시한다.

4.7 “준공검사”란 완공된 후에 설계서에 따라 제작되었는지 여부의 검사를 말하며 지정된 납입장소에서 실시하는 것을 말한다.

제3장 등부표 인양 및 설치

1. 일반공사

본 공사에 투입되는 장비는 예인선(134kw), 대선(300t), 크레인(타이어, 40t), 발전기(25kW) 로 한다.

공사진행에 차질이 없도록 모든 장비는 최상의 성능을 발휘할 수 있도록  작업전 철저히  점검, 정비하여

장비고장으로 인한 공기지연 및 안전사고 발생시 계약상대자가 전적으로 책임진다.

본 공사중 인근 해상에 항해하는 선박과의 간섭 및 민원이 발생되지 않도록 관련 법규를 준수한다.

1.1 적용범위

1.1.1 해협, 수로, 소해수로, 관제항로(준설항로 포함), 항만 등 협소한 구역 또는 위험한 해면을 항행하는 선박을 안전하게 목적지에 유도하기 위한 목적 외에 가항수로의 측방한계, 자연위험물 및 침선 등의 장애물, 항해자에게 중요한 기타의 구역 또는 지물의 표시, 신 위험물 등에 설치하는 등부표(부표)「이하 부표라 칭한다.」에 적용한다.

1.1.2 이 절에서 부표란『IALA 해상부표식』의 일반원칙과 지침서에 규정된 것을 말한다.

1.1.3 부표, 등표, 등주의 방향

(1) IALA 해상부표식에 있어서 수원의 기준은 IALA 해상부표식 지침서 5-2-2 부표의 방향 에 의거 아래와 같이 정한다.

(2) 항해자가 바다로부터 항, 강, 하구 기타 수로에 접근할 경우 취하는 일반적인 방향을 규정한다.

(3) 기타 해역에 있어서는 관계당국이 인접국과 협의하여 그 방향을 상세히 결정한 방향으로 하고 원칙적으로 육지를 중심으로 시계방향으로 하여야 한다.

(4) 한국연안의 일부 구역에 있어서는 아래 기준에 의한다.

1.2 제출물

1.2.1 수급인은 당해 공종 착수 3일전까지 시공계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

1.2.2 자재 공급전 제출물

KS 표시품, 승인품 또는 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질 인증을 받은 재료인 경우는 그 제품을 증빙하는 증빙서류 사본

1.2.3 검사 및 시험

(1) 사슬, 고삐사슬, 샤클, 스위블의 시험은 선박용 쇄사슬 검사 규격규정, 선급 및 강선규칙에 적합하여야 한다.

(2) 주요 재료에 대해서는 가공 전에 한국산업규격에 의한 공인기관의 시험증명서와 외관, 치수, 규격 등을 검사하여야 한다.

(3) 용접한 부위에 대하여는 육안 및 게이지를 이용하여 검사하되 필요시에는 비파괴검사를 하여야 한다.

(4) 제작 단계부터 완성 단계에 이를 때 까지 각부의 치수, 구조, 기능등이 도면대로 제작되었는지에 대하여 단계별로 검사하여야 한다.

(5) 부표의 수밀성 여부는 다음과 같이 현장에서 공기압시험을 하여야 한다.

① 공기압 시험은 등부표에 공기 압력을 가하여 천천히 유입하면서 비누거품 등을 용접된 각부에 도포하여 공기의 누출(거품의 생성)여부와 기타 이상 유무를 육안으로 검사하여야 한다.

② 공기압 유지시간은 15분 이상으로 하며 규정압력(5~7kg/㎠)이상을 초과하여서는 안 된다.

1.2.4 시험성적서

이 절의 시방 2.2.1 시험 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어있는 항목에 대하여 시험성과표를 작성, 현장대리인의 서명 날인 후 공사 감독자에게 제출하여야 한다.

1.2.5 품질시험 성과표

(1) 이 절의 시방 2.2.1 시험 규정에 의하여 현장 시험을 하도록 되어있는 항목에 대하여 시험성과표를 작성 현장 대리인의 서명 날인 후 공사 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 시험시공 장소는 공사 감독자와 협의하여 결정한다.

1.3 주요내용

1.3.1 측방표지

1.3.2 방위표지

1.3.3 고립장애표지

1.3.4 안전수역표지

1.3.5 특수표지

1.3.6 신장애물표지

1.4 참조 규격

1.4.1 관련 법규

(1) IALA 해상부표식 (1982년 5월)

(2) IALA 해상부표식 지침서 (1982년 5월)

(3) 표준형 부표제작 및 품질관리 기준에 관한 규정(해양수산부 훈령 제251호)

(4) 항로표지 업무편람 제6절 (부표의 설치 및 안정계산)

(5) 항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준(해양수산부 고시 제2004-15호)

(6) 항로표지 고시에 관한 업무취급 요령 (해양수산부 예규 제15호)

1.5 시스템의 설명

IALA 해상 부표식(B지역)의 종류, 의미, 도색, 형상 및 등질에 대하여는 본 시방서 1.3.1 IALA 해상부표식 및 1.3.2 IALA 해상부표식 지침서에 의한다.

2. 재료

부표에 사용되는 자재와 부품은 아래 규격에 적합한 제품 또는 동등이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 자재 및 부품

2.1.1 등명기 :  해상용 등명기(250㎜, 200㎜, 155㎜) 시방서에서 정한 제품

2.1.2 부표

(1) 항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준에 의한다.

(2)「IALA 해상부표식 지침서」5-3-3에 의한다.

2.1.3 계류구 : 항로표지 업무편람 제6절 부표의 설치 및 안전계산 중 6-3 부표계류구 기준에 의한다.

2.1.4 전원시설(전원 케이블은 전량 신제품으로 교체 실시)

(1) 축전지 : 해양수산부 항로표지 업무편람 제4장 3-2 축전지에 의한 제품

(2) 태양전지 : 해양수산부 항로표지 업무편람 제4장 3-3 태양광발전 시스템에 의한 제품

2.2 재료 품질관리

2.2.1 시험

(1) KS 표시품 등인 경우에는 시험을 생략한다.

(2) 아래제품이 KS 표시품이 아닌 경우에는 아래 품목에 대하여 공인시험기관의 시험을 실시 하여야 한다.

① 200㎜ 해상용 등명기

② 250㎜ 해상용 등명기

③ 기타 등명기는「12-2-2 무인등대 설치공」의 2.2.1 시험 (2) ③ 에 의한 제품

2.2.2 반입자재 검수

(1) 수급인은 자재현장 반입 전에 공사 감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안검사 및 성능에 대한 시험성적서 확인으로 한다.

2.2.3 시공상태 확인

(1) 수급인은 부표 설치공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공 상태 확인 항목

① 부표의 안정 상태

② 항로표지의 명칭, 위치, 등질, 광달거리, 등고, 도색 등이 허가사항과 일치 여부

③ 접지상태, 배선, 전선, 케이블 단말처리 상태

3. 시공

3.1 부표 설치

3.1.1 부표를 설치할 때에는 아래에 의한다.

(1) 위치결정 : 등부표의 설치위치 결정은 고시된 위치에 설치한다

구 분	수심	북 위	동 경	비 고
신시배수갑문 A호 등부표 Type : LL-26	20m	35〫 48‘ 10.0“	126〫 27‘ 45.0“	인양 대상
신시배수갑문 B호 등부표 Type : LL-26	10m	35〫 49‘ 49.0“	126〫 29‘ 38.0“	인양 대상
신시배수갑문 C호 등부표 Type : LL-26	30m	35〫 49‘ 15.0“	126〫 30‘ 07.0“	인양 대상
신시배수갑문 D호 등부표 Type : LL-26	10m	35〫 47‘ 47.0“	126〫 28‘ 32.0“	인양 대상
가력배수갑문 A호 등부표 Type : LS-24(가력해측)	4m	35〫 43‘ 32.0“	126〫 30‘ 13.0“	인양 대상
가력배수갑문 B호 등부표 Type : LL-26	10m	35〫 44‘ 58.0“	126〫 31‘ 46.0“	인양 대상
가력배수갑문 C호 등부표 Type : LL-26	10m	35〫 44‘ 34.0“	126〫 32‘ 36.0“	인양 대상
가력배수갑문 D호 등부표 Type : LS-24(가력해측)	4m	35〫 42‘ 47.0“	126〫 31‘ 14.0“	인양 대상

(2) 부표의 종류결정 : 부표의 종류결정은 설치지점의 해저지형이나 지질, 수심, 조류, 파고 및 풍력 등을 충분히 조사 검토한 후 부표의 형식, 계류구, 부속장치 등의 종류와 크기를 결정하여야 한다.

(3) 설치기준 : 부표의 설치기준은 설치장소의 조건에 따라 다르므로 표지간의 간격 등을 신중히 검토 설치하여야 한다.

(4) 일반적인 설치기준

① 선박간의 충돌, 암초 또는 장애물에 승양 또는 좌초의 위험이 많은 곳의 장소에는 서로 기능에 장애가 없도록 기수를 더 설치할 수 있다.

② 항로의 항계 상에는 시정이 일반적인 조건하에서 항해자의 안고가 1.5m보다 높을 경우 주간에는 수로의 양측에 2개 이상의 부표가 볼 수 있어야 하고 야간에는 2개 이상의 등화가 볼 수 있도록 하여야 한다.

③ 항로상 좌·우 한계선상에 설치해야 할 부표간의 평균 거리는 해역의 조건에 따라 아래와 같다.

- 외해 : 3마일 이내

- 준외해 : 1마일 내외

- 내해 또는 시계 불량한 지역 : 0.5마일

④ 부표의 배치선은 가능한 직선이거나 완만한 곡선이어야 한다.

⑤ 수로상 변침점에는 만곡부의 내측법선에 설치하여야 한다.

(5) 준설항로 및 협소한 자연적 항로상 설치기준

① 준설항로는 준설법선 내측에 침추를 바짝 붙여 설치한다.

② 자연적인 항로는 가항수로의 한계선에 설치한다.

③ 항해에 위험을 초래하는 항로 내 또는 항계부근에 존재하는 고립장애물에는 필요한 경우 설치한다.

④ 계획수심을 유지 관리하고 있는 준설항로 또는 하천항로에 있어서 유지수심보다 얕아 위험가능성이 있는 장소에는 필요한 경우 설치한다.

(6) 법정(권고)항로상 부표 설치기준

① 법선을 명확히 확보하기 위하여 항로의 양측에 설치한다.

② 변침점에 설치한다.

③ 설치간격은 육안으로 볼 수 있는 정도로서 3마일 이내로 한다.

(7) 항만항로표지 설치기준

준설항로는 되도록 직선이 좋으나 굴곡이 있으면 거리에 관계없이 그 지점에 설치할 수 있다.

3.1.2 레이콘 및 음향장치의 설치

(1) 항로의 입구, 변침점등 주요지점을 표시하기 위하여 부표 상에 병설할 수 있다.

① 레이콘

② 레이다 반사장치

3.1.3 부표의 제작 및 크기는 아래 기준에 의한다.

(1) 이용자가 효과적으로 이용할 수 있는 최소형 부표를 적용한다.

(2) 동일수로 또는 해역의 모든 부표는 동일해상 및 기상조건을 적용하여 설계 제작하여야 한다.

(3) 유속이 빠른 해역에 설치하는 부표는 유압에 견딜 수 있도록 특수설계 제작하여야 한다.

(4) 부표를 제작 시에는 제작일련번호 및 소관표시를 하여야 한다.

3.2 부표 계류구 기준

3.2.1 사슬의 종류와 규격

(1) 항로표지용 사슬은 스터드 없는 사슬을 사용한다.

(2) 사슬 링크의 형상과 치수

부표의 계류사슬 및 고삐사슬의 링크, 샤클, 스위블(전환)이 모양과 치수는 도면에 의하여 제조 사용한다.

(3) 사슬 1연의 길이는 25m를 표준으로 한다. 단, 필요할 때는 1연의 길이를 15m, 20m로 제조 사용할 수 있다.

(4) 고삐사슬의 길이는 5.0m∼6.0m을 표준으로 한다.

(5) 사슬, 샤클, 스위블의 재료 및 제조법

(6) 사슬의 절단 및 내력시험 하중과 무게

사슬의 절단 및 내력시험, 하중과 무게는 그 지름에 따라 항로표지 업무편람 제 6절 부표의 설치 및 안전계산중 별표1에 기재한 값 이상이어야 한다.

(7) 치수에 대한 허용차

각종 사슬링크, 샤클, 스위블의 호칭, 치수에 대한 허용치는 아래 표에 따른다.

3.2.2 침추의 종류와 규격

침추의 종류는『강제』침추와『콘크리트』제가 있으나 우리나라에서는『콘크리트』제를 사용하며 그 중량과 치수는 설계도면에 의한다.

(1) 침추의 재료는 아래와 같다.

① 시멘트는 콘크리트 1㎥당 400㎏을 사용한다.

② 자갈은 25～50㎜를 사용한다.

③ 모래, 자갈은 비중 2.5이상의 것을 사용한다.

④ 콘크리트의 비중은 완전 양생 후 2.4이상이 되어야 한다.

3.3 준부표(강재)의 제작 및 수리

3.3.1 부표를 제작하는 재료는 설계도면에 표시된 것으로 한국산업규격(KS)에 적합한 것을 사용하여야 하며 저장 및 취급 방법은 다음과 같다.

(1) 재료는 가공 전․후를 막론하고 항상 먼지, 기름 등의 오물에 의하여 더럽혀지지 않고 부식되지 않도록 적절한 높이에 저장하여야 한다.

(2) 재료 운반 및 적하 시에는 손상이 발생하지 않도록 적절한 대책을 강구하여야 한다.

3.3.2 부표를 가공하기 전에 다음 사항을 준수하여야 한다.

(1) 재료는 부재를 제작하기 전에 녹, 먼지, 기름 등을 제거하여야 한다.

(2) 굴곡, 변형 등이 있는 부분은 재질이 손상되지 않는 방법으로 교정하여야 한다.

(3) 부분적으로 가열한 강재는 적절한 소둔(annealing)을 하여야 한다.

3.3.3 재료의 절단 시 전단면이나 가공 면의 표면 거칠기는 최대한 미려하게 처리하고 절단 또는 가스절단에 의한 변형은 표면을 깨끗이 정리하여야 한다.

3.3.4 재료의 롤러 밴딩은 원통부 및 기타 부위의 구부리기 작업에 앞서 로울러의 청결 상태를 육안으로 검사하여야 하며 강판을 로울러로 밴딩하여 원하는 원호(圓弧)를 만들 때 작은 각도로 서서히 수차례 반복하여 강재의 급격한 재질 변화가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.3.5 용접 작업은 적합한 전기 ARC용접에 의하여 시공되어야 하며, 특히 다음사항에 유의하여 작업하도록 한다.

(1) 용접 자세는 회전대 또는 경사대 등을 사용하여 하향 용접을 원칙으로 한다.

(2) 용접 작업 전 모재(강재)에 있는 모든 불순물(수분, 녹, 기름, 페인트 등)은 충분히 제거한 후 작업에 착수토록 한다.

(3) 용접봉은 피복이 탈피되었거나 오손된 것과 습윤 상태에 있는 것을 사용하여서는 아니 되며 충분히 건조된 상태에서 사용되어야 한다.

(4) 모든 용접은 최종 용접 시 만족하게 융합할 수 있도록 매끄럽게 연마를 하여야 하며, 품질 관리에 만족토록 육안검사에 합격하여야 한다.

(5) 용접 결점의 수정은 용접 완료 후 금이 갈라지거나 작은 구멍이 생기는 결점이 있을 때는 원인을 제거하여 보완 용접하여야 한다.

3.3.6 부표의 표체 수리는 다음사항을 준수하여 제작하여야 한다.

(1) 철탑의 구조는 앵글로 된 4개의 주 기둥에 도면과 같이 수평 보강대로 구성되며 각 부재의 규격은 도면에 따른다.(주 기둥은 등명기 하부까지 일체식으로 제작)

(2) 사다리장치는 철탑 외면에 항로표지 설치장비의 정비에 필요한 경사다리를 설치하여야 하며 사다리의 구조(폭 300㎜, 간격 300㎜)및 구성부재(평철 9×50㎜, 환봉ψ19㎜)를 전기 용접으로 부착하여야 한다.

(3) 번호판은 철탑높이 중앙부근에 도면에 명기된 규격의 표시판을 철탑 3면에 용접하여 부착한다.

(4) 미통은 원통형 강관 Φ610로 제작 또는 동일규격의 기성품을 사용하며 그 하부에는 철 중추를 취부 할 수 있는 구조로 제작하여야 하며, 미통은 하부경판의 중심부에 고정 부착하고 브라케트로 보강하고 미통 타판은 표체 하부 경사면에 연결하여 부착하여야 한다.

(5) 철탑 부분은 다음 각 목에 따라 점검하여야 한다.

가. 주요 부재·보강재의 발청 상황, 굽힘 및 손상 유무

나. 용접부의 잔금 발생 여부

다. 볼트 너트의 이탈 및 마모 유무

라. 사다리 측판의 손상 유무

(6) 표체 부분은 다음 각 목에 따라 점검하여야 한다.

가. 표체의 기울기를 조사하여 수평이 유지되지 아니하면 표체 내부 격실의 침수여부를 확인

나. 표체 내부 격실 검사는 맨홀을 열고 가스를 완전히 제거한 다음 이상 유무를 점검

다. 태양전지판은 충돌 등의 외력에 의한 외형의 변형 유무와 결선 여부를 점검하여 누전여부를 확인

라. 두표는 균열과 볼트너트의 이완여부를 점검

3.3.7 인양 고리 및 사슬고리는 주강을 사용 제작하고 육안으로 보아 재질에 기포가 없어야 한다.

(1) 인양고리는 상부경판에 사슬고리는 하부 경판에 고정 취부 하여야 한다.

(2) 인양고리 및 사슬고리는 볼트구멍을 뚫어 상․하부 경판에 고정시키고 볼트로 조립하여 용접하고 고리판 둘레도 철저히 용접하여야 한다.

(3) 인양고리와 사슬고리의 위치는 90°를 유지하여야 하며. 인양 고리 4개를 부착 할 경우에는 표체 하부와 직각이 되도록 설치한다.

3.3.8 철 중추는 주철 제품(Cast iron)을 사용하되 육안으로 보아 재질에 기포가 없고 표면이 균일 하여야 한다.

(1) 조립 시 중추가 이탈되지 않도록 견고하게 취부 하여야 한다.

(2) 철 중추의 규격은 강관의 호칭Φ610의 외경에 충분히 삽입되도록 Φ900× 620×100t로 제작한다.

3.3.9 아연판은 적정위치의 표체 하부 경판에 볼트너트(M16×30L)를 용접을 한 후 견고하게 너트 조임으로 취부 한다.

표준형 등부표용 아연판(Zn-anode)의 종류 및 수량(제15조 관련)

등부표 형식	방식면적 (㎡)	전류밀도 (mA/㎡)	규격 (㎜)	수 량
LS-24	27.66	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6㎏	4 (표체3, 미통1)
LL-26	29.55	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6㎏	4 (표체3, 미통1)
도장 결함률 = 5%, 소모율 = 11.23%㎏/A.Yr, 유효 사용률 = 85%

4. 기타

4.1 계약상대자는 등부표 설치 시급성을 고려하여 작업공정표를 작성, 제출한다.

4.2 공사 전, 후 상태를 명확히 구분할 수 있도록 사진첩을 제출한다.

4.3 본 공사는 해상 기상조건에 많은 영향을 받으므로 기상 악화 시 기상증명원을 (기상청 발급) 공사감독부서에 제출하여 공기변경 등을 협의하여 불이익을 받지 않도록 하여야 한다.

4.4 공사 전, 후 상태를 명확히 구분 할수 있도록 GPS로 위치를 기록하여 좌표 확인 시 참고한다.

4.5 공사시에는 GPS 장치를 필히 보유하여 좌표 확인 시 참고한다.

4.6 기록 유지

4.6.1 사설항로표지 인양 정비시에 고시위치의 수심, 사슬길이 및 계류구의 마모율을 측정하여 그 결과를 기록하여 제출[서식.1] 하여야 한다.

4.6.2 공사시에 정비 중이나 정비 완료시에는 등부표의 정확한 위치 관리를 위해 허가서에 명시된 고시 위치에 정확히 설치하여야 하며, 설치 위치 기록사진을 GPS 기록 화면으로 촬영하여 제출하여야 한다.

[서식 1] 사설항로표지 등부표 점검 기록지

구 분	기준수심 (EL. ± )m	실측 19년 0월0일 단위 : m	계류구 교체			체인		체인길이(단위 m)
			샤클	스위블	환링	측정(mm)	교체 내역	고삐	중간	바닥
신시배수갑문 A호 등부표 Type : LL-26	EL. +4.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
신시배수갑문 B호 등부표 Type : LL-26	EL. +0.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
신시배수갑문 C호 등부표 Type : LL-26	EL. +0.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
신시배수갑문 D호 등부표 Type : LL-26	EL. +4.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
가력배수갑문 A호 등부표 Type : LS-24	EL. +4.00							5×2ea=10	수심×1.5-5	5
가력배수갑문 B호 등부표 Type : LL-26	EL. +0.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
가력배수갑문 C호 등부표 Type : LL-26	EL. +0.00							7×2ea=14	수심×1.5-7	5
가력배수갑문 D호 등부표 Type : LS-24	EL. +4.00							5×2ea=10	수심×1.5-5	5
새만금자기수위탑 B호등표 Type : 철탑조(가력내측)	EL. -1.50							-	-	-
새만금자기수위탑 C호등표 Type : 철탑조(신시내측)	EL. -1.50							-	-	-

* 계류구 기준 38mm보다 20%이상(30.4mm 이하) 마모 시 교체 필요