일  반  시  방  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 총  칙

1.1 공사일반

1.1.1 적용범위

1) 본 시방서는 2019년 연안해조장(바다숲)조성사업의 숲 조성용 인공어초 제작․설치공사에 적용한다.

2) 본 시방서에 규정이 없거나 이견이 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

1.2 시공계획 수립 및 제반서류 제출

1.2.1 시공계획 수립

1) 도급자는 시공계획을 수립하고, 아래사항에 대해 감독자와 사전협의 또는 발주자의 승인을 받아 시행하여야 한다.

가) 공사 시행순서 및 방법

나) 도급자 부담 재료, 기계기구 시험 및 제 검사를 위한 감독자 입회시 협력

2) 인공어초 제작공간은 아래 여건을 검토한 후 발주자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

가) 인공어초 제작수량에 적합한 면적과 선적이 가능한 항만시설 등의 요건을 갖춘 곳일 것

나) 소음, 진동, 먼지 등으로 인한 환경오염 및 민원이 없어야 하며 도로, 물양장 등의 시설이용이 용이하여야 함

다) 제작공간 내에는 고정시설을 설치할 수 없으며, 공사 완료 후에는 원상태로 복구(훼손시설 포함) 하여야 함

라) 도급자는 제작공간 주변의 경관을 해하는 행위를 하여서는 안되며, 민원 등의 발생시에는 책임지고 처리하여야 함

1.2.2 공사착수 시 제출서류

1) 공사착공계 (현장조직, 주요종사원, 이력서 및 경력 증명 포함)

2) 예정공정표(어초 제작․설치일정, 장비 및 인원동원 계획서 포함)

3) 현장대리인계와 품질관리계획서

4) 안전 및 환경관리계획서

5) 시험실시 계획서

6) 기타 발주자가 제규정에 따라 요구하는 제반서류

1.3 자재관리

1.3.1 공사용 자재

1) 공사용 자재는 시방서에 명시된 품질과 규격에 부합하는 것이어야 한다.

2)  도급자는 감독자의 승인을 받은 자재에 한하여 공사현장에 반입하여야 하며, 반입시마다 감독자의 검사를 받아 사용하고 불합격 판정을 받은 자재는 지체 없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

3) 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 등에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

4) 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 오손되었을 때는 감독자의 지시에 따라 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

1.4 품질관리

1.4.1 시공 및 관리시험

1) 도급자는 공사의 품질을 확보하기 위하여 본 공사에 투입되는 자재에 대한 선정시험, 관리시험을 실시하여야 한다.

2) 감독자는 시험결과에 따라 도급자에게 시정을 요구할 수 있으며, 도급자는 이를 지체 없이 사정하고 그 결과를 통보하여야 한다.

1.5 안전 및 현장관리

1.5.1 공사장 안전관리 및 위생시설

1)  도급자는 육상 또는 해상장비와 그 인근에서 작업하는 종사원에게는 안전모와 안전화를 착용케 하여야 하며, 현장에는 구급약품을 비치하여야 하고 특히 해상작업 시에는 구명복을 비치해 두어야 한다. 만약 안전장비 미착용, 안전작업수칙 미 준수 등으로 인한 모든 안전사고는 도급자 책임 하에 처리하여야 한다.

2) 호우, 태풍 등 기상예보 등에 충분히 주지하여 유사시에는 피해가 없도록 응급조치를 하여야 한다.

3) 등유, 전기 등의 위험물 취급시에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령이 정하는 바에 따라 최선의 방책을 강구해야  한다.

4) 작업 전 잠수용 장비점검을 철저히 하여야 하고 작업시 수시로 수중작업자의 안전여부를 확인하여야 한다.

5) 도급자는 현장 근무자의 건강, 식수 및 오물처리 등 보건위생관리에 소홀함이 없어야 한다.

6) 어초제작․설치, 포자로프 설치 및 사후관리 현장의 안전사고 예방에 필요한 조치를 취하여야 한다.

1.5.2 현장관리

1) 도급자는 아래사항을 매일 감독자에게 보고하여야 한다.

: 전일작업실적, 일일작업계획, 장비동원계획 및 자재 수급계획

2) 현장대리인이 현장을 이탈할 경우에는 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

3)  공사시공에 영향을 미치는 사고, 인명피해를 일으킨 사고 또는 제 3자에게 손해를 끼친 사고가 발생하였을 때에는 지체없이 그 상황을  감독자에게 보고하여야 하며, 도급자 부담으로 조속히 수습하여 사회적 물의가 일어나지 않도록 하여야 한다.

4)  도급자는 해상작업에 따른 항해규칙을 준수하며 바지선, 예인선 등 항해에 위험을 줄 수 있는 기타 해상장비 또는 장애물에는  경고등을 설치하여 감독자의 지시에 따른다.

1.6 가설물 및 전화설치

공사에 필요한 현장사무소, 재료창고 및 공사용 자재 적치장 설치 등에 대하여는 감독자와 협의하여야 한다. 또한 현장사무실에는 반드시 전화 (유선 또는 무선)를 설치해야 하고, 해상 공사시 각 작업전에는 무전기를 확보하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 한다.

1.7 제작완료검사

1)  도급자는 제작이 완료되었을 때에는 현장을 정리하고 제작검사에 대비해야 하며, 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독자 및 검사자의 지시에 따른다.

2) 제작완료 검사자의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

2. 수중공사

2.1 설치계획보고

도급자는 어초설치계획을 일자별로 작성하여 설치예정일 15일전까지 발주자에 보고하여야 한다.

2.2 어초수중시설

1) 도급자는 어초를 설치하기 전에 감독자의 시설위치확인을 받은 후  정 위치에어초를 설치하여야 하며 반드시 비디오로 수중을 촬영하여 판독 가능하게 편집한 후 CD에 수록하여 2매를 제출하여야 한다.

2)  설치장은 근해연안이며 돌출 암반이 많은 곳이므로 해상날씨를 미리 파악하고 수중지반 형태를 면밀히 숙지하여 작업에 임하여야 한다.

3) 어초운반선이 설치위치 (경위도 표시지점)에 도착하면 운반선을 앵커로 고정하고 잠수부가 설치지점을 사전 답사하고 위치에 맞추어 어초를 시설하여야 한다.

4) 우렁쉥이 및 해조류 종묘이식은 종묘가 상하지 않도록 준비된 종묘를 선상에서 어초에 단단히 결속시킨후 수중에 설치한다.

3. 결과물 및 준공검사

3.1 결과물 제출

1) 작업확인서(인공어초 설치 및 사후관리에 대한 어촌계장 확인)

2) 어초시설 전후의 수중 비디오 촬영물(CD 2매)

3) 각 공사종류별 시공장면 사진(CD 2매)

4) 기타 발주자가 요구하는 서류

3.2 기성 및 준공검사

1) 도급자는 공사의 시공도중 기성부분에 대한 공사비 지급을 요청할 수 있다.

2) 도급자는 공사 완료시 준공관련 제반서류를 준비하여 준공검사를 요청한다.

4. 기타

4.1 도급자는 공사중이나 공사완료 후에 본 공사에 관련된 사항을 외부에 누설하여서는 아니되며 공사수행을 위하여 발주자로부터 받은 일체의 자료는 공사 준공 시 반납하여야 한다.

4.2 준공 후 1년 이내에 해조류 포자 발아 및 성장상태 불량 시 보충시공 하여야 한다.