2019년도

보목어촌계 어장 투석 공사 설계도서

목  차

1. 설계설명서

2. 시  방  서

3. 내  역  서

4. 예정공정표

1. 설 계 설 명 서

1-1. 사업목적

○ 본 사업은 보목마을 연안 어장에 패조류 서식을 위한 투석을 시행함으로써 인공해 조장을 시설하여 건강한

수산종묘방류 및 체계적 어장관리를 통한 바다목장기반조성으로 연안의 수산자원 회복과 관리형어업으로 전환       하여 어촌 소득증대를 도모하고자 본 설계도서에 의거 도급 시행함에 있음

1-2. 시설위치

○ 서귀포시 보목 어촌계 마을어장 내

1-3. 사업개요

○ 석재규격 : 1㎥급 이상             ○ 석    질 : 야면석 깬돌

○ 투석물량 : 760㎥

1-4. 공사기간

본 공사는 착공일로부터 60일간으로 한다. 다만 다음 사항의 경우에는 공사기간을 연장할 수 있다.

○ 천재지변 등 기상악화로 투석이 곤란한 경우

1-5. 설계변경조건

다음의 경우에 한하여 설계변경할 수 있다.

○ 시공물량이 변경될 때

○ 운반거리등이 설계조건과 현격한 차이가 있을 때

○ 제주특별자치도, 서귀포시에서 발주한 사업 중 패조류투석 사업위치 주변에서 필요한 규격과 필요한 물량의

사암 발생하였을 때

○ 기타 발주기관의 형편에 의하여 설계변경이 불가피 할 때

2. 공 사 시 방 서

1. 공 사 일 반

1-1. 적용범위

1) 본 공사는 토목공사 표준일반시방서 및 본 공사시방서에 의거 시행한다.

2) 본 시방서에 규정이 없거나 규정의 해석상 이견이 있을 때는 발주청의 해석 및 지시에 따른다.

3) 본 공사는 관련되는 정부의 제규정도 본 시방서의 일부로 한다.

2. 시공계획 및 예정공정표 제출

2-1. 제출서류

도급자는 공사착수와 동시 다음 서규를 구비 제출하여야 한다.

가) 공사착공계

나) 예정공정표

다) 도급자 공사도급 내역서

라) 현장대리인계

마) 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반서류

2-2. 시공계획

1) 도급자는 다음사항에 대해 감독관과 사전 협의를 거쳐 시행하여야 한다.

가) 공사 시행순서 및 방법

나) 공사 추진계획 및 예정공정표

다) 각종공사 표지판 설치 및 위치 선정

라) 출입금지구역 설정 및 제한에 관한 사항

마) 기타 사전승인을 받을 필요가 있다고 인정되는 사항

2) 공사로 인하여 발생하는 사유재산 및 공익상 영향을 미치는 사항은 관계기관 및 당사자의 사전에 협의를 하여

제반문제가 발생치 않도록 하여야 하며 이 경우 제비용은 도급자 부담으로 한다.

3. 안전관리 및 현장관리

3-1. 공사장 안전관리

1) 도급자는 휘발유, 전기 등의 위험물을 취급하는 작업장과 현장에서의 사고 방지를 위하여 일반인의 출입을 통

제하여야 할 필요가 있을 경우에는 감독관과 협의하여 울타리, 출입문을 설치하고 출입금지 표시를 하여야 한다.

2) 도급자는 낙석위험이 있거나 육상 또는 해상장비와 그 인근에서 작업하는 종사원에게 안전모와 안전화를 착용

케 하여야 하며, 현장에는 구급약품을 비치하여야 하고 특히 해상작업 장비에는 구명대를 비치해 두어야 한다.

3) 호우, 풍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주지하여 유사시에는 피해가 없도록 응급조치를 하여야 한다.

4) 공사에 필요한 보완조치를 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획점검, 훈련 등을 실시하여야

하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

5) 휘발유, 전기 등의 위험물을 사용하는 현장에서는 보관 및 취급에 대하여 관계법령이 정하는 바에 따라 최선의

방책을 강구해야 한다.

6) 공사 중에는 항상 발주처 관할 재해관련 기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극 노력해야 한다.

3-2. 현장관리

1) 도급자는 공사의 전부 또는 일부가 완성되어 계속되는 작업이 없는 곳은 감독관의 지시에 따라 현장을 청소하

여 깨끗이 유지하여야 한다.

2) 도급자는 다음 사항을 매주 감독관에게 보고하여야 한다.

가) 주간 작업계획 및 장비동원계획

나) 전주 작업 실적

3) 현장대리인은 현장 상주를 원칙으로 하며, 부득이 현장을 이탈할 경우에는 감독관의 사전 승인을 받아야 한다.

4) 공사 시공에 영향을 미치는 사고, 인명피해를 일으킨 사고 또는 제3자에게 손해를 끼친 사고가 발생하였을 때

에는 지체없이 그 상황을 감독관에게 보고하여야 하며, 도급자 부담으로 조속히 수습하여 사회적 물의가 일어나

지 않도록 하여야 한다.

5) 도급자는 해상작업에 따른 장비의 제한에 항해규칙을 준수하며 대선, 예인선 항해에 위험을 줄 수 있는 기타

해상 장비 또는 장애물에는 경고 등을 설치하여야 하며, 경고등 설치를 태만하였거나 미설치로 인하여 야기되는

일체의 피해에 대한 책임을 진다.

4. 투석

1) 투석용 석재는 허가받은 석산에서 채석한 보통암 야면석 또는 깬돌석재로 시공함을 원칙으로 한다.

2) 제주도 및 서귀포시에서 발주한 사업중 주변의 공사현장에서 패조류 투석용으로 필요한 규격과 필요한 물량의

석재 발생시 우선하여 사용하여야 한다.

3) 석재는 집석장소에서 감독공무원과 해당어촌계대표를 입회시켜 수량, 규격 등을 반드시 확인한 후 투석장소로      운반 하여야 한다.

4) 석재의 채집 및 반출은 관계법규를 준수하여야 한다.

5) 투석할 장소에는 사전에 어촌계대표와 협의하여 부표를 세우고 그 부표를 기준으로 하여 투석하여야 한다.

6) 투석된 돌이 유실 또는 모래에 파묻히지 않도록 투석장소를 사전에 검토하여 적정하게 시공토록 하여야 한다.

7) 투석시에는 잠수대표들을 입회시켜 투하확인과 동시 수중 투석상태를 확인토록 하여야 한다.

5. 준공검사

1) 공사 준공 시에는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

가) 투석용 석재의 확인, 운반, 투하 등 공정별(전중후) 사진첩 2부

나) 투석지점에 대하여 GPS등 위성항법수신장치를 이용하여 경위도를 표시한 지선별 좌표 2부

다) 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반서류(석산업체와의 계약서 등)

2) 도급자는 공사가 완료되었을 때에는 현장을 정리하고 준공검사에 대비해야 하며 검사를 위하여 필요한 자료의

제출이나 기타의 조치에 대하여는 감독관 및 검사관의 지시에 따른다.

3) 감독관 및 검사관은 준공검사 결과가 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정되었을 때에 준공 조치한다.

4. 예 정 공 정 표

월 별 공 정	비율	공 정								비고
		30일		45일		60일
암석채취	23.4	23.4
육상운반	26.0			26.0
해상운반 및 투석	32.5				16.5	16.0
육상운반및투석	10.0					10.0
중기운반(육상)	0.3		0.3
회항비(해상)	6.3								6.3
소계	100	23.7		42.5		33.8
누계		23.7		66.2		100.0