계약심사 조정사유서

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 해삼 특화양식단지 조성사업

○ 위    치 : 고성군 토성면 봉포리 연안해역 일원

○ 사 업 량 : 해삼 서식공간(기반시설) 피복석 설치 1,208.07㎡

○ 공사기간 : 착공일로부터 3개월간

2. 심사결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	조정금액	조정율
총 공 사 비	195,000	187,240	-7,760	-3.98 %
도 급 액	195,000	187,240	-7,760	-3.98 %
관 급 액	-	-	-	-

3. 적용기준

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)

○ 2019년 건설표준품셈 등

○ 2019년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준

4. 주요 조정내용

○ 원가계산 제비율 조정

▸ 하도급대금지급보증수수료 삭제

○ 일위대가(단가산출) 품 조정

▸ 피복석 육상운반 품 조정 : 운반장비 변경

▸ 중기운반비 품 조정 : 운반거리 조정