2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업 설계서

2019. 10.

대항어촌계

설     계     설     명    서

설    계    설    명    서

□ 사 업 명 : 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업

□ 사 업 지 : 전라북도 부안군 대항어촌계

□ 사업의 목적

◦ 고부가 가치의 정착성 품종인 해삼의 산란∙서식장 제공을 통하여 해삼산업 활성화를 통해 수산업에 활력 제고

□ 사업기간

◦ 본 사업은 착공일로부터 40일로 한다. 다만, 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 사업 불가시 발주처의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

□ 주요사업내용 및 사업량

어촌계	공 종	어업면허	사업구역(ha)	우선사업구역(ha)	사업량(m3)	비고
대항	투석	마을어업 제2019-3호	20.0	5.1	405.0	자재크기 : 1.0m3

□ 기   타

◦ 본 사업은 사업설계서 및 일반시방서, 특별시방서에 의거 시행하고 기타 행정사항은 발주처의 지시에 의한다.

◦ 현장여건의 변화 등 사업비의 증감이 발생될 때는 발주처와 협의하여 설계변경 또는 발주처의 예산범위 내에서 정산 처리한다.

◦ 본 사업은 환경친화적인 기술 도입 시 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 설계변경하여 추진할 수 있다.

예    정    공    정    표

예  정  공  정  표

공 종 별	일 수	사 업 기 간
		10일		20일	30일	40일
1. 사업지구 확정 및 표지 시설 등 준비작업	5
2. 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업	35
일별진도 (%)	40	25.0		25.0	25.0	25.0
누 계 (%)		25.0		50.0	75.0	100

일    반    시    방    서

일    반    시    방    서

1 - 1 총  칙

1. 본 사업은 정부에서 제정한 제 시방서 기준, 규격과 본 시방서 및 설계도서에 의거 시행한다.

가) 토목공사 일반 표준 시방서

나) 항만공사 표준 시방서

다) 한국 산업 규격

라) 수산업법

마) 수산자원관리법

바) 기타 본 사업에 관련되는 발주처의 각종 규정 및 기준 등

2. 도급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자의 책임이다.

3. 본 시방서와 설계도서간의 내용이 서로 다를 경우에는 시방서의 규정이 우선한다.

4. 본 시방서에 특별히 설명되어 있지 않은 사항이나, 시방서 규정의 문구 해석상 이견이 있을 시에는 발주처의 해석에 따른다.

5. 본 설계도서에 표시된 치수는 모두 완성된 치수로 한다.

6. 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

7. 설계서를 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 사업용 재료원의 위치, 거리, 재질 및 생산조건이 변경될 때

나) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하여 변경이 불가피할 때

다) 사업량의 차이 등 사업현장의 제반 여건이 본 설계도서와 현저한 차이로 사업비의 증감이 발생할 때

라) 사업비 적산 기준, 특수항목의 견적내역 또는 공법이 변경될 때

마) 기타 발주처의 형편에 따라 변경이 필요할 때

8. 준공기한을 연장할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 기상 및 해상조건이 설계에 적용된 평년의 경우와 현저한 차이가 있을 때

나) 기타 발주처의 형편에 따라 시공 중에 사업 중지 명령을 받았을 때

다) 위 설계변경 사유 “나”. “다”항에 해당되어 예정공정 추진에 막대한 지장이 초래되었을 때

1 - 2 시공계획 및 관리

1. 도급자는 사업 착수와 동시 다음 서류를 구비 제출하여야 한다.

가) 사업 착공계

나) 예정공정표

다) 착공 전 사업장 전경사진

라) 현장 대리인계

마) 안전관리 책임자 선정계

2. 도급자는 사업 시행구역 우선순위를 구획하여 구역별 실시공정표와 사업 시행순서 및 인력, 장비동원 등 사업 시행 실행계획을 수립하여 사업 수행 계획서를 제출하여야 하며, 발주처의 승인을 받아 사업을 조기에 적극 시행하여야 한다.

3. 해삼서식기반 조성사업에 동원되는 투입장비 등은 “2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업”이란 표지깃발을 부착 후 작업에 임하여야 한다.

4. 도급자는 발주처가 승인한 작업상황보고 양식에 따라 당일의 작업내용, 취입인원, 취입장비 및 가동시간과 사업용 자재의  불출상황 등 작업실적 및 익일의 작업계획을 발주처에 보고 후 제출하여야 한다.

5. 도급자는 매월 말 당월의 작업월보 및 익월의 작업계획서를 제출하고 필요시에는 사업진도를 확인할 수 있는 사진을 첨부하여야 한다.

6. 도급자는 사업현황, 동원인원 및 장비 사업계획 및 추진 공정표 등을 발주처에서 상시 확인․점검 할 수 있도록 하여야 한다.

7. 사업 진도가 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 발주처의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입공정 만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생되는 경비는 일체 도급자가 부담한다.

1 - 3 안전관리

1. 본 사업은 해상에서 주로 이루어지므로 작업인부 및 해상장비(동원선박 등)의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의하여야 하며 작업 중에는 현장대리인 및 안전관리 책임자가 항상 상주하여 현장관리를 책임지휘 수행하여야 한다.

2. 작업장에 종사하는 동원인원은 안전모, 안전화, 구명대 착용 등 안전장비를 갖추어야 하며, 현장에는 구급약품을 비치하여야 한다.

3. 도급자는 사업시행 중 해상작업, 중장비 사용 등으로 인한 인명, 재산피해 발생시에는 도급자의 부담으로 하여 제반조치를 강구하여야 한다.

4. 도급자는 사업시행과정에서 선박 또는 사람의 통행에 위험을 초래할 수 있는 곳에는 위험표지 시설을 하여 사전에 사고   방지 대책을 강구하여야 한다.

1 - 4 현장대리인 및 현장종사원

1. 현장대리인은 사업기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 발주처과 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

2. 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 발주처의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장한다.

3. 발주처는 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 사업현장에 부적합하다고 인정하거나, 감독업무 수행에 장애가 된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이에 즉시 응하여야 한다.

4. 도급자는 현장종사원이 사업시행과 관련하여 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.

5. 안전 관리 책임자는 사업기간 중 현장에 상주하여 모든 육, 해상 사업현장의 안전관리 책임을 진다.

1 - 5 공정관리

1. 해삼서식기반 조성사업을 수행하는 도급자는 사업지구 내 관계 어업인들과 사전 원만한 협의를 통하여 사업시행 우선순위별 사업구역을 구획하여 본 작업 공정을 관리하여야 한다.

2. 도급자는 시방서에 의거 사업구역별 부표 및 깃발 등의 표지시설을 설치하고 이를 양호한 상태로 유지·관리하여 시공 및 감독 관리가 용이하게 하여야 한다.

3. 도급자는 모든 공정에 대하여 사업진행 전, 중, 후 공정을 촬영(사진 및 비디오)하여 사진첩과 비디오테이프(CD)를 편집하여 기성 또는 준공검사 시 3부를 제출하여야 한다.

4. 사업용 자재는 설계서 및 시방서에 명시된 품질 및 규격의 것을 사용하여야 하며 모든 자재는 발주처의 승인을 받아 현장 반입하고 보관 관리를 철저히 하여야 한다.

5. 도급자는 사업시행 중 인근 어장에 해양환경영향 피해가 일어나지 않도록 해양오염 방지대책을 철저히 하여야 하며, 만약  민원이 발생하였을 때는 도급자의 책임으로 원만히 해결하여야 한다.

6. 본 사업은 시한부 사업으로 사업기간은 어장순기를 고려하여 효율적으로 집행하여야 한다.

1 - 6 기   타

1. 도급자는 사업 시행에 있어 관계기관에 제출하거나 관계기관의 승인을 필요로 하는 사항이 있을 때에는 관계기관의 인․허가를 득하여 사업을 수행하여야 한다.

2. 도급자는 건설업법, 근로기준법, 도로교통법, 해양환경관리법, 공유수면관리법, 기타 위험물 취급 등 본 사업의 시행과 관계되는 제반법규를 준수하여야 한다.

3. 사업시행 중 발생하는 다음 항목의 경비는 도급자 부담으로 한다.

가) 사업시행으로 인한 경미한 각종보상 및 변상

나) 각종시험 및 검사

다) 사업용 각종 안내판, 표지 및 보완, 위험표지등의 설치

라) 지장물 철거 및 보관, 재설치

마) 기타 사업과 관련된 경미한 사항

4. 다음 각 호에 해당하는 사항은 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

가) 기 시설물 설치 및 각종 표지물 설치

나) 주요자재 품질관리 및 공정계획 수립

다) 출입금지구역의 선정

라) 기타 사업 시행 상 필요하다고 인정되는 사항

특    별    시    방    서

특    별    시    방    서

2 - 1 사업개요

1. 고부가 가치의 정착성 품종인 해삼의 산란∙서식장 제공을 통하여 해삼산업 활성화를 통해 수산업에 활력 제고

2 - 2 적   용

1. 본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 사항을 특별시방서로 명기하여 제반시방서보다 우선하여 적용한다.

2. 본 특별시방서의 내용의 숙지 없이 도급자의 부주의로 인하여 향후 추가 발생되는 비용에 대해서는 도급자의 책임으로 한다.

3. 환경개선사업에 투입되는 인력은 반드시 산재보험 및 고용보험에 가입하여야 한다.

2 - 3 사업착수 전 조치사항

1. 사업추진에 따른 사업설명 및 어장 내 설치된 어구 등에 훼손이 없도록 어업인간담회를 반드시 개최하고, 불가피한 사유로 개최가 불가능한 경우는 이를 갈음할 수 있는 홍보 등을 실시하거나, 발주처와 협의하여 방안을 강구하여야 한다.

2. 사업현장에 안내표지판 설치 등으로 안전사고 방지에 철저를 기하며, 사업종사자에 대한 안전교육 실시 및 안전수칙 준수  여부를 수시로 확인하여야 한다.

3. 사업에 투입되는 인력은 “산업재해보상보험법”또는 “고용보험법”, “선원법”에 따라 보험가입 후 시행하여야 하며 이를 제대로 시행하지 않아 발생되는 문제는 도급자가 모든 책임을 진다.

4. 사업 참여장비 및 작업선에 대하여 현수막 부착을 의무화 하고 어업활동 등 사업외의 다른 행위를 하지 못하도록 하여야 한다.

5. 작업순서, 진행방법, 장비투입 및 일정계획 등의 상세한 계획서를 작성하여 감독관에게 제출하고 협의된 내용에 따라 해삼서식기반 조성사업을 시행하여야 한다.

6. 어장정화·정비업에 등록신고한 선박을 사용하여야 하고, 임차할 경우 변경등록(임차권 설정) 후에 사업수행이 진행되어야 한다.

7. 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업 수행에 필요한 각 종 승인 및 검사요청서, 현장실정보고, 설계변경 요구서 등 각종 문서는 검토와 협의에 필요한 기간 등을 감안하여 제출하여야 하며, 이의 지연으로 인한 모든 불이익은 도급자가 감수하여야 한다.

2 - 4 자재구입 및 적재공정

1. 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업에 투입되는 석재의 크기는 1.0m3를 기준으로 한다.

2. 석재의 운반 및 선적 전에 해당어촌계 관계자 및 발주처 감독의 사전 확인절차를 득한 후 반입되어야 하며, 반입되는 석재는 직접생산증명 및 시장군수의 토석채취허가, 품질검사 성적서 등이 구비되어 있는 석재를 사용하여야 한다.

3. 반입되는 석재는 계근시 발주처에 감독관 입회를 요청하여 투명성이 확보되도록 실시하여야 하고, 작업량의 증명은 공인검정기관의 검정보고서 제출하여야 한다. 이를 제대로 시행하지 않아 문제 발생시(정산 등) 모든 책임은 도급자 책임으로 한다.

2 - 5 해상운반공정 및 투하공정

1. 도급자는 자연석의 운반방법, 운반경로, 일일 운반량 등을 명기한 운반계획서를 작성하여 감독관에게 보고하여야 한다.

2. 자연석 투하사업이기 때문에 마구잡이식 투하의 경우 선박사고, 민원 등이 발생할 우려가 있으므로 도급자는 투하 전 어촌계장과 충분히 협의하여 선박사고, 민원 등을 예방하도록 하여야 하고, 설계도면상 우선사업구역 시설 상세도면(도면번호 BA-2)최대한 이에 준하여 암반구역에서 연계하여 사업구역내에 골고루 투하 될 수 있도록 한다. 이를 제대로 시행하지 않아 문제발생시(사업전·후) 모든 책임은 도급자 책임으로 한다.

3. 사업시행전 사업지구내 관련 어촌계 및 어업인들에게 통지하고 확인된 후 사업을 시행한다.

4. 도급자는 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업전에 WGS-84좌표계에 의해 해당 사업면적과 위치(우선사업구역)에 견고한 표지시설을 하고 감독관과 입회자들의 설치위치 확인을 득한 후 투하계획을 세워야 한다.

5. 투하 전 꼭 작업현장의 위치 및 수심 그리고 물때를 확인하여 안전작업을 도모하고, 작업 중 위험요소가 발견되면 누구나 작업 중지 명령을 내릴 수 있다.

6. 투하시 대선내 GPS프로타를 설치하여 투하위치를 확인하는 방안을 발주처와 협의하여 검토하여야 하고, 투하작업 후에는 작업항적 기록지(GPS)를 보관, 제출하여야 한다.

2 - 6 양방향음파탐사기조사

1. 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업의 준공을 위하여 수산물 수출전략품목(해삼) 육성사업 시설 후 도급자는 양방향음파탐사기조사를 실시하여야 하며, 일반시방서, 1-6, 3항, 나)에 의거하여 필요한 경비를 부담하여야 한다.

2. 양방향음파탐사기조사시 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업 시설 위치를 중심으로 수심에 따라 주사폭을 조절하여 시설 영상이 확인 가능하도록 현장조사를 실시한다.

3. 도급자는 양방향음파탐사기조사를 통한 영상과 시설 설치 전·후 비교 자료를 준공 시 발주처에 제출되어져야 한다.

2 - 7 기  타

1. 2019년 대항어촌계 친환경 해삼 양식어장 조성사업을 시행함에 있어 작업구역 우선순위의 선정 등에 대해서 관할 어촌계의 의견을 충분히 수렴하고, 협조사항이나 문제점 발생 시 발주처 및 조사설계자와 협의하여 조정할 수 있도록 조치하여야 한다.

2. 사업설계서에 근거하여 사업시행 관련자료(사진 등)의 기록․유지와 일일 작업보고에 철저를 기하여야 한다.

3. 도급자는 작업 전 사업구역 표지를 미리 설치하고 발주처가 일일 공정 완료의 확인이 어려운 작업 진행구역과 위치를 촬영 하여 사업 전후를 비교, 확인할 수 있도록 발주처 요구 시 제출할 수 있도록 하여야 한다.

4. 본 사업 수행 시 관계 어업인의 민원이 발생하지 않도록 도급자는 최대한 방지하고 민원 발생 시에는 어촌계와 협의하여 원만히 해결하여야 한다.

5. 작업지역 내 조업․기타민원 등으로 사업 추진이 어려울 경우 유관기관 및 관계어업인 등과 협의하여 사업기간을 조정하고 이를 발주처에 보고하여야 한다.

6. 도급자는 본 과업완료 후 관할 지선어촌계로부터 과업공종에 대한 완료확인서를 수령하여 감독관에게 제출하여야 한다.

2 - 8 사업비 정산

1. 투석량 등에 대한 사업비의 증감이 발생될 때는 발주처와 협의하여 설계변경 또는 발주처의 예산범위내에서 정산 처리한다.

2. 본 설계도서의 산업안전관리비 및 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료는 사후 사업비 범위 내에서 실비정산을 원칙으로 한다.

3. 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료, 산업안전관리비 금액은 착수계 제출시, 당초 설계서내역 금액 그대로를 반영하여야 한다.

○ 항적기록 출력요령 예시