태안 가로림만 해역 해양보호구역 환경개선사업 설계서

[충남 태안군 청산, 당산, 만대, 활곡 어촌계]

2020.1

설    계    설    명    서

설   계   설   명   서

□ 사 업 명 : 태안 가로림만 해역 해양보호구역 환경개선사업

□ 사 업 지 : 충청남도 태안군 청산, 당산, 만대, 활곡 어촌계(4개소)

□ 사업의 목적

본 과업은 가로림만 해역의 해양생물보호구역으로 지정된 구역 내 무분별하게 방치된 폐양식 시설 정리 등 환경개선사업 추진을 통하여 어장환경을 개선을 그 목적으로 한다.

□ 사업기간

본 사업은 착수일로부터 90일로 한다. 다만, 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 사업 불가 시 발주처의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

□ 기타

1. 본 사업은 사업설계서 및 일반시방서, 특별시방서에 의거 시행하고 기타 행정사항은 발주처의 지시에 의한다.

2. 본 사업은 주로 마을어장의 조간대에서 이루어지므로 현저한 차이 등 사업비의 증감이 발생될 때는 발주처와 협의하여 설계변경 또는 발주처의 예산범위 내에서 정산처리 한다.

□ 주요사업내용 및 사업량

순 번	어 촌 계	어장번호	공종	사업면적	사업량	주요자재원
1	청산어촌계	양식 제755호, 마을 제100호	간이식 폐지주 제거	3.0 ha	12.9 ton	굴삭기, 예·대선, 보통인부, 크레인, 트럭탑재형 크레인
		양식 제585호	수하식 폐지주 제거	0.6 ha	5.8 ton
2	당산어촌계	양식 제564호, 양식 제565호	수하식 폐지주 제거	1.5 ha	14.9 ton
3	만대어촌계	양식 제114호	간이식 폐지주 제거	2.7 ha	18.1 ton
		양식 제379호, 양식 제380호	수하식 폐지주 제거	1.7 ha	21.4 ton
4	활곡어촌계	양식 제547호	간이식 폐지주 제거	2.9 ha	14.8 ton
		양식 제566호, 양식 제567호	수하식 폐지주 제거	3.0 ha	26.2 ton
계				15.3 ha	114.1 ton

예    정    공    정    표

예   정   공   정   표

공 종 별	일수	사 업 기 간
		30														60	90
1. 사업준비 (관계기관 및 어업인 협의)	7
2. 사업지구 확정 및 표지시설	8
3. 폐지주 제거, 운반, 하역 및 상차	68
4. 결과보고 및 완료계 제출	7
진도현황(%)		30.0														30.0	40.0
누 계(%)		30.0														60.0	100

일    반    시    방    서

일   반   시   방   서

1 - 1 총  칙

1. 본 사업은 정부에서 제정한 제 시방서 기준, 규격과 본 시방서 및 설계도서에 의거 시행한다.

가) 어장관리법

나) 수산업법

다) 해양관리법

라) 한국산업규격

마) 기타 본 과업에 관련되는 발주처의 각종 규정 및 기준 등

2. 도급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자의  책임이다.

3. 본 시방서와 설계도서간의 내용이 서로 다를 경우에는 시방서의 규정이 우선한다.

4. 본 시방서에 특별히 설명되어 있지 않은 사항이나, 시방서 규정의 문구 해석상 이견이 있을 시에는 발주처의 해석에 따른다.

5. 본 설계도서에 표시된 치수는 모두 완성된 치수로 한다.

6. 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 감독관이 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

7. 설계서를 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 사업용 재료원의 위치, 거리, 재질 및 생산조건이 변경될 때

나) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하여 변경이 불가피할 때

다) 사업량의 차이 등 사업현장의 제반 여건이 본 설계도서와 현저한 차이로 사업비의 증감이 발생할 때

라) 사업비 적산 기준, 특수항목의 견적내역 또는 공법이 변경될 때

마) 기타 발주처의 형편에 따라 변경이 필요할 때

8. 준공기한을 연장할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 기상 및 해상조건이 설계에 적용된 평년의 경우와 현저한 차이가 있을 때

나) 위 설계변경 사유 “나”, “다”항에 해당되어 예정공정 추진에 막대한 지장이 초래되었을 때

다) 기타 발주처의 형편에 따라 시공 중에 공사 중지 명령을 받았을 때

1 - 2 시공계획 및 관리

1. 도급자는 사업 착수와 동시 다음 서류를 구비 제출하여야 한다.

가) 사업 착수계  ※ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 금액은 당초 기초금액을 그대로 반영하여야 한다.

나) 예정공정표

다) 착수 전 사업장 전경사진

라) 현장 대리인계

마) 안전관리 책임자 선정계

바) 보안각서

2. 도급자는 착수 5일이내에 시행구역 우선순위를 구획하여 구역별 실시공정표와 사업 시행순서 및 인력, 장비동원 등 사업시행 실행계획을 수립하여 사업수행계획서를 제출하여야 하며, 감독관의 승인을 받아 사업을 조기에 적극 시행하여야 한다.

3. 사업구역 주변에 사업안내용 표지깃발을 부착 후 작업에 임하여야 한다.

4. 도급자는 감독관이 승인한 작업 상황보고 양식에 따라 당일의 작업내용, 취입인원, 취입장비 및 가동시간과 사업용 자재의 불출상황 등 작업 실적 및 익일의 작업계획을 감독관에게 보고 후 제출하여야 한다.

5. 도급자는 매월 말 그달의 작업월보 및 다음 달의 작업계획서를 제출하고 필요시에는 사업진도를 확인할 수 있는 사진을 첨부하여야 한다.

6. 사업 진도가 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의  추가 투입공정 만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생되는 경비는 일체 도급자가 부담한다.

1 - 3 안전관리

1. 본 사업은 주로 어장주변에서 이루어지므로 작업인부 및 해상장비(동원선박 등)의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의하여야 하며 작업 중에는 현장대리인 및 안전관리 책임자가 항상 상주하여 현장관리를 책임지휘 수행하여야 한다.

2. 작업장에 종사하는 동원인원은 안전모, 안전화, 구명대 착용 등 안전장비를 갖추어야 하며, 현장에 구급약품을 비치하여야 한다.

3. 도급자는 사업시행 중 해상작업, 중장비 사용 등으로 인한 인명, 재산피해 발생 시에는 도급자의 부담으로 하여 제반조치를 강구하여야 한다.

4. 도급자는 사업시행과정에서 사람의 통행에 위험을 초래할 수 있는 곳에는 위험표지 시설을 하여 사전사고 방지 대책을 강구하여야 한다.

5. 준공 시 안전관리비는 정산 처리하여야 한다.

1 - 4 현장대리인 및 현장종사원

1. 현장대리인은 사업기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 감독관과 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 감독관의 승인을 얻어야 한다.

2. 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 감독관의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장한다.

3. 감독관은 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 사업현장에 부적합하다고 인정하거나, 감독업무 수행에 장애가 된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이에 즉시 응하여야 한다.

4. 도급자는 현장종사원이 사업시행과 관련하여 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.

5. 안전관리 책임자는 사업기간 중 현장에 상주하여 모든 육, 해상 사업의 안전관리를 책임진다.

1 - 5 공정관리

1. 환경개선사업을 수행하는 도급자는 사업지구 내 관련어업인들과 사전 원만한 협의를 통하여 사업시행 우선순위별 구역을 구획하여 사업공정을 관리하여야 한다.

2. 도급자는 사업구역별, 공종별로 매 단계마다 감독관의 검사를 필한 후 다음단계의 작업을 시행하여야 하며 주요작업 과정은 수시 전문기술자의 기술자문 및 현장검증을 받아 작업을 진행시켜야 한다.

3. 도급자는 시방서에 의거, 사업구역별 표지시설을 설치하고 이를 양호한 상태로 유지 관리하여 사업 및 감독 관리가 용이하게 하여야 한다.

4. 도급자는 주요 공정에 대하여 사업추진 광경을 촬영(사진)하여 CD(혹은 비디오테이프)와 함께 사진첩을 편집하여 기성 또는 준공검사 시 3부를 제출하여야 한다.

5. 사업용 자재는 설계서 및 시방서에 명시된 품질 및 규격의 것을 사용하여야 하며 모든 자재는 감독관의 승인  을 받아 현장 반입하고 보관 관리를 철저히 하여야 한다.

6. 도급자는 사업시행 중 인근 어장에 해양환경영향 피해가 일어나지 않도록 해양오염 방지대책을 철저히 하여야 하며, 만약 민원이 발생하였을 때는 도급자의 책임으로 원만히 해결하여야 한다.

7. 본 사업은 시한부 사업으로 어장순기를 고려하여 효율적으로 실시하여야 한다.

1 - 6 검사 및 사업비 지급

1. 환경개선사업은 주요 공종이 해상에서 이루어지므로 공종별 매 작업단계마다 감독관 검사를 필하여야 하며, 매 공종검사 결과 검사 기준에 미달하였을 경우에는 공사감독관의 지시에 따라 도급자가 재시공 하여야 한다.

2. 사업비 지급은 매 공종별 작업 진행상황에 따라 발주처 감독의 검사결과에 의거 정산급으로 지급 할 수 있다.

1 - 7 기   타

1. 도급자는 사업 시행에 있어 관계기관에 제출하거나 관계기관의 승인을 필요로 하는 사항이 있을 때에는 관계  기관의 인·허가를 득하여 사업을 수행하여야 한다.

2. 도급자는 본 사업의 시행과 관계되는 제반법규를 준수하여야 한다.

3. 사업시행 중 발생하는 다음 항목의 경비는 도급자 부담으로 한다.

가) 사업시행으로 인한 경미한 각종보상 및 변상

나) 각종시험, 검사 및 검측

다) 사업용 각종 안내판, 표지 및 보완, 위험표지등의 설치

라) 지장물 철거 및 보관, 재설치

마) 기타 사업과 관련된 경미한 사항

4. 다음 각 호에 해당하는 사항은 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

가) 시설물 설치 및 각종표지물 설치

나) 주요자재 품질관리 및 공정계획 수립

다) 출입금지구역의 선정

라) 기타 사업시행 상 필요하다고 인정되는 사항

특    별    시    방    서

특    별    시    방    서

2 - 1 사업개요

1. 가로림만 해역의 해양생물보호구역으로 지정된 구역 내 무분별하게 방치된 폐양식 시설 정리 등 환경개선사업 추진을 통하여 어장환경을 개선을 도모

2 - 2 적   용

1. 본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 사항을 특별시방서로 명기하여 제반 시방서보다 우선하여 적용한다.

2. 본 환경개선사업의 원활한 추진을 위해 각 공종별로 작업수행 능력이 검증된 선박을 사용하여야 한다.

3. 투입되는 선박은 사전에 구비조건과 관련된 서류를 발주처에 제출하여야 한다.

2 - 3 사업착수 전 조치사항

1. 사업추진에 따른 사업설명 및 어장 내 설치된 어구 등에 훼손이 없도록 어업인간담회를 반드시 개최하고, 불가피한 사유로 개최가 불가능한 경우는 이를 갈음할 수 있는 홍보 등을 실시하거나, 발주처와 협의하여 방안을 강구하여야 한다.

2. 사업현장에 안내표지판 설치 등으로 안전사고 방지에 철저를 기하며, 종사자에 대한 안전교육 실시 및 안전수칙 준수여부를 수시로 확인하여야 한다.

3. 사업에 투입되는 고용인에 대하여 “고용보험”과 “산업재해보상보험법” 또는 “선원법”에 따라 보험가입 후 시행한다.

4. 사업 착수 전 사업위치(좌표 및 실위치)를 확인하여야 하며, 이를 미시행하고 착수 후 사업구역 변경에 관한 책임은 도급자의 책임으로 한다.

5. 본 사업의 원활한 추진을 위하여 사업구역 주변의 어장보호 및 위험물로부터의 안전 등을 위해 현지 사정에 밝은 관내 어업인 및 어선을 현장안내인 및 길잡이 안내선으로 활용할 수 있다(현장안내인 및 길잡이 안내선 투입 증빙 자료 철저 : 투입사진, 입금표, 입출항신고 등)

6. 길잡이안내선으로 어선을 사용할 경우 일반유를 급유하여야 하며 급유사진, 급유영수증, 선박입출항 확인서 등을 제출하여야 한다.

7. 사업 참여장비 및 작업선에 대하여 현수막 부착을 의무화 하고 어업활동 등 사업외의 다른 행위를 하지 못하도록 하여야 한다.

8. 모든 작업장비는 현장 투입 전 반드시 발주처가 지정한 장소에서 감독자의 검측 후 투입되어야 한다.

2 – 4 폐지주 제거

1. 사업시행 전 사업지구 내 관련 어촌계 및 어업인들에게 통지하고 확인된 후 어촌계장의 입회하에 사업을 시행한다.

2. 환경개선사업에 동원되는 모든 장비에는 “태안 가로림만 해역 해양보호구역 환경개선사업” 이라는 표지깃발을 부착 후 환경개선사업에 임하여야 하며, 설치 전 어촌계장과 충분히 협의하여 민원이 발생하지 않도록 해야 하며, 설치 작업 시 어촌계장과 동행하여야 한다.

3. 설치 전 꼭 작업현장의 위치 및 수심 조석예보를 확인하여 안전작업을 도모한다.

4. 설치 작업을 위하여 해당 사업면적과 위치에 표지 시설을 설치한 후 작업에 착수하여야 한다.

5. 폐지주 제거 및 해상이적 과정에서 철재류와 가연성류의 분류를 철저히 하여 섞이지 않도록 한다.

6. 분류작업 시 폐지주에 붙은 따개비 등의 패각류도 분리하여 섞이지 않도록 한다.

7. 적재된 폐기물은 예선 및 대선을 이용하여 육상하역장까지 해상운반하여 하역한다.

8. 폐지주 제거 작업 후에 부러지거나 짧은 폐지주가 잔존하여 민원이 발생할 경우가 크므로, 반드시 마이너스(-) 물때에 드러나는 사업지구내의 단봉을 제거하여야 한다. 검수과정에서 불합격시는 도급자 부담으로 재시공한다.

9. 폐지주 제거 공종의 완료 여부는 관계인들의 입회하에 현장 확인한 후 감독자가 결정하여야 한다.

10. 철재류 폐지주의 분류가 미비할 경우 현장감독이 재분류를 명할 수 있으며 도급자는 이에 따라야 하며, 폐지주의 철재류 및 가연성, 패각류 분류가 완전히 이행될 때 까지 폐기물의 반출 및 물량 검측은 중단한다.

11. 공인계량소에서 발주처 및 시공사의 관계자 공동 입회하에 계량한다.

2 - 5  현장입회비

1. 해당 어촌계장 및 어촌계 관계자와 사업 추진시 주요 공정에 참여하여 현장을 입회 확인하는 것을 말한다.

2. 각 주요 공정별 현장입회한 사실은 다음의 양식으로 작성하여 준공시 제출하여야 하며, 준공완료금 청구시 현장입회비는 정산처리 한다.

순 번	참여일자	소 속	성 명	생년월일	확 인 란

3. 정산방식은 현장입회비 범위 내에서 입금된 내역을 첨부하여 확인한다.

2 – 6 기   타

1. 환경개선사업을 시행함에 있어 작업구역 우선순위의 선정 등에 대해서 관할 어촌계의 의견을 충분히 수렴하고, 협조사항이나 문제점 발생 시 발주처 및 조사 설계자와 협의하여 조치하여야 한다.

2. 설계내역서에 근거하여 철저한 사업시행 관련자료(사진, GPS 항적기록 등)의 기록ㆍ유지와 일일 작업보고에 철저를 기하여야 한다.

3. 작업선박 항적기록 제출요령

- 모든 작업선박의 GPS 항적기록은 당일 작업종료 후 종이로 출력 또는 날짜 및 항적이 확인가능한 사진 촬영 후 제출

- 선박의 GPS 항적기록은 본 과업 수행을 위하여 최초 항해 시작일부터 기록이 모두 나타나야 하며, 작업 종료 후 발주처의 동 사업에 대한 최종 검측이 끝날 때까지 항적기록은 유지되어야 함.(항적기록 고의 또는 과실로 삭제 시 항적기록 미비로 준공조치가 지연되거나 사안에 따라 준공불가)

※ GPS 항적기록 문제 발생 시 작업 중단, 문제해결 후 작업재개

4. 도급자는 작업 전 사업구역 표지를 미리 설치하고 발주처가 일일 공정 완료의 확인이 어려운 작업 진행구역과 위치를 촬영하여 사업 전후를 비교·확인할 수 있도록 발주처 요구 시 제출할 수 있도록 하여야 한다.

5. 본 사업 수행 시 관계 어업인의 민원이 발생하지 않도록 도급자는 최대한 방지하고, 민원 발생 시에는 어촌계와 협의하여 원만히 해결하여야 한다. 법적 분쟁 발생 시 발주처 관할지에서 소송을 진행한다.

6. 작업지역 내 조업ㆍ기타민원 등으로 사업 추진이 어려울 경우 유관기관 및 관계어업인 등과 협의하여 사업기간을 조정하고 이를 발주처에 보고하여야 한다.

2 - 7 사업비 정산

1. 사업비의 증감이 발생될 때는 발주처와 협의하여 설계변경 또는 발주처의 예산범위 내에서 정산 처리한다.

2. 폐지주 제거는 작업량에 따라 사업비 범위 내에서 단가로 정산한다.

3. 본 설계도서의 산업안전관리비 및 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료, 길잡이 안내선, 현장입회비는 사후 사업비 범위 내에서 사용(집행)실적에 따라 실비정산을 원칙으로 한다. 다만 안전비품은 현장사용이 확인된 건에 한하여 반영한다.

4. 길잡이안내선은 사용 후 증빙서류(계약서, 선박증서, 유류영수증, 입금표, 선박입출항신고서 등)를 제출하고 실 투입일수로  정산한다.

2 - 8 준공서류 제출

1. 준공서류는 아래 각 서류를 반드시 포함하여야 한다.(원본 또는 원본대조필 날인)

가) 완료계, 완료검사원, 완료내역서

나) 어촌계 사업완료 확인서

다) 자재관련서류(허가증, 검사서, 자재확인서, 검정서 등)

라) 투입선박관련 증빙서류

마) 투입선박 및 장비의 GPS항적도

바) 4대보험 정산내역서 및 증빙서류

사) 산업안전보건관리비 정산내역서 및 증빙서류

아) 길잡이안내선 사용내역서 및 증빙서류

자) 현장입회내역 및 입금증빙서류

차) 작업일보

카) 공정별 사진첩

타) 선급금정산내역서 및 증빙서류(선급금을 수령한 경우)

파) 기타 감독관이 요청하는 서류

2. 준공검사를 위해 사전에 가제본 2부를 제출하고, 준공검사 완료 후 책제본 3부와 CD(책제본 자료 원본, 작업일보 원본, 사진 및 동영상원본 등 저장) 3부를 제출하여야 한다.

❏ 항적기록 출력요령 예시

❏ 공인검정기관의 검정보고서 예시

❏ 작업일지 예시