- 2020년 팔당호 침적쓰레기 수거작업 -

과 업  지 시 서

2020. 3.

경기도수자원본부

(수질관리과)

목      차

제1장 용역설명서  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1

제2장 일반과업지시서  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2

제3장 특별과업지시서  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5

제1장  용역 설명서

본 과업은 팔당호 내의 침적쓰레기 수거를 통하여 상수원 보호와 환경 친화적인 생태하천을 조성하는데 그 목적이 있다.

1. 용역내용

가. 용 역 명 : 2020년 팔당호 침적쓰레기 수거작업

나. 용역기간 : 착수일로부터 45일

다. 용역종료 : 계약면적 309.7ha의 탐색 및 침적쓰레기 수거완료 시점

라. 사 업 지 : 팔당상수원보호구역 북한강권역

마. 사 업 량 : 팔당호의 총102개 분할구역 중 14개 구역

1) 수거작업 지역 : 북한강 수역 309.7ha

2) 예상 침적 쓰레기 양 : 14.99톤

2. 용어 정리

가. 발주처 : 경기도수자원본부

나. 도급자 : 용역수행자

다. 감독관 : 본 과업을 감독하도록 임명된 공무원

3. 과업 공종

가. 팔당호 침적쓰레기 탐색 및 수거

1) 잠수사가 투입되어 수중 침적쓰레기 탐색 및 수거하는 작업을 실시한다.

2) 선적 및 운반은 경기도수자원본부의 인력과 장비를 이용한다.

4. 기 타

가. 본 과업은 용역설명서 및 일반과업지시서, 특별과업지시서에 따라 시행한다.

나. 본 과업은 수중에서 시행되어지므로 침적쓰레기 탐색 및 수거작업 등이 천재지변이나 수중장애 등으로 인해 원활하게 진행되지 않을 경우 발주처와 긴밀하게 협의 하여 일정 및 작업방법 등을 개선하여 수행한다.

다. 본 과업과 관련하여 환경 친화적인 새로운 기술의 적용이 필요할 시 도급자는 발주처와 협의하여 허가를 득한 후 추진할 수 있다.

제2장 일반 과업지시서

1. 일반사항

가. 도급자는 본 과업지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

나. 도급자는 본 과업지시서의 제반 내용을 숙지하여 작업을 실시한다.

다. 본 과업지시서에 특별히 설명되어 있지 않은 사항이나, 문구 해석상 이견이        있을 경우 쌍방이 합의하여 결정한다.

라. 도급자는 환경오염 방지나 과업수행 방법 등에 대한 발주처의 의견제시 및 지적사항에 대하여 적극적으로 검토 ․ 개선 ․ 보완하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 기술되어 있지 않으나, 과업수행에 필요하다고 인정되는 당연한 사안은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

바. 과업지시서의 내용을 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.

1) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하여 변경이 불가피할 때.

2) 발주처의 추가 과업지시 등으로 변경이 필요하다고 판단될 경우.

3) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 경우.

사. 천재지변 기타 불가피한 사정으로 과업이 중단되었을 경우 과업수행 정산금은 아래 특별과업지시에 기술된 내용을 기준으로 과업수행 중단시점까지 완료한 면적과 수거량을 기준으로 정산한다.

2. 시공계획 및 관리

가. 도급자는 과업 착수와 동시 다음 서류를 구비 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 예정공정표

3) 현장대리인계

4) 안전관리책임자 선정계

5) 보안각서

나. 도급자는 과업 착수 5일 이내에 예정공정표에 의거 과업지구 내 침적쓰레기  수거과업 시행구역 우선순위를 구획하여 구역별 실시공정표와 과업 시행순서  및 인력․장비동원 등 과업수행계획을 수립하여 발주처에 제출하여야 하며, 감독관의 승인을 받아 후에 시행하여야 한다.

다. 도급자는 작업 상황보고 양식에 따라 당일의 작업내용, 투입인원, 투입장비 및 가동시간, 작업 실적 및 작업계획을 감독관에게 사전에 제출하여야 한다.

라. 과업 진도가 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 작업시간의 연장, 인원 및 장비 추가 투입 등과 같이 원만한 과업수행을 위한 조치를 취하여야 한다.

3. 안전관리

가. 본 과업은 수중에서 주로 이루어지므로 작업인부 및 수상장비(작업선박 등)  안전관리를 위하여 기상예보에 유의하여야 하며, 과업수행 중에는 현장대리인이 상주하여 현장관리를 하여야 한다.

나. 출항 전후 및 작업수행 전후에 감독관에게 기상상황과 작업수행지역의 환경을 보고해야한다.

다. 도급자는 제반 안전수칙을 준수하여야 하며, 과업수행 중 발생하는 모든 사고에 대하여 도급자가 민․형사상 책임을 진다.

라. 과업시행 중 발생하는 인명이나 재산피해 발생 시 도급자의 부담으로 제반 조치를 강구하여야 한다.

마. 도급자는 과업수행과정에서 선박통행으로 인하여 위험을 초래할 수 있는 곳에는 위험표지나 잠수작업표시를 설치하여 사전 사고방지 대책을 강구해야 한다.

바. 수중작업은 선상에 안전요원배치, 잠수작업은 2인1조 등의 수칙을 준수           하여 수행한다.

4. 현장대리인 및 현장종사원

가. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업수행에 관한 제반사항을 감독해야한다.

나. 현장종사원은 신원이 명확해야 하며 자격증 보유자이어야 한다.

다. 감독관은 현장대리인을 포함한 도급자의 종사원이 과업수행에 부적합, 불가능하다고 판단 할 경우 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있다.

라. 도급자는 현장종사원이 과업수행과 관련하여 공․사물에 피해를 주었을 경우 이에 대해 적법한 보상을 하여야 한다.

5. 공정관리

가. 도급자는 과업지구 내 발주처와 협의하여 과업시행 우선순위별 구역을 구획  하여 공정을 관리하여야 한다.

나. 도급자는 과업지시서에 의거, 과업구역별 부표 등의 표지시설을 설치하고 이를 양호한 상태로 유지 관리하여 과업 및 감독 관리가 용이하게 하여야 한다.

다. 도급자는 주요 공정에 대하여 과업수행과정을 촬영(사진)하며, 준공검사 시  서면자료와 USB저장 파일 3부를 제출하여야 한다.

라. 과업수행용 자재는 과업지시서에 명시된 품질 및 규격의 것을 사용하여야 하며 모든 자재는 감독관의 승인을 받아 현장에 반입하고 보관 관리를 철저히 하여야 한다.

마. 도급자는 과업시행 중 수질이나 수생태 환경에 오염이나 피해가 발생하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

바. 과업수행 중에 민원이 발생하지 않도록 유의하며, 발생한 민원에 대하여 도급자의 책임으로 처리해야 한다.

6. 기 타

가. 도급자는 선박운항 등과 같이 과업수행에 필요로 하는 사안은 관계기관의 인ㆍ허가를 득하여 진행하여야 한다.

나. 도급자는 본 과업의 시행과 관계되는 제반법규를 준수하여야 한다.

다. 과업시행 중 발생하는 다음 항목의 경비는 도급자 부담으로 한다.

1) 과업수행중 발생하는 경미한 사항에 대한 보상이나 변상

2) 과업용 각종 안내판(홍보, 현수막포함), 표지 및 보완, 위험표지 등의 설치

3) 지장물 철거 및 보관, 재설치

4) 기타 과업수행과 관련된 경미한 사항

라. 다음 각 호에 해당하는 사항은 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

1) 시설물 설치 및 각종 표지물 설치

2) 주요자재 품질관리 및 공정계획 수립

3) 기타 과업수행 상 필요하다고 인정되는 사항

제3장 특별 과업지시서

본 과업지시서는 일반 과업지시서에 명기되지 않은 사항과 상수원의 특별한 환경을 고려한 사항으로서 일반 과업지시서 보다 우선하여 적용한다.

1. 침적쓰레기 수거

가. 수거 작업 시 안전 조치 및 오염방지 작업을 실시한다.

1) 작업선에“2020년 팔당호 침적쓰레기 수거작업” 표식을 설치한다.

2) 작업현장에는 현장대리인이 현장지휘를 하여야 한다.

3) 잠수작업 시에는 “잠수작업 중 깃발”을 게양하여야 한다.

4) 작업예상구역에 오일펜스를 설치한다.

5) 잠수작업선은 선박운항허가를 득하고 운항해야 한다.

나. 작업방법

1) 잠수부가 탐색한 소형쓰레기는 직접 수거하고 중량물은 수중결박 후 표식을        하여 발주처의 인원과 장비로 인양한다.

2) 작업구역의 우선순위를 정하여 작업을 실시하며, 각 구역별 작업 종료 시  발주처의 확인 후, 다음 구역으로 이동하여 작업을 실시한다.

다. 수거 대상물은 다음과 같다.

1) 수거대상물은 목재, 어구, 고무, 철재, 콘크리트 등 수중에 산재한 쓰레기로 한다.

2) 위의 수거 대상물 중 상수원의 관리나 호안보호를 위해 설치된 콘크리트, 벽돌 등과 같은 인공물은 제외한다.

3) 콘크리트 혹은 건축 폐자재 등과 같은 대상물 중, 철근이나 플라스틱 등과 같은 구성 물질이 노출되어 오염의 우려가 있거나, 상수원관리나 선박운항에 지장이 되는 인공물은 감독관의 지시에 따라 처리한다.

라. 오일펜스는 용역완료 후 발주처에 반납하고 지정된 장소에 적재한다.

2. 작업량 측정방법

가. 작업의 시작시점은 착수계를 제출한 시점으로 하며, 용역종료시점은 계약면적 탐색 및 대상물 수거 완료시점으로 한다.

나. 매일 탐색한 면적에 대한 작업량을 문서로 작성하여 보고하고, 감독관과 함께 확인한다.

나. 침적 쓰레기의 수거량 측정은 다음과 같이 실시한다.

1) 수거물은 우리본부가 지정하는 장소에 하역하여 보관하되, 침출수와 비산먼지의 예방조치를 실시한다.

2) 필요시 중간 계측은 쌍방이 참석하여 실시하되 그 방법은 쌍방이 협의하여 결정한다.

3) 수거물의 중량은 용역완료 후 반출 시 우리본부가 지정하는 공식 계근장을 이용하여 계측하며 이를 공식적인 수거량으로 한다.

3. 용역비 정산방법

가. 용역비 정산은 계약면적과 수거량을 기준으로 하되, 적용비율을 위한 상수의        결정은 작업의 경중 및 난이도를 감안하여 탐색 면적 0.7, 수거량에는 0.3을        적용한다.

나. 용역비 지급방법은 다음과 같이 4가지 경우로 구분하여 정산한다.

계약면적 (309.7ha)	계약수거량 (14.99톤)	지급방법	정산방법 적용상수 : 면적(0.7), 수거량(0.3)
완료 ❍	만족 ❍	전액지급	⁃ 계약금액 지급
완료 ❍	부족 ✖	일부감액	⁃ 감액금액= 계약금액×0.3×(1-수거량/14.99톤)
미완료 ✖	만족 ❍	일부감액	⁃ 감액금액= 계약금액×0.7×(1-완료면적/309.7ha)
미완료 ✖	부족 ✖	일부감액	⁃ 감액금액 = 감액① + 감액② 감액① = 계약금액×0.3×(1-수거량/14.99톤) 감액② = 계약금액×0.7×(1-완료면적/309.7ha)

※ 적용상수: 면적 0.7, 수거량: 0.3.    ❍: 완료 만족,  ✖: 미완료, 부족

다. 본 과업지시서 제2장 1절‘사’항, 사정에 따른 “과업 중단”의 경우도 위의 제시된 정산방법을 따른다.

4. 용역 후 준공검사 방법

가. 용역완료 된 수역은 발주처 부담으로 침적쓰레기 수거상태를 검사한다.

나. 검사방법은 대상 작업 지 1구역 당 1개소 구역을 임의 선정하여 검정한다.

다. 확인결과 미 수거량이 발생할 경우 해당 구역에 한하여 다시 수거작업을  실시하여야 한다.

붙임 1. 구역별 침적쓰레기 예상량

2. 침적쓰레기 수거작업 위치도

3. 침적쓰레기 수거 작업일지

[붙임1]  구역별 침적쓰레기 예상량

연번	구역번호	면적(ha)	평균수심(m)	침적쓰레기량(kg)	비고
1	1-1	20.6	9	1,996
2	1-2	16.2	9	1,200
3	1-3	15.2	8	914
4	1-4	26.9	9	1,274
5	1-5	12.4	8	1,581
6	1-6	17.1	4	1,225
7	1-7	25.5	9	944
8	1-8	18.0	11	600
9	1-9	21.6	7	700
10	1-10	40.1	10	242
11	1-11	24.3	9	1,068
12	1-12	16.9	7	802
13	1-13	29.3	9	2,139
14	1-14	25.6	8	305
합계		309.7	8.4	14,990

[붙임2]  침적쓰레기 수거작업 위치도

- 북한강 총 14개 구역

수거작업

완료구역

2020년

작업예정

[붙임3]

침적쓰레기 수거 작업일지(   월   일)

□ 구간 명칭 및 작업량 보고:

구 분	작업구역 No	탐색면적(ha)	수거완료면적(ha)
일일 작업량
총 누계

□ 작업내용 :

□ 투입장비 :

□ 투입인력 :                명

□ 작업 및 수거사진

위와 같이 확인합니다.

2020.    .    .

현장책임자 :           직                   성명               인

감  독  관 :           직                   성명               인