공  사  설  명  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공사명 : 2020년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사

2. 공사위치 : 강북통합취수장(경기도 남양주시 와부읍 경강로 682)

3. 공사목적 : 장마철 폭우에 유실을 방지하고, 설치된 조류차단막 및 오일휀스를 철거하고, 장마이후 하반기에 재 설치하여 오일 및 부유물유입을 방지함으로서 깨끗하고 안전한 원수를 취수하고자 함.

4. 공사개요

○ 조류차단막 철거(L=320m), 설치(L=320m) : 1개소

○ 오일 휀스  철거(L=400m), 설치(L=400m) : 1개소

5. 준공기한 : ’20. 11. 30일한

6. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년

7. 예정 공정표

○ 기상철 장마예보 및 조류등에 따른 시기 조정

기간(월) 공종	5월 6월 7월	장마철	8월 9월 10월 11월	비 고
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비
조류차단막 및 오일휀스 철거				철거
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비
오일휀스 설치				설치
준공 및 검수