2020. 07.

고래불해수욕장 해파리 피해방지 차단망 설치관리용역

과  업  지  시  서

1.0 사업명

「고래불해수욕장 해파리 피해방지 차단망 설치관리용역」

2.0 적용범위

2.1 사업기간 : 계약일로부터 설치·철거 완료일까지

구 분	일 정	비 고
설치기간	착공일로부터 ∼ 해수욕장 폐장일까지
관리운영	2020년 7월 17일부터 ∼ 2020년 8월 23일까지
철거기간	2020년 8월 24일부터 ∼ 2020년 9월 15일까지

※  발주청과 현장 사정에 따라 설치, 철거, 관리운영 시기는 변동될 수 있음

2.2 과업범위

가. 해파리 피해방지 그물형 차단망 설치 및 철거

나. 해파리 피해방지 차단망 시설 유지 및 관리

※ 태풍 등 천재지변 발생 시 설치 및 철거 후 사후 별도 정산

다. 선박을 이용한 일몰 전까지 이동 순찰 및 월파 해파리 제거

라. 부유쓰레기 및 해파리 등 폐기물 처리

마. 그물형 차단망 설치 및 운영에 관한 모니터링 및 해황조사

2.3 안전시설 설치 개요

가. 설치장소 : 경북 영덕군 병곡면 고래불해수욕장 앞 바다(발주청이 지정하는 장소)

❍ 규    모 : 해파리 피해 방지 그물형 차단망

나. 계약수량 및 시설개요

❍ 그물형 차단망 : 1개소 L = Max. 400m ,  H = Max. 4m

품 명	규 격	수 량	비고
해파리 차단망 설치 및 철거	L = 400m, H = 4m	1식
해파리 차단망 관리운영	2020.07.17. ~ 2020.08.23.	1식

본 과업지시서는 「고래불해수욕장 해파리 피해방지 차단망 설치관리용역」을 위한 설계, 제작, 설치, 교체, 품질보증, 운반, 검사 및 시험 등에 적용한다.

3.0 일반사항

3.1 「고래불해수욕장 해파리 피해방지 차단망 설치관리용역」과 관련하여 참여하는 시공기술자는 해파리차단망 설치 관련 유경험자이어야 한다.

3.2 공장에서 완제품을 제작하는 경우와 현장에서 조립하는 경우의 주요 작업은 제작 공장 파견 작업자 또는 동등 이상의 기술을 소유한 자이어야 한다.

3.3 제작업자는 설계서에 정해진 제품의 품질 등을 확보하여 과업지시서에 준해 제작하고 설치한다.

4.0 검사 및 시험 요건

4.1 시험 일반사항

4.1.1 계약상대자는 공급되는 모든 기자재에 대하여 적절한 시험 및 검사를 실시하여야 하고 신뢰도 및 성능 상태가 과업지시서  및 설계서의 요구 사항에 일치하여야 하며 또한 일반적인 표준 규격에 위배되는 사항이 없어야 한다.

4.1.2 계약상대자는 설치, 시험 및 검사의 필요상 발주자의 요청에 따라서 자격이 있는 경험 요원을 파견하여 조치되도록 한다.

4.1.3 계약상대자는 시험에 필요한 시험장비 및 연결 부속자재 등과 방법 등을 제시□제공하여야 한다.

4.2 자체검사

4.2.1 현장 제작이 완료된 부재는 자체 검사를 행하고, 그 결과를 기록하고 발주자의 요구가 있을 시 제출하여야 한다.

4.3 현장시험 입회검사

4.3.1 검사항목과 절차는 현장시험 입회검사와 품질서류에 의거 실시한다.

4.3.2 현장시험 입회검사결과가 “불합격” 판정시에는 계약상대자는 보완작업을 통해 재검사를 받아야 한다.

4.3.3 현장시험검사(설치시)

1) 외관 및 치수검사

2) 체인+그물망 연결상태 검사 등

3) 설치 기반 준수 사항 검사 등

5.0 포장, 저장 및 운송 요건

5.1 운송계획은 현장조립에 지장을 주지 않도록 하고, 교통, 안전 등의 관계 법령에 따라 작성한다.

5.2 운송에 있어서는 제품에 손상이 없도록 충분히 주의하고, 부재의 손상이 가지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

5.3 사전에 운송 날짜를 발주자에게 보고하여야 한다.

5.4 계약상대자는 제품 운반 일자를 보고한 후 발주자가 요구하는 장소에 제품을 운반, 하역 및 현장제작, 설치하여야 한다.

5.5 계약상대자는 수송 중 기자재가 손실 또는 파손되지 않도록 견고하게 포장하여야 한다.

5.6 계약상대자는 부적절한 포장으로 인하여 기자재 손실, 파손 또는 품질변화 등이 발생하였을 때는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

6.0 취급 및 보관 요건

6.1 야적 또는 적재 시 그물망에 큰 하중이 걸리지 않도록 주의 한다.

6.2 로프는 외부면이 매끄러우므로 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 적재 시 안전하게 고정시킨다.

6.3 해파리 차단 그물망은 사용 후 세척 및 보수작업을 거쳐 청결한 장소에 보관하여 향후 사용 가능하도록 한다.

6.4 PP 로프를 지면에 보관할 경우에는 돌이나 날카로운 물체 등을 제거하고 평탄하게 지면을 정리한 후 로프를 적재한다.

6.5 PP 로프 및 그물망은 열에 약하므로 반드시 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 보관한다.

7.0 공정 및 납품

7.1 착수 준비

7.1.1 계약상대자는 입찰 후 3일 이내에 계약을 완료하고 5일 이내에 용역수행계획서를 첨부하여 발주처의 승인을 얻은 후   용역에 착수하여야 한다.

가. 용역수행계획서에는 다음 사항을 구체적으로 기재한다.

□ 착수 보고서

□ 예정 공정표

□ 설치 및 관리 계획서

□ 기타 발주처가 필요하다고 인정하여 계약상대자에게 요청하는 사항 등

7.2 과업의 수행방법

7.2.1 본 용역은 계약서, 과업지시서, 설치 및 관리 계획서 및 발주처와 계약상대자 간의 협의사항 등에 따라 성실히 수행하여야 한다.

가. 계약상대자는 용역사업 완료 후 7일 이내에 준공계 서를 제출하여야 한다.

7.3 성과품 및 자료제출

7.3.1 계약상대자는 용역이 완료되어 준공계 등 성과물을 제출하여야 한다.

7.3.2 계약대상자는 설치후 차단막의 수중거치 상태를 수중촬영 하여 제출하여야 한다.