과 업 지 시 서

상수원보호구역 수변 수중청소 용역

2020. 7.

서울특별시한강사업본부

1. 목    적
본 과업은 한강 수변 바닥에 산재된 수중쓰레기를 인력(잠수부)으로 수거하기 위함이며, 궁극적으로는 한강 수질보호 및 생태환경 개선을 목표로 한다.

2. 개    요

가. 건    명: 상수원보호구역 수변 수중청소 용역

나. 과업기간: 계약일로부터 100일

다. 과업내용: 잠수부를 활용한 상수원보호구역 수변의 수중쓰레기 수거

- 청 소 면 적 : 140.6ha

- 투입자원기준: 인력 7명(총괄1, 잠수감독1, 잠수부5), 소형보트 1척, 잠수장비세트 등

3. 일반사항

가. 본 과업지시서는 “상수원보호구역 수변 수중청소 용역”에 대하여 적용한다.

나. 계약상대자는 과업지시서와 관계법령에 따라 성실히 과업을 수행하고 양질의 과업목적달성을 이루도록 만전을 기한다.

다. 계약상대자는 과업 진행현황, 현안 등에 대하여 발주기관감독관(이하 “감독관”)과 수시 협의하여 과업이 원활히 진행되도록 한다.

라. 계약상대자는 본 과업지시서에 기술되지 않거나 불명확한 내용에 대해 감독관과 협의하여 해석 및 의견을 확인하되, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 감독관의 해석에 따른다.

마. 계약상대자는 과업 진행과정에 변경이 필요하거나 추가 또는 조정사항이 있는 경우, 발주기관과 협의한 후 감독관의 지시에 따른다.

바. 계약상대자는 본 과업과 관련하여 하도급 계약체결 및 이행함에 있어 우선 발주기관에 신고하고, 법령에 위반되는 하도급(일괄하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 금지하며, 관계법령에 따라 공정한 거래를 한다. 또한, 하도급대금을 지급할 때 전자세금계산서 등을 발행하여 공정거래사실이 확인 가능한 증빙서류를 보관해야하며, 감독관이 요구 시 거래증빙서류를 즉시 제출한다.

사. 계약상대자는 본 과업 수행과정에서 수집된 모든 정보는 발주기관의 승인 없이 사용하거나 타인에게 제공하지 아니한다.

4. 과업내용

가. 청소면적: 140.6ha (연장 14,060m × 폭 100m)

나. 청소구역

1) 1차 청소: 취수구 주변

- 구리암사대교 남단 상류측에서 상류1.26km ~ 구리암사대교 남단 상류측에서 상류0.76km

- 구리암사대교 남단 상류측에서 상류0.25km ~ 구리암사대교 남단 상류측에서 하류0.25km

- 올림픽대교 남단 남단측에서 하류0.02km ~ 올림픽대교 남단 하류측에서 하류0.35km

- 잠실철교 남단 하류측 ~ 잠실대교 남단 상류측에서 상류0.3km

- 올림픽대교 북단 하류측에서 하류0.08km ~ 잠실철교 북단 상류측

2) 2차 청소: 강북 및 강남 수변

- 광진교 북단 상류측에서 상류1.3km ~ 잠실철교 북단 상류측

- 강동대교 남단 상류측에서 상류0.65km ~ 구리암사대교 남단 상류측에서 상류0.76km

- 구리암사대교 남단 상류측에서 상류0.25km ~ 올림픽대교 남단 상류측에서 상류0.36km

- 올림픽대교 남단 남단측에서 하류0.02km ~ 올림픽대교 남단 하류측에서 하류0.35km

- 잠실철교 남단 하류측 ~ 잠실대교 남단 상류측에서 상류0.3km

※ 청소구역 참고

다. 청소방법

1) 본 과업에서 수중청소는 잠수부(공기통)에 의한 수중쓰레기 수거를 의미하며, 청소구역설정, 청소작업, 수거쓰레기 하역으로 진행한다.

2) 기상여건 등 불가항력적인 상황이 아니고서는 각 차수의 청소구역에 대한 수중청소는 연속으로 수행한다.

3) 청소구역을 확인하고 그 경계에 선박, 부표 등 잠수작업 상태를 알리는 표시를 한다.

4) 수중청소 투입인력은 7명(총괄1, 잠수감독1, 잠수부5)을 기본단위로 한다.

- 총    괄: 청소구역설정, 선박조종 등 작업총괄

- 잠수감독: 잠수감독, 잠수구역 내 장애물 유입방지, 총괄보조

- 잠 수 부: 수중청소요원, 수거쓰레기 하역 등

5) 수중청소 중 수질오염이 가능한 쓰레기(기름통 등)를 발견한 경우에는 즉시 수거하지 않고 그 지점을 알 수 있도록 부표설치 및 감독관에게 보고한다.

6) 잠수부 수중청소 1시간 기준은 다음과 같다.

- 준비 및 입수: 5분

- 수중쓰레기 수거: 40분

< 수거쓰레기 적치장소 >

- 출수 및 쓰레기 적재: 5분

- 휴식: 10분

7) 수거한 쓰레기는 천호대교 남단 하류 80m
지점 육상에 적치한다.

5. 과업수행

가. 일반사항

1) 계약상대자는 과업수행으로 인한 인명 및 시설물 피해가 없도록 선박운항, 잠수청소에 신중을 기하고 계약상대자의 과실로 사고가 발생할 경우 민·형사상의 책임을 진다.

2) 과업수행 중 감독관 지시(지적)사항은 즉시 검토 보완한다.

3) 계약상대자는 과업수행에 필요한 선박 등 장비에 대하여 하천점용허가를 득한 후 수중청소를 실시한다.

4) 수중청소는 산업안전보건법 제140조 및 관련 규정에 의한 수중에서 행하는 작업이 가능한 자격·면허·기능 또는 경험을 갖춘 잠수부가 수행한다.

나. 착    수

1) 계약상대자는 과업수행 전 아래내용이 포함된 수행계획서(착수신고서)를 제출하고 감독관 승인 후 수중청소를 실시한다.

- 현장대리인 신고(이력서, 재직증명서, 자격증 등 첨부)

- 과업 예정공정표(청소구역, 실시일정, 투입자원 등 포함, 기상여건을 고려한 공정)

- 인력정보, 잠수자격증, 선박면허, 선박정보(국적증서, 검사증서) 등

- 과업수행 중 인력, 장비 등 변경하고자 할 경우 감독관에게 승인을 받고 변경한다.

2) 사전에 감독관과 협의되지 않은 수중청소는 인정하지 않는다.

3) 계약상대자는 당일 수중청소에 대한 작업일보를 익일 10:00까지 감독관 메일로 제출한다.

다. 안전사항

1) 계약상대자는 과업수행 전에 잠수범위, 응급구조계획 등 잠수계획을 수립해야 하며,  과업수행자에 대하여 수중작업 관련 안전교육을 실시해야 한다.

○ 잠수작업 주의사항

- 잠수는 절대 혼자 하지 않는다.

- 잠수부는 자신의 훈련수준과 경험의 한계 내에서 잠수한다.

- 잠수부는 깊이와 상관없이 항상 부력조절기를 착용하고 잠수한다.

- 잠수작업 시 호흡이 거칠어지면 정상을 되찾을 때까지 작업을 쉬어야 한다.

- 잠수부는 상승 시 수면이 가까워질수록 속도를 늦춰야 하며, 선박이나 장애물이 없는지 살피며 상승한다.

- 기타사항은 「잠수작업 안전기술지침」을 충분히 숙지하고 수중청소에 임한다.

※ 위 지침은 산업재해예방을 위하여 한국산업안전보건공단이 제정한 것으로 잠수에 대한 안전지침이 기술되어 있으며, 특히 「4.5 스쿠버 잠수작업 안전수칙」을 반드시 준수하여 안전사고를 예방한다.

2) 계약상대자는 과업수행 전에 팔당댐의 방류량, 한강수위, 일기개황 등을 검토한 후 작업을 실시한다. 잠수여건이 좋지 않다면 잠수를 취소하고 감독관에게 보고한다.

3) 계약상대자는 과업수행 전에 다음의 사항을 반드시 확인한다.

- 잠수부의 육체적·정신적인 입수준비 상태

- 잠수부의 장비상태(실린더 압력, 부력조절기, 중량벨트, 손목시계, 수심계 등)

- 잠수할 장소의 기상상태, 장애물, 조류, 깊이, 시야 등 여러 요소를 파악하고 환경상태가 좋지 않으면 잠수를 과감하게 취소한다.

4) 총괄 및 잠수감독자는 잠수구역에 선박이나 기타 장애물이 들어오지 않도록 조치한다.

5) 잠실수중보 및 취수구로부터 200m 이내로 접근하지 않는다.

6) 잠수부의 잠수시간은 하루에 6시간이 넘지 않도록 한다.

7) 선박은 잠수장비, 인력, 쓰레기 적재가 충분히 가능한 것으로 수중청소에 사용한다.

라. 준공 제출서류

1) 수중청소 결과보고서(사진첩포함) 2부.

2) 준공계 2부.

붙임  수중청소 작업일보 1부.

[ 붙  임 ]

수중청소 작업일보

○ 일    시: 2020. 0. 00. 00:00~00:00

○ 청소구간:

○ 투입인력: 0명 (누계: 0명)

- 성   명: ○○○, ○○○, … (작업에 참여한 인원 모두 작성)

○ 투입장비: 예시> 선박 1척, 공기통 20개, 잠수장비 5세트

○ 수 거 량: 0[kg] (누계: 0[kg])

○ 특이사항: 예시> 대형 폐타이어 올림픽대교 상류 600m지점 발견

○ 작업 및 수거사진

내용: 금일 수거쓰레기 사진	내용:	내용:
내용:	내용:	내용: