「상수원보호구역 수중쓰레기 분포조사 용역」

과   업   지   시   서

2020. 8.

서울특별시 한강사업본부

Ⅰ		개 요

1. 과업목적

○ 잠실대교 ~ 구리암사대교 구간에 침적된 수중쓰레기의 현황 파악과 처리의 타당성 검토 등 안정적인 수질 및 수생태계 환경 개선 관리 도모

2. 과업개요

○ 과 업 명 : 상수원보호구역 수중쓰레기 분포조사 용역

○ 과업기간 : 계약일로부터 100일

○ 과업범위 : 잠실대교 ~ 구리암사대교(약 492ha)

< 잠실대교 ~ 구리암사대교>

※ 효과적인 현장 조사를 위하여 조사 대상구역을 잠실대교부터 구리암사대교 까지 지정 함

3. 과업내용

○ 잠실대교 ~ 구리암사대교 구간의 수중쓰레기 분포조사

○ 조사된 자료를 근거로 과업범위 내 전 구간에 대한 수중쓰레기 분포도 작성

Ⅱ		과업 세부내용

1. 잠실대교 ~ 구리암사대교 구간의 수중쓰레기 분포조사

○ 과업범위 내 전 수면적에 대한 수중영상탐사(Side Scan Sonar)를 실시하고, 수중쓰레기에 대한 개략적인 성상 및 위치를 파악하여야 한다.

- 길이 50cm 이상의 수중쓰레기 위치를 좌표로 표시하고 성상 및    종류, 예상 침적량 등 상세정보를 파악하여 용역보고서에 구간별로 인쇄 출력하여 첨부하여야 한다.

○ 수중영상탐사 조사 시 확인된 수중쓰레기 위치와 과업범위 내 전 수면적을 격자로 구분하고, 각 구간별로 잠수부에 의한 육안조사를 원칙으로 한다.

- 수심이 낮아 육안으로 확인이 가능한 지점, 수중영상탐사(Side Scan Sonar) 결과 수중쓰레기가 없을 것으로 예상되는 지점에 대한 육안 조사는 발주처와 협의하여 생략할 수 있다.

- 육안조사결과 상세정보를 파악하여 기록하여야 한다.

○ 과업범위 내 전 수면적을 격자로 구분하고, 각 구간별 샘플링  조사를 실시한다.

- 강 바닥에 침적된 쓰레기량을 파악하여 쓰레기 총량 산출에 적용하여야 한다.

2. 조사된 자료를 근거로 과업범위 내 전 구간에 대한 수중쓰레기 분포도 작성

○ 수중쓰레기 분포 현황도(축척 1:2,500)를 성상별로 구분하여 작성하고 조사 결과를 좌표로 표시하여 상세정보를 구축한다.

○ 수중쓰레기의 수중영상탐사(Side Scan Sonar) 자료와 직접촬영 사진을 보기 쉽게 배치하여야 한다.

○ 기초물량표를 작성 및 분석하고 우심구역과 비우심구역을 선정하여 수중쓰레기의 분포량을 추정하여야 한다.

Ⅲ		행정 사항

1. 기본방향

○ 과업수행자는 과업지시서와 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 과업을 수행하여야 하며 과업의 목적달성 및 과업의 질적 향상이 이루어지도록 노력하여야 함

○ 과업수행자는 과업지시서를 충분히 검토하여 과업수행계획을 수립, 착수보고서에 수록하여야 하며, 과업지시서 내용에 이견이 있을 경우에는 감독관과 사전 협의하여야 함

2. 과업착수 및 수행계획서 제출

○ 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된   과업수행 계획서를 제출하여 서울특별시 한강사업본부의 승인을 받아야 함

- 과업수행 방향 및 절차, 일정

- 과업수행 세부계획서

- 사업비 소요명세서(산출내역서)

- 분야별 참여인력 및 조직 편성표 및 업무분장 내역

- 잠수자격증, 선박면허, 선박정보(국적증서, 검사증서) 등

- 안전관리 대비 사항

- 참여기술자 및 조사원 등 개인별 보안유지 각서

- 기타 감독관의 지시 및 승인을 받아야 할 사항

3. 공정보고 및 감독

○ 과업수행자는 과업수행기간 중에 자문위원이 참여하는 3회 이상의 보고회를 개최하여야 하고, 개최 7일 전에 담당 감독관에게 회의에 필요한 자료 또는 보고서를 제출하여야 하며, 회의 수당 등 필요한 경비는 내역서에 포함됨

○ 자문위원은 관련 업계·학계·연구기관 및 관계기관 공무원 등의 전문가로 구성하며 보고회 개최 7일 전에 담당 감독관과 자문위원 구성에 대한 협의를 완료해야 함

- 착수보고 : 계약일로부터 1개월 이내

- 중간보고 : 계약일로부터 2개월 이내

- 최종보고 : 계약만료일 30일 전

○ 과업수행자는 과업진행현황, 수행방향, 현안 등을 감독관과 수시 협의하여야 함

4. 과업 수행

○ 과업수행자는 과업수행에 필요한 선박 등 장비에 대하여 하천점용허가를 받아야 함

○ 잠수확인 조사는 산업안전보건법 제140조 및 관련 규정에 의한 수중에서 행하는 작업이 가능한 자격·면허·기능 또는 경험을 갖춘 잠수부가 수행하여야 함

○ 과업수행자는 착수일로부터 당일의 조사내용, 투입인력, 항적사진 등 작업실적 및 익일의 조사계획을 일일 작업일보를 통해 감독관에게 제출하여야 함

○ 과업수행자는 중간, 최종보고회 및 각종 자문회의 시 회의록을 작성하고, 논의된 사항에 대해서는 검토 후 수용여부를 7일 이내에 보고하여야 하며, 감독관이 요구하는 내용은 과업범위 내에서 반영하여야 함

○ 과업수행자는 중간보고회 개최 시 본 과업범위 내 수중쓰레기의 개략적인 총량을 산출하여 보고해야 함

○ 최종성과물은 계약기간 내 제출하여야 하며 제반자료의 조사⋅분석⋅평가 등을 완료한 후 작성하되 성과물의 하자로 인하여 추가 작업을 하여야 할 경우 추가 작업 및 이에 소요되는 경비는 과업수행자가 부담하여야 함

5. 과업의 변경 및 조정

○ 과업지시서에 명기하지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 부분에 대하여는 감독관과 협의 후 이행여부를 결정

○ 과업수행 중 참여 전문 인력의 변동, 일정, 예산 관련 등 중요사항이 있을 경우에는 감독관의 승인을 받아야 함

○ 감독관은 필요한 경우 과업수행자가 제출한 과업추진 공정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있음

- 과업수행자는 과업수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 감독관의 변경요구가 있을 때에는 적극 반영하여야 함

6. 자료관리 및 보안사항

○ 과업수행자는 계약체결 후 10일 이내에 참여기술자 및 조사원 등 개인별 보안유지 각서를 제출하여야 함

- 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인수인계 철저 및 자료의 외부유출을 방지하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 과업수행자가 져야 함

○ 과업수행과정에서 수집된 모든 자료는 감독관의 사전 승인 없이 타 분야에 사용하거나 타인에게 제공해서는 아니 됨

○ 기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련된 사항에 대해 감독관이 요구하는 사항에 있을 때에는 이에 따라야 함

7. 하자책임관계

○ 과업수행자는 과업보고서상의 하자로 인하여 한강사업본부에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하고, 손해를 배상하여야 함

○ 본 과업이 완료된 이후에도 각종 성과품의 미비사항이 발견된 경우, 최종 성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출하여야 하며 이에 소요되는 비용은 과업수행자가 부담함

8. 안전관리

○ 과업을 수행하는 과정이나 작업선이 과업수행지역을 항해할 경우 등 모든 과정에 사고가 일어나지 않도록 노력해야 하며, 수질오염이 발생하지 않도록 유의하여야 함

○ 잠수작업자 및 현장 투입근로자의 안전을 최우선으로 하는 안전관리 매뉴얼을 작성하여 감독관에게 보고 및 협의해야 함

○ 과업수행지역에 수중에 시설되어 있는 유류배관 등의 시설물 위치도를 확인하여 유류배관 등 수중 시설물의 훼손을 방지해야 함

○ 본 과업 시행 중 발생하는 안전사고, 오염, 장비 망실 등의 제반 사고에 대하여는 과업수행자가 일체 책임을 지고 과업수행자 부담으로 복구 및 변상을 하여야 함

9. 저작권 및 소유권

○ 본 과업 수행과정을 통해 획득한 기술, 특허 및 물질 등에 대한 소유권과 저작권은 서울특별시 한강사업본부에 있으며, 이를 이용하고자 할 경우 사전에 서울특별시 한강사업본부의 승인을 받아야 함

10. 과업수행자의 준수사항

○ 과업수행자는 성과물에 대하여 책임을 지며 본 과업을 추진함에 있어 외부자료를 사용할 경우 저작권 저촉 여부 등을 반드시 검토하여야 하며 문제발생시 이에 대한 책임을 져야 함

○ 과업수행자는 본 과업수행 목적으로 사용한 각종 기준과 모든 공식 자료 및 통계는 최근 자료를 이용하여야 하며, 출처 등을 명기하여야 함

○ 과업보고서는 과업수행 자료의 분석과 검토가 완료된 후 작성하되, 자료 등의 누락 또는 오기 등이 초래되었을 경우 필요한 추가 작업과 이에 소요되는 비용은 과업수행자가 부담함

○ 감독관은 과업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에 과업수행자로부터 설명 또는 의견을 들을 수 있고, 과업수행 현장에서 과업수행상황을 확인할 수 있으며 과업수행자는 이에 협조하여야 함

○ 과업수행에 있어서 용어 해석 등에 이견이 발생할 경우, 과업수행자와 감독관이 협의하여 결정하여야 함

○ 과업수행자는 본 과업지시서의 내용을 성실히 수행하여야 함

11. 성과품의 제출

○ 중간 및 최종보고서(안): 각 4부

○ 최종보고서: 최종보고서 5부 및 보고서 자료파일이 수록된

USB(대용량) 3개