2021년도

부산남외항 부표류 수중 인양 공사 설계서

2021. 1.

2021년도

부산남외항 부표류 수중 인양 공사 설계서

목 차
1.	설 계 설 명 서
2.	일 반 시 방 서
3.	특 별 시 방 서
4.	예 정 공 정 표
5.	예 산 내 역 서
6.	원 가 계 산 서
7.	일 위 대 가 표
8.	단 가 산 출 서
9.	도 면

1.  설  계  설  명  서

1. 설 계 설 명 서

1-1 공 사 명 : 부산남외항 부표류 수중 인양 공사

1-2 공사위치 : 부산남외항 및 동해부표관리사무소

1-3 공사목적 : 부산남외항에 설치․운영 중인 남외항5,6호등부표가 태풍 영향으로 유실 및 침수된 등부표의 표체 및 계류구를 인양하여 인근을 항해하는 선박의 안전운항을 도모하고자 함

1-4 공사개요 : 부산남외항5,6호등부표(LSP-28) 표체 및 계류구 인양 1식

1-5 설계 변경조건

1) 현장작업여건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때

2) 정부품셈 기준이나 노임단가의 변경이 심할 때

3) 발주청의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

4) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

5) 등부표 인양 수량의 증․감이 발생하였을 때

1-6 공사 시행방법 : 본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

1-7 공사기간 : 착공일로부터 25일간으로 한다.

1-8 제한사항 :「건설산업기본법 시행령」 제7조에 따른 수중공사업 면허를 보유한 업체

2.  일  반  시  방  서

2. 일 반 시 방 서

2-1 적용범위

1) 설계도서에 언급하지 않은 사항이라도 시공 상 필요하고 경미한 사항은 도급자의 부담으로 시행하여야 한다.

2) 본 공사는 정부제정 각 표준시방서와 다음 시방서 및 설계도서에 의하여 시행한다.

가) 수중공사 일반 표준시방서

나) 산업안전보건기준에 관한 규칙과 한국산업안전공단에서 제정한 잠수작업 안전기술지침

다)「항로표지법」같은 법 시행령 및 시행규칙, 항로표지 업무편람

라) 기타 본공사와 관련한 관계법규․령․규칙․고시․명령․조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관된 제반법령 등

3) ｢산업안전보건관리비 계상 및 사용기준｣ 제5조 제1항에 따라 공사계약 체결 시 산업안전보건관리비는 낙찰률을 적용하지 아니하고, 당초 예정가격 작성 시 계상한 금액을 조정 없이 반영하도록 함

4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공 하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정 될 경우에는 감독공무원과 협의하여 변경 시행한다.

2-2 공사의 시행

1) 착공시 서류 제출 사항

도급자는 공사 착공시 다음 서류를 작성한 후 감독공무원을 경유 발주처에 2부 제출하여야 한다.

가) 현장대리인계

나) 현장기술자 지정 신고서(안전관리자)

다) 안전관리 계획서

라) 공사 예정공정표

마) 시공(공정별 인력 및 장비투입) 계획서

바) 기타 발주청에서 요구 및 지정한 사항

2) 도급자의 의무

가) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 인양하여야 한다.

나) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 시설물(표체, 침추, 계류용품 등)을 선적, 운반 시 발생하는 시설물 유실, 손상 및 훼손에 대해 모든 책임을 져야 한다.

다) 도급자는 본 공사 시행과 관련하여 인근 VTS, 통항선박 등 이해관계자와 공사 시행에 차질이 없도록 사전에 협의한 후, 필요시 관련사항을 조치하고 공사를 시행하여야 한다.

라) 도급자는 공사시행 전 본 설계서를 숙지하고 본 공사와 관련되는 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공하여야 한다.

3) 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않았더라도 시공, 구조상 감독공무원이 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 도급자의 부담으로 시공하여야 한다.

4) 현장대리인 및 현장종사원

가) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법등 관계법령에 의한 전문가 또는 기술자라야 하며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

나) 감독공무원은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

다) 공사의 시행에 있어서 일반시방서 또는 특별시방서에서 규정하고 있는 해당분야의 관리자는 당해 공종에 충분한 전문지식과 실무경험을 갖춘 관리자를 선임하여야 한다.

라) 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

5) 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함하여야 한다.

가) 소음방지, 위험물 및 기타 사고방지에 대한 단속

나) 시공자재 및 시공 설비의 정리와 관리, 현장 내․외

다) 기타 감독공무원의 지시사항

6) 공정표 및 시공계획서

가) 공사(설계도서, 시방서)에 대한 상세계획을 세워 예정공정표를 감독공무원에게 제출하여야 한다.

나) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 등을 작성하여 감독공무원에게 제출하여야 한다

다) 공사 진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

7) 관계기관 등과의 협의

가) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가사항 및 협의는 감독공무원 및 발주처의 협조를 받아 도급자가 하여야 한다.

나) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독공무원을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

8) 제법규의 준수

가) 공사와 관련된 법령, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

나) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

2-3. 시공관리

1) 공사기록

가) 도급자는 작업 상황보고 양식에 따라 매일의 작업내용, 인원, 장비 및 가동시간 등을 기입, 매 익일 감독공무원에게 보고하여야 한다.

나) 도급자는 공사 진행에 따라 공사기록 사진을 촬영하여 수록하고 주요 공정에 대한 검사, 준공 검사 장면은 사진 을 촬영 수록하며, 완공 후 제반 성과를 작성 편집하여 제출하여야 한다.

다) 시공 후 확인할 수 없는 부분은 필히 사진과 동영상촬영을 병행하여 수록하여야 하며 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격 등을 판별할 수 있게 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

2) 현장관리

가) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하고 부득이한 경우 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 감독공무원에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

나) 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

다) 도급자는 해상 작업에 따른 장비의 제반 규칙을 준수하여 해상크레인, 바지선, 예인선 등의 항해에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

2-4. 안전 및 환경관리

1) 안전조치

가) 공사중 기상예보에 충분히 주의하여야 하고, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

나) 해상 작업시 선박 등에 구급상비약을 갖추어야 한다.

2) 안전표지 및 안전 보호구

공사현장에서는 작업자에게 필요한 안전 보호장구(안전모, 안전화, 구명조끼 등)를 착용하게 하여야 한다.

3) 안전

가) 산업안전보건법에 의거 공사 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

나) 도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 안전조치를 취하여야 하며 현장정돈을 철저히 하여, 안전시공에 대한 감독공무원의 지시를 따라야 한다.

4) 안전관리비의 사용

가) 도급자는「산업안전보건법」등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 발주처 및 감독공무원의 제출 요구 시에는 이에 따라야 한다.

나) 감독공무원은 공사 진행중 안전관리비 사용에 대하여 수시 확인할 수 있다.

다) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

2-5. 준공

1) 준공도서

가) 도급자는 계약상 준공일 전에 공사를 완료하고 감독공무원에게 준공검사를 요청하여야 한다.

나) 준공도서 작성방법 및 세부 양식은 감독공무원의 의견을 들어 발주처와 협의하여야 한다.

다) 준공시 제출서류(2부)

- 준공계 및 준공검사원

- 준공내역서 및 정산내역서, 정산동의서

- 전 공정 현장사진

- 수중촬영 파일을 담은 동영상 자료(저장매체) 및 사진첩

- 환경보전비, 산업안전보건관리비 사용내역서 및 기타 필요한 서류

- 감독공무원이 요청하는 자료 등

3.  특  별  시  방  서

3. 특 별 시 방 서

3-1 공사준비 및 조사

1) 도급자는 해상공사 시행 전 능률과 안전에 영향을 미치는 다음사항을 사전 조사하여 시공계획에 반영하여야 한다.

가) 기상조건 : 풍향, 풍속, 강우량, 안개발생 일수

나) 해상조건 : 파랑, 조류, 조위, 수심

다) 지리적 조건 : 현장위치, 통항선박, 운반경로

라) 현장조사 : 수중조사(촬영)을 통한 스파부이 설치상태 확인 조사

2) 각종 장비의 규격은 한국표준규격(KS), 한국선급(KR)에 의한 제품을 사용하여야 한다.

3) 도급자는 부표류 정비 전 해상운반과 작업관련 사항을 감독공무원과 협의 후 시행 하여야 한다.

4) 도급자는 해상운반과 부표류 인양해역 부근을 운항하는 선박의 위험이 없도록 안전 대책 수립 후 작업에 임하여야 하며, 전반적인 해상 및 항행규칙을 준수하여야 한다.

5) 작업 시행전후 해상교통관제센터(VTS) 등 해당 관내 항만당국에 보고 및 승인을 득하여 작업하여야 한다.

3-2 등부표 인양

1) 등부표의 수중 인양 위치는 다음과 같다.

구 분	규 격	위 치 (WGS-84)	대 상	비 고
부산남외항5호등부표	LSP-28	35-03-35.5N 129-01-52.0E	표체, 하부마스트, 침추(44ton)	수중 인양
부산남외항6호등부표	LSP-28	35-03-36.2N 129-02-07.0E	하부마스트, 침추(44ton)

2) 안전이 최종 확보된 상태에서 등부표를 인양 하여야 하며,  작업 중 파손, 오염 등이 발생한 경우에는 도급자는 책임지고 변상하여야 한다.

3) 침추인양 시 침추 고리에 완전히 결합한 상태로 안전하게 인양하여야 한다.

4) 등부표 인양 시 주변 다양한 선박이 혼재되어 있어 안전을 확보한 상태에서 작업하여야 한다.

5)「항로표지업무용 선박의 관리ㆍ운영에 관한 규정」별표1 부표작업 요령을 참고하여 안전하게 작업하여야 한다.

6) 등부표 인양 시 반드시 표체번호를 기록한 후 감독관에게 제출하여야 한다.

3-4 부표류 해상운반

1) 해상운반 시 해상기상을 조사하여 해상기상이 양호한 때 등부표를 운반하여야 한다.

2) 해상운반 이동경로는 부산남외항에서 동해부표관리사무소로 안전하게 운반하여야 한다.

3) 해상운반 시 표체, 하부마스트, 침추, 계류용품을 분리하고 불순물을 최대한 제거한뒤 운반하여야 한다.

4) 운반 중 부표류의 파손이나 변형이 발생하지 않도록 하며, 물적 파손에 대해서는 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

5) 예선 및 작업선 운항 시「해상충돌예방법」,「선박안전법」등의 규정사항을 철저히 준수하여야 한다.

4.  예  정  공  정  표

4. 예 정 공 정 표

작 업 내 용	추 진 일 정 (25일간)							비 고
	10일	10일			5일
1. 작업 준비 - 자재준비 등 - 현장조사, 해상환경 확인
2. 표체 및 계류구 인양
3. 표체 및 계류구 운반 등
4. 현장 정리 및 준공계 제출
공 정 율 (%)	40	40			20
누 계 공 정 율 (%)	40	80			100

5.  예  산  내  역  서

2021년 1월 설계

2021년도

부산남외항 부표류 수중 인양 공사 예산내역서

○ 사업개요 : 부산남외항5,6호등부표(LSP-28) 표체 및 계류구 인양 1식

○ 총사업비 : 일금 사천사백만원정[￦40,000,000)	도 급 액 :	일금 40,000,000원
	공 급 가 액 :	일금 36,363,637원
	부가가치세 :	일금 3,636,363원

6.  원  가  계  산  서

7.  일  위  대  가  표

8.  단  가  산  출  서

9.  도           면

□ 부산남외항5,6호등부표

부산남외항5호등부표

부산남외항6호등부표

□ LSP-28(직경 2,824 × 높이 약 20m, 8ton )

□ LSP-28 계류고리 세부도면