과 업 내 용 서

『2021년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역』

2021. 1.

안전총괄실

(교량안전과)

과 업 내 용 서

제1장 과업명

가. 본 과업의 명칭은「2021년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역」이라 한다.

나. 본 과업에서는 편의상 발주자인 서울특별시 안전총괄실을 “발주청이라

하고, 도급자인 용역사를 “계약상대자(계약자)”라 한다.

제2장 과업의 목적

가. 본 과업은 서울특별시의 교량 수중교각 상시점검체계 구축에 따라 교량의 수중구조물 점검을 위한 사전 작업으로 수중구조물(기초, 우물통)에 부착된 조개나 이끼 등을 제거하여 정확한 수중촬영 조사가 가능토록 하고 수중구조물의 손상 파손 등이 발견시 세부조사를 시행하기 위함이다.

제3장 과업의개요

1. 과업의 대상시설물

가. 한강상 교량 6개소 수중구조물(수중우물통) 235기

- 대상 : 동호대교 55기, 반포대교 51기, 잠수교 44기, (상)양화대교 27기, 가양대교 45기, (하)행주대교 13기

나. 대상 및 수량은 발주청의 계획변경 등에 따라 변경될 수 있음

2. 과업의 범위

가. 수중구조물(기초, 우물통) 표면청소

나. 수중구조물 청소시 구조물의 손상, 세굴, 침하, 등에 대한 기초점검 및 결과 보고

다. 상시 점검인력 과업기간 동안 점검시행

라. 이상개소 발견시 세부 확인 작업

마. 발주청 요청에 의해 수중 점검팀 2개조 운영시 점검 보조인력(3인) 투입

바. 안전총괄실 수중점검장비 관리(야간이나 휴일 등 수중 점검팀이 점검을 할 수 없을 때 수상에 계류된 수중점검장비 관리 : 발주청 요청시)

사. 기타 발주청의 추가 과업 요구시는 계약상대자와 협의하여 처리한다

3. 과업기간

가. 본 과업(용역)기간은 착수일로부터 12월18일까지 함을 원칙으로 한다

나. 용역 추진은 발주청과 사전협의하여 차질없이 수행 하여야 하며, 다음의 경우에는 발주청과 협의하에 과업기간을 변경 조정할수 있다

(1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 경우

(2) 발주청의 계획변경 등 방침에 따라 사업의 중단이나 내용의 현저한  변경 또는 증감이 있을 경우

(3) 기타 사업과 관련 사회 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생     되었을 경우

4. 발주기관 및 연락처

서울특별시 안전총괄실 교량안전과

(Tel : 2133-1980, Fax : 2133-1429)

제4장 과업지시 세부사항

1. 일반사항

가. 계약상대자는 용역 수행과정에서 발주청이 지정한 감독관의 지시에 따라야 한다

나. 계약상대자는 본 과업지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다

다. 계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 하며, 계약기간 중이라도 제출된 계획서에 의한 공정추진이 부진하거나 사업수행능력이 부진할 때에는 발주청에 즉시 보고후 협의하여 추진한다

(1) 착수신고서

- 현장대리인 선임계(이력서, 기술자 자격수첩 등 첨부)

- 과업 예정공정표

- 용역수행자 명단(기술자 자격수첩 등 적격여부 확인자료 첨부)

(2) 과업수행계획서

- 작업방법, 장비 및 인원투입 계획 등

(3) 기타 용역수행에 필요한 사항

라. 용역사의 작업위치는 발주청과 사전협의 승인을 득하여 점검 1일전까지

작업을 실시하며, 계약상대자가 임의로 시행한 것을 인정하지 않는다

마. 수중잠수에 참여하는 잠수부는 국가에서 인정하는 잠수기능사 자격증 소지자 또는 군에서 잠수교육을 이수한자로 한다

바. 본 과업에 참여하는 자는 과업수행에 대하여 성실한 의무와 책임감을 갖고 임하여야 한다

사. 계약자는 수중작업 전에 팔당댐의 방류량과 한강수위, 일기개황 등을 참조후에 작업을 실시하여야 한다

아. 수중작업(청소)시는 구조물에 부착된 조개나 이끼 등을 기계식(유압또는 수압식 등)장비를 사용하여 깨끗이 제거하여 현재의 실상파악이 용이하도록 하여야 한다

자. 계약상대자는 수중작업(청소)시 구조물의 손상, 세굴, 침하 등 이상이 있는 수중구조물의 점검결과를 발주청에 보고하여야 한다

차. 수중구조물 청소후 발주청에서 수중점검을 할 때에는 계약상대자는 잠수부 2인 이상을 대기시켜 발주청과 합동으로 점검 또는 필요한 조치를 할수 있도록 하여야 한다

카. 이상이 있는 수중구조물의 정밀조사는 수중촬영이 용이하도록 손상부 청소를 하고 잠수부가 수중조사를 실시한다

타. 수중구조물의 손상, 세굴, 침하 등의 조사를 위한 수중동영상 촬영 장비는 발주청에서 제공하고 수중사진기와 규모 확인을 위한 기구(스티프, 자 등)는 계약상대자가 준비를 하여야 한다

파. 파손부위 촬영시는 자 등을 부착하여 파손부위의 규모를 파악할 수 있도록 조치한다

하. 본 과업수행자는 용역 완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요시 자문에 응하여야 한다

거. 본 과업 수행중 얻어진 각종자료 및 정보는 일체 외부로 유출할 수 없으며, 만약 자료 유출로 문제가 발생된 시에는 관계자 전원은 민․형사상 책임을 져야 한다.

너. 본 과업 현장대리인은 용역현장에서 과업수행시 현장에 상주하여 계약문서와 용역감독관의 지시에 따라 용역현장의 단속 및 안전관리 등 용역에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

더. 계약담당공무원이 용역현장대리인의 계약 이행 능력이 부족하다고 판단하여 교체를 요구한 경우 계약상대자는 이에 응해야 한다.

2. 특별사항

가. 과업수행원

(1) 잠수부 : 국가에서 인정한 잠수기능사 자격증 소지자 또는 군에서 잠수교육을 이수한 경력자로 한다

나. 수중조사 및 청소장비

(1) 수중조사에 사용되는 장비는 충분한 고유능력을 발휘할 수 있는 장비여야 하며, 최소한 다음의 장비를 사용한다

(가) 잠 수 장 비 : 범용 스쿠바장비 또는 콤프레서 공기공급 스쿠바장비

(나) 통   신   기 : 수중통신기

(다) 수상이동장비: 장비 적재 및 안전한 작업활동이 가능한 소형선박

(라) 청 소 장 비 : 수중청소기계 및 도구(고압 살수기등)

(마) 측정용 도구 : 스타프 자 등

(바) 촬 영 장 비 : 수중카메라 셋트 등

(사) 기타 부속장비

나. 안전사항

(1) 수중청소 및 수중점검 작업시 이용하는 소형선박은 장비적재가 가능하고 작업원의 안전한 작업활동에 지장이 없은 선박으로 한다.

(2) 모든 작업참여자는 잠수 및 수상작업에 관한 제반 안전수칙을 준수하여야 한다.

(3) 과업수행시 작업전에 한강홍수통제소와 유기적인 연락 체계를 갖추어 한강수위와 팔당방류량을 주의깊게 관찰하고 일기개황을 참고하여 안전사고에 유의하여야 한다.

(4) 또한 본 과업 수행시 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력등 사유로 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

3. 설계변경조건

가. 과업수행중 발주청의 추가 과업지시 등으로 설계변경이 필요하다고 판단할 경우

나. 과업수행 수중구조물(우물통)의 수량 증감이 발생한 경우

다. 과업수행 중 발주청의 정책변경 등 불가피한 경우, 발주청은 본 과업의 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

4. 변상조건

가. 발주청은 다음과 같은 경우가 발생하였을 때는 계약상대자에게 변상금을 부과할 수 있다(발주청 요청에 의하여 수중점검 장비를 관리할 경우에 한 함)

(1) 수상에 계류된 수중점검장비가 외부인에 의하여 손․망실 되었을경우

(2) 수상계류를 제대로 하지 못하여 한강의 수위변화 또는 운항선박의 파도

등에 수중점검장비가 침수되어 손상되었을 경우

5. 해약조건

가. 발주청은 다음과 같은 경우가 발생하였을 때는 계약을 해지할 수 있다

(1) 과업 이행이 불가능 하다고 인정될 경우

(2) 정당한 이유없이 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우