2021년도

진도·완도해역 유도등부표 외 1기 인양 교체공사

설  계  서

	목포지방해양수산청 진도항로표지사무소

2021년  2월  설계

설계자

심사자

담당

소장

2021년도

진도·완도해역 유도등부표 외 1기 인양 교체공사

설  계  서

	목포지방해양수산청 진도항로표지사무소

- 목          차 -

1. 설   계   설   명   서

2. 일   반   시   방   서

3. 특   별   시   방   서

4. 예   정   공   정   표

5. 설   계   예   산   서

6. 원   가   계   산   서

7. 일   위   대   가   표

8. 단   가   산   출   서

9. 설    계    도    면

10. 위       치       도

1.  설   계   설   명   서

1. 설계설명서

1-1. 공 사 명 : 진도·완도해역 유도등부표 외 1기 인양 교체공사

1-2. 공사위치

○ 전남 진도군 조도면 하조도등대 전면 해상(34-19-03.2N, 126-05-27.5E)

○ 전남 완도군 완도항 통항분리 해상(34-15-12N, 126-48-30E)

1-3. 공사목적 : 관내 설치․운영중인 장죽수도조류관측등부표 및  완도항유도등부표(LANBY-100)을 인양․교체하여 해상교통 안전확보 및 항로표지 기능유지에 만전을 기하고자 함

1-4. 공사개요

○ 장죽수도조류관측등부표 인양․교체 1식

○ 완도항유도등부표(LANBY-100) 인양․교체 1식

1-5. 설계 변경 조건

본 공사 수행 중 다음과 같은 사유가 발생하였을 때에는 설계변경 할 수 있다.

1) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생할 때

2) 정부고시 가격의 현저한 변동이 있을 때

3) 현장 작업조건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때

4) 기타 발주기관의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

1-6. 공사기간

착공일로부터 240일간으로 한다.

1-7. 공사 시행 방법

본 설계 도서에 의거 도급으로 시행한다.

2.  일   반   시   방   서

2. 일반시방서

1. 일반사항

1) 적용범위

이 시방서는 목포지방해양수산청 진도항로표지사무소에서 「진도·완도해역 유도등부표 외 1기 인양 교체공사」를 함에 있어 공사 계약서, 설계도서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약 내용의 이행을 확보하기 위한 것이며, 내용은 일반 시방서와 특별 시방서로 구분하여 구성된다.

2) 우선순위

설계도서의 적용 우선순위는 ① 시방서 ② 설계내역서 ③ 설계도면 순으로 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우에는 발주기관의 사실 판단이나 공사 감독관의 의견을 들어 조정할 수 있다.

2. 적용기준

1) 시방규정 및 관련 법규

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 제반 규정과 관련법의 규정을 준용한다.

① 항로표지 업무편람	② 항만 및 어항 설계기준
③ 항만 및 어항공사 표준시방서	④ 항만 및 어항공사 전문시방서
⑤ 철물설비공사 및 수중공사 표준시방서	⑥ 전기설비공사 일반 표준시방서
⑦ 한국산업규격, 잠수작업 안전기술지침	⑧ 공사 품질관리 검사기준
⑨ 공사 관련법령 및 규정	⑩ 기타 본 공사에 관련되는 각종 기준 및 규격

2) 본 공사에 관련되어 발주기관이 제공하는 제 규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 간주한다.

3) 시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때는 시방서가 우선하며 시방서나 내역서, 도면 어느 한쪽에만 기술되어도 이를 계약조건의 일부로 본다.

4) 발주기관에 제출하는 모든 서류는 반드시 공사 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

3. 공사 시행

1) 착공 시

도급자는 공사 착공 시 다음 서류가 포함된 착공신고서를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

① 현장대리인계                            ② 공사 예정공정표

③ 현장기술자 지정신고서                   ④ 안전․환경 및 품질관리 계획서

⑤ 기타 관련 규정 및 발주기관이 지정한 사항

2) 도급자의 의무

① 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

② 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 발주기관이 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

③ 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제반 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주기관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

④ 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 공정표 및 시공계획서

① 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 예정공정표를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

② 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 작업일보 및 공사 기성고를 작성하여 공사감독관에게 제출하여야 하여야 한다.

③ 도급자는 공사시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입계획, 주요 장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대한 상세한 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 착공하여야 한다.

④ 기 수립된 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

⑤ 공사 진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정 공정보다 지연될 경우, 도급자는 공사감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입 등 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

4) 현장대리인 및 현장종사원

① 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법등 관계법령에 의한 건설기술자라야 하며, 공사감독관의 승인 없이 임의로 현장을 떠나서는 아니되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

② 공사감독관은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

③ 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독관의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

④ 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

5) 제보고 및 서류 양식

① 계약서에 지정한 것과 공사감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

② 공사감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

6) 관계기관 등과의 협의

① 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 공사감독관의 협조를 받아 도급자가 수행하여야 한다.

② 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 공사감독관을 경유하여 발주기관에 제출하여야 한다.

7) 제법규의 준수

① 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

② 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임 하에 이루어지고, 투입된 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

4. 시공기준

1) 설계도서 및 측량 기준

① 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 내용을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

② 도급자는 공사의 시공에 앞서 설계내역, 설계시방서 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

③ 도급자는 상기와 같은 검토과정에서 수록된 내용의 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사감독관에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

④ 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 공사감독관이 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

⑤ 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후의 형상과 치수를 나타낸다.

⑥ 구조물의 표고는 약최저저조면을 기본 수준면으로 하는 해상 기본 수준면(APP. L.L.W DL(±)0.00)을 기준으로 한다.

⑦ 공사 수량의 단위 및 수량계산은 정부시설공사 건설표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

2) 사전조사

① 공사 장소에 인접한 시설물 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 공사감독관과 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

② 기타 공사에 관련된 환경에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

3) 공사용 자재

① 본 공사를 위한 주요 자재의 세부사항은 특별시방서 및 내역서에 따른다.

② 공사용 모든 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라야 하며 주요 자재는 현장 반입 전에 재료시험 성과표 등의 품질확인 서류를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

③ 주요자재 보관중 도급자 귀책에 의해 자재가 변질, 변형, 오손되었을 경우에는 도급자 부담으로 제반 품질기준에 맞는 자재로 교체하여야 한다.

④ 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 또는 산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

⑤ 공사현장 반입 시 합격판정을 받은 자재라 할지라도 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 파손되었을 때는 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

5. 시공 관리

1) 공사기간

도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다. 특히, 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 공사감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한, “2”항의 공사 중지사항 중 1), 4), 5)항에 의해 공사기간 연장이 불가피할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 공사감독관에게 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

2) 공사의 일시 중지

공사감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있고, 1), 4), 5), 6)항을 제외한 원인에 의한 공사 기간 연장에 따른 모든 사항은 도급자의 부담으로 하며, 이로 인해 계약 기간이 초과될 경우에는 공사 지체 일수에 산입한다.

① 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

② 도급자가 설계도서대로 시공하지 않을 때

③ 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

④ 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

⑤ 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

⑥ 발주기관의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

3) 작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

4) 입회 및 자료 제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 시공 후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에 대하여는 공사감독관의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 현장관리시험대장 등)을 제출하여야 한다.

5) 공사기록

① 도급자는 공사감독관이 승인한 작업 상황보고 양식에 따라 매일의 작업내용, 취업 인원, 취업 장비 및 가동시간과 공사용 자재의 불출 상황을 기입, 매 익일 공사감독관에게 제출하여야 한다.

② 도급자는 매 익일의 작업계획을 공사감독관에게 제출하고 매월 말에는 다음 달의 작업 계획과 그 달의 작업성과를 제출하여야 한다.

③ 도급자는 공사 진행에 따라 시공 전, 시공 후, 공정별 시공 장면, 검사, 기성 및 준공검사 장면을 사진으로 촬영 후 디지털 이미지 또는 컴팩트디스크(CD)로 자료를 확보하여 공사감독관의 요구에 따라 제출하여야 한다.

6) 현장관리

① 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 해상장비에서 발생되는 쓰레기 등 폐기물은 적법하게 처리하여 해양오염방지에 노력하여야 하며 부득이하게 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독관에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

② 도급자는 공종별로 매 작업 단계마다 공사감독관의 검사를 필한 후 다음 단계의 작업을 착수하여야 한다.

③ 공사 중 항상 관할 관계기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

④ 전기설비 및 자재를 사용하는 경우에는 그 보관․취급에 대하여 관계법령에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

7) 사고의 처리

공사 중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

8) 준공검사

① 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요한 제반 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사관의 지시에 따른다.

② 준공검사관의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

9) 비용부담에 관한 사항

공사 시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

① 공사시방서, 설계 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항       ② 공사 착공 및 준공 시와 공사 진행 중 필요한 각종 측량

③ 기성검사 및 예비준공검사, 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

④ 공사 시행 상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험

⑤ 교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대시설

⑥ 도급자의 책임으로 인한 제3자의 피해보상

10) 공사 준공후의 정리

공사가 완료되었을 때에는 공사감독의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고 현장을 청소, 정리하여 공사감독관의 검사를 받아야 한다.

6. 품질관리 및 검사

1) 공사용 재료의 품질

① 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국 산업규격에도 부합되어야 한다.

② 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 공사감독관이 변질 또는 불량품으로 판정한 때는 이를 사용할 수 없다.

③ 공사감독관이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 시공확인 및 검사

① 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 도급자 부담으로 제공하여야 한다.

② 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

③ 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 공사감독관의 입회하에 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

3) 기성 및 준공검사

① 공사의 기성부분 검사 및 준공 검사는 현장대리인이 받아야 한다.

② 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

③ 공사 준공 기간

○ 전체 공사는 설계 설명서에 정하여진 바에 따라 입찰서에 기입할 착공일로부터 계산한 기간 내에 완전 준공되며, 공사기간은 휴일이 포함된 날짜를 기준하여 정한다.

○ 천재지변, 국가전쟁, 화재, 전염병, 폭동, 공항 및 항구 폐쇄와 같은 예기치 못한 불가항력의 원인에 의한 경우는 도급자의 공사 불이행으로 간주치 아니하며, 도급자는 원인 발생일로부터 10일 이내에 그 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

7. 안전 및 환경관리

1) 안전관리

산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

2) 안전조치

① 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립, 공사감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

② 공사에 필요한 안전 조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

③ 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

3) 안전표지 및 안전보호구

① 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

② 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

4) 안전교육

산업안전보건법에 의거 공사 시공 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

5) 안전시공

도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

6) 사고보고 및 응급조치

① 공사 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 공사감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

○ 사상사고

○ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고         ○ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

② 전항의 경우에 인사사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 공사감독관에게 긴급보고 하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

7) 안전관리비의 사용

① 도급자는 산업안전보건법등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서는 작성 보존하여야 하며 공사감독관의 제출 요구 시에는 이에 따라야 한다.

② 당해 공사 금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안 된다.

③ 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

8) 환경보호

도급자는 공사 중 또는 공사 준공 후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 또는 훼손이 발생치 않도록 공사장과 인근의 환경보호에 만전을 기해야 한다.

8. 준공검사

1) 도급자는 계약상 준공일전에 공사를 완료하고, 공사감독관에게 준공검사를 요청하여야 한다.

2) 검사관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 실시할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다. 시험 및 검사에 합격하여 검사관이 공사완료 되었다고 인정한 경우 준공검사 요청서를 접수 처리한다.

3) 도급자는 준공 검사 시 현장대리인 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회케하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 시공불량 개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단 시일 내에 재시공 하여야 한다.

9. 시스템 정상운영 시험

1) 도급자는 장죽수도 조류관측등부표 장비 설치 후 시스템 전반에 대한 기능 및 정상동작 운영하는데

어려움이 없도록 하여야 하고 충분한 시험을 거쳐야 한다.

3.  특   별   시   방   서

3. 특별시방서

1. 사전준비 및 현황조사(공통)

1) 도급자는 해상공사 시행 전 능률과 안전에 영향을 미치는 다음사항을 사전 조사하여 시공계획에 반영하여야 한다.

① 기상조건 : 풍향, 풍속, 강우량, 안개발생 일수   ② 해상조건 : 파랑, 조류, 조위, 수심

③ 지리적 조건 : 현장위치, 통항선박, 운반경로

④ 현장조사 : 수중조사(촬영)을 통한 등부표 및 계류구 설치상태 확인 조사

2) 도급자는 등부표의 인양교체 작업 전 해상운반과 인양철거 및 설치에 따른 조치사항을 감독관과 협의하여야 한다.

3) 도급자는 해상운반과 인양 및 설치해역 부근을 운항하는 선박의 위험이 없도록 안전시설과 대책을 수립하여 작업에 임하여야 하며, 전반적인 해상 및 항행규칙을 준수하여야 한다.

4) 작업 시행 전․후 해상교통관제센터(VTS)에 보고하여야 한다.

2. 완도항유도등부표 시공사항

1) 정비대상

표 지 명	위 치(WGS-84)	등 질	표체규격	비 고
완도항유도등부표	34-15-12.0N, 126-48-30.0E	Iso W 4s	LANBY-100

2) 시공순서

① 신규 표체 선적(남해부표소) → 해상운반 → 기존 표체 철거 → 계류구 교체 → 신규 표체 설치(완도항 통항분리) → 항로표지 장비용품 이설 및 종합시험 → 기존 표체 해상운반 → 표체 하역(남해부표소)

② 운반 장소는 전남 여수시 화양면 나진리 남해부표관리소이다.

③ 시공 순서를 변경 시 필히 감독관과 협의 및 승인을 받아야 한다.

3) 등부표 인양(설치)시 조치사항

① 본 공사를 추진하기 전에 설치위치에 대하여 사전(수중)조사를 실시하여 정확한 수심 및 저질 등 해상 여건을 파악 후 사전조사 결과보고서를 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

② 등부표 설치 전 잠수조를 우선 설치 장소에 투입하여 수심 및 저질에 대해 정확히 최종 확인을 하고, 특히 침추를 설치할 경우는 기울임이 없어야 하며, 기울임이 발생 시에는 재 설치하여야 한다.

③ 제출한 사전조사보고서를 토대로 감독관과 업무 협의 후 교체공사를 추진한다.

④ 인양 및 설치 작업 시 계류정착시설용 고리 및 볼트 체결과 계류샤클 및 사슬 연결이 탈락되지 않도록 하여야 한다.

⑤ 등부표 인양 즉시 현장에서 표체 및 사슬에 부착되어 있는 조패류를 최대한 제거하여야 하며, 감독관 확인 후 지정 장소로 운반 및 거치하여야 한다.

⑥ 유도등부표는 해양기중기선 250톤 크레인을 이용하여 안전하게 해상 양하 및 육상 이동 작업을 하여야 하며, 육상 안벽으로 인양과정에서 걸고리를 충분하게 하여 장력이 한쪽으로 쏠리는 현상이 없어야 한다.

⑦ 유도등부표의 인양과정에서 발생하는 표체의 파손은 도급자가 원상복구 하여야 한다.

⑧ 설치위치는 DGPS 수신기를 이용하여 수 회 정밀 측정을 한 다음 정확한 위치에 설치하고, 설치 완료 후에도 재 측정을 실시하여 그 성과표를 제출하여야 한다.

⑨ 계류장치(사슬) 및 침추에 대한 인양 위치는 필히 감독관과 협의 후 작업을 해야 한다.

⑩ 잠수부는 필히 잠수부 국가자격증을 사본으로 제출하여야 한다.

⑪ 잠수부 작업은 한국산업안전공단에서 제정한 잠수작업 안전기술지침에 따른다.

4) 장비용품 철거 및 설치

① 등부표 인양 전 기존 등부표에 설치되어 있는 항로표지 장비․용품(등명기, 태양전지, 축전지 등) 및 해양기상장비 등을 안전하게 철거하여야 한다.

② 신규 등부표가 해상에 안전하게 설치된 이후 항로표지 장비․용품을 설치하고 기능 작동에 이상이 없어야 한다.

③ 항로표지 장비용품은 해상의 강풍, 파도 등에 의해 파손되지 않도록 단단하게 표체에 고정하여 이설하고 종합시험을 통해 완벽하게 정상 동작하여야 한다.

5) 등부표 해상 운반

① 해상운반은 해상기상이 양호한 날을 택일하여 운반 작업이 용이하도록 하여야 한다.

② 해상운반 이동경로는 적정항로를 선택하여 감독관에게 보고하여야 한다.

③ 인양 철거된 등부표는 남해부표관리소에 감독관이 지정하는 장소로 하역하여야 한다.

④ 효율적인 해상운반 및 교체작업을 위해 유도등부표는 부선에 결박하여 해상의 너울성 파도 등에 의한 안전을 확보하여야 하며, 이동 중 현장 작업자를 배치하여 부선의 로프 절단, 기타 해양사고 등이 발생하지 않도록 작업 전 면밀히 검토하여야 한다.

⑤ 운반 도중 등부표 표체의 파손이나 변형이 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 물적 파손에 대해서는 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

⑥ 예항 시 해상 충돌 예방법의 규정사항을 준수하여야 한다.

6) 수중조사

① 공사 전 등부표 및 계류구 수중 상태, 주변 수심 및 저질 등을 조사 후 인양교체를 추진하여야 한다.

② 유도등부표 인양교체를 위해 사전 수중조사를 실시하여 사진 및 동영상 자료, 결과 보고서를 감독관에게 제출하여야 한다.

③ 수중 촬영 시 수중상태가 최상의 양호한 해상날씨에 맞추어 수중조사를 실시한다.

④ 결과 보고서의 조사 및 점검사항은 다음과 같다.

○ 부표의 계류용품 설치 수량 등 현황 파악

○ 표체, 침추 및 계류용품(체인, 접환, 전환 등) 간의 연결상태 및 마모상태 확인

○ 체인의 꼬임상태 확인

○ 침추의 침하정도 및 연결 계류구의 마모상태 확인

○ 부식 예방을 위해 표체 하부에 설치된 아연판의 상태확인

7) 기타사항

① 각 공정별 시방서 내용이 미비한 사항에 대하여는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

② 현장대리인은 공사현장의 안전관리 및 품질관리에 대하여 만전을 기하여야 하며 중요공정(인양, 계류 시설점검 및 설치)은 작업 전·후 감독관의 승인 및 입회하에 시공하여야 한다.

③ 등부표 선적 및 설치 과정에서 표체 도색 훼손이 예상되므로 도료를 이용하여 터치업 도장 후 완전 건조하여 현장에 설치하여야 한다.

④ 등부표 설치 및 철거 작업 시 발생한 폐기물 처리에 대하여는 도급자가 책임져야 한다.

⑤ 등부표 설치 및 완료 후 준공검사에 대비하여야 한다.

3. 장죽수도 조류관측등부표 시공사항

1) 정비대상

표 지 명	위 치(WGS-84)	등 질	표체규격	비 고
장죽수도조류관측등부표	34-19-03.2N, 126-05-27.5E	Fl(5) Y 20s	DB-14000

2) 시공순서

① 현장 계류구 점검 → 기존 표체 철거(장죽수도) → 임시등부표 설치 → 기존 표체 해상운반 → 표체 하역(진도소) →  신규표체(예비품) 조립 → 항로표지 및 조류 장비용품 이설  → 신규 표체 설치(장죽수도) 및 종합시험 → 기존 표체 분해 및 정비(진도소) → 포장・적재

③ 공사 효율 및 안전을 위하여 시공 순서 변경 시 필히 감독관과 협의 및 승인을 받아야 한다.

3) 등부표 인양(설치)시 조치사항

① 본 공사를 추진하기 전에 설치위치에 대하여 사전조사(수중 포함)를 실시하여 정확한 작업 여건을 파악하여야 한다.

② 등부표 설치 전 잠수조를 우선 설치 장소에 투입하여 수심 및 표체 하부 연결상태(HDPE 섬유로프 끝단부분까지 수중조사) 등에 대해 정확히 최종 확인을 하고, 표체설치시 기울임이 없어야 하며, 기울임이 발생 시에는 재설치하여야 한다.

③ 사전조사결과를 토대로 감독관과 업무 협의 후 교체공사를 추진한다.

④ 등부표 인양 및 설치 작업 시 예인선 2대를 이용하여 강조류 현장 상황에 따른 안전를 확보하고 작업 실시하여야 한다.

⑤ 인양 및 설치 작업 시 계류정착시설용 고리 및 볼트 체결과 계류샤클 및 사슬 연결이 탈락되지 않도록 견고하게 작업하여야 한다.

⑥ 등부표 인양 즉시 현장에서 표체 및 사슬에 부착되어 있는 조패류를 최대한 제거하여야 하며, 감독관 확인 후 지정 장소로 운반 및 거치하여야 한다.

⑦ 장죽수도조류관측등부표는 크레인 및 대선을 이용하여 안전하게 해상 양하 및 육상 이동 작업을 하여야 하며, 육상 안벽으로 인양과정에서 걸고리를 충분하게 하여 장력이 한쪽으로 쏠리는 현상이 없어야 한다.

⑧ 조류관측등부표의 인양과정에서 발생하는 표체의 파손은 도급자가 원상복구 하여야 한다.

⑨ 설치위치는 DGPS 수신기를 이용하여 수 회 정밀 측정을 한 다음 정확한 위치에 설치하고, 설치 완료 후에도 재측정을 실시하여 그 성과표를 제출하여야 한다.

⑩ 계류장치(사슬) 및 침추에 대한 인양 위치는 필히 감독관과 협의 후 작업을 해야 한다.

⑪ 잠수부는 필히 잠수부 국가자격증을 사본으로 제출하여야 한다.

⑫ 잠수부 작업은 한국산업안전공단에서 제정한 잠수작업 안전기술지침에 따른다.

4) 장비용품 철거 및 설치

① 등부표 인양 전 기존 등부표에 설치되어 있는 항로표지 장비․용품(등명기, 태양전지, 축전지 등) 및 조류관측장치 등을 안전하게 철거하여야 한다.

② 신규 등부표가 해상에 안전하게 설치된 이후 항로표지 장비․용품 및 조류관측장치 등을 설치하고 기능 작동에 이상이 없어야 한다.

③ 항로표지 장비용품 및 조류관측장치 등은 해상의 강풍, 파도 등에 의해 파손되지 않도록 단단하게 표체에 고정하여 기존과 동일하게 이설하고 종합시험을 통해 완벽하게 정상 동작하여야 한다.

④ 작업 중 장비용품 및 조류관측장치 등 일체의 파손 등에 대해서는 도급자 부담으로 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 대체하여야 하며, 사전 감독관의 승인을 받아야 한다.

5) 등부표 해상 및 육상 운반

① 해상운반은 해상기상이 양호한 날을 택일하여 운반 작업이 용이하도록 하여야 한다.

② 해상운반 이동경로는 적정항로를 선택하여 감독관에게 보고하여야 한다.

③ 인양 철거된 등부표는 진도항로표지사무소의 감독관이 지정하는 장소에 하역 및 해체(정비)・포장 후 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 한다.

④ 효율적인 해상운반 및 교체작업을 위해 등부표는 부선에 결박하여 해상의 너울성 파도 등에 의한 안전을 확보하여야 하며, 이동 중 현장 작업자를 배치하여 부선의 로프 절단, 기타 해양사고 등이 발생하지 않도록 작업 전 면밀히 검토하여야 한다.

⑤ 운반 도중 등부표 표체의 파손이나 변형이 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 물적 파손에 대해서는 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

⑥ 예항 시 해상 충돌 예방법의 규정사항을 준수하여야 한다.

⑦ 임시등부표 운반 및 설치 도중 표체의 파손이나 변형이 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 물적 파손에 대해서는 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

6) 기타사항

① 각 공정별 시방서 내용이 미비한 사항에 대하여는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

② 현장대리인은 공사현장의 안전관리 및 품질관리에 대하여 만전을 기하여야 하며 중요공정(인양, 계류 시설점검 및 설치)은 작업 전·후 감독관의 승인 및 입회하에 시공하여야 한다.

③ 등부표 선적 및 설치 과정에서 표체 도색 훼손이 예상되므로 도료를 이용하여 터치업 도장 후 완전 건조하여 현장에 설치하여야 한다.

④ 기존 등부표는 이물질을 최대한 제거하고, 표면 방청을 실시한 후, 직사광선 및 강풍, 호우 등에 강한 포장재료를 사용하여 단단히 고정하여야 한다.

⑤ 등부표 설치 및 철거 작업 시 발생한 폐기물 처리에 대하여는 도급자가 책임져야 한다.

⑥ 등부표 설치 및 완료 후 준공검사에 대비하여야 한다.

4.  예   정   공   정   표

4. 예정공정표

공 종	공 사 기 간 (일)												비 고
	40		80		120		160		200		240
사전준비
현장조사 (수중 포함)
해상운반 및 인양․교체
현장정리 및 준공준비
공 정(%)	40		40		40		40		40		40
누 계(%)	15		30		50		65		80		100

5.  설   계   예   산   서

2021년 2월 설계	설계자		심사자		담당		소장
2021년도 진도·완도해역 유도등부표 외 1기 인양 교체공사 설계 예산내역서 - 공사개요 : 유도등부표(LANBY-100) 인양․교체 1식 장죽수도 조류관측등부표 인양․교체 1식 ○ 총공사비 : 일금 이억칠천만원정(￦270,000,000원) - 도 급 액 : 일금 245,454,546원 원정 (부가가치세 : 일금 24,545,454원 포함)

6.  원   가   계   산   서

7.  일  위  대  가  표

8.  단  가  산  출  서

9.  설  계  도  면

표준 단면도(완도항유도등부표)

계류장치 상세도(완도항유도등부표)

표준 단면도(장죽수도 조류관측부이)

10. 위  치  도

위치도 현황(완도항유도등부표_완도항통항분리 해상)

위치도 현황(장죽수도조류관측등부표_하조도등대 전면 해상)