가이암남방등표 보수보강공사 설계서

2021.  3.

동 해 지 방 해 양 수 산 청

2021년 3월 설계	설계자		심사자		계장		과장		청장
가이암남방등표 보수보강공사 설 계 서 동 해 지 방 해 양 수 산 청

목 차
1.		설 계 설 명 서
2.		일 반 시 방 서
3.		특 별 시 방 서
4.		예 정 공 정 표
5.		설 계 예 산 서
6.		공사원가계산서
7.		일 위 대 가 표
8.		수 량 산 출 서
9.		설 계 도 면

1.  설  계  설  명  서

1.  설  계  설  명  서

가. 공 사 명 : 가이암남방등표 보수보강공사

나. 위    치 : 강원도 강릉시 경포해변 전면 약400m 해상 (N 37° 48′ 19.0″,  E 128° 54′ 52.9″)

다. 목    적 : 태풍 내습으로 기울어진 등표를 바로 세우고 기초 보강을 통해 항로표지 안정성 확보

라. 공사개요 : 등표 바로세우기 1식, 기존 기초콘크리트 및 등표 해양생물 제거 1식, 기초 보강 1식

마. 설계변경조건

(1) 정부재정 품셈 기준이나 노임단가의 변경이 심할 때

(2) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

(3) 현장 작업조건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때

(4) 공사 시공범위에 증감이 있을 때

(5) 기타 발주기관의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

바. 시행방법 : 본 설계서에 의거 도급으로 시행

사. 공사기간 : 착공일로부터 120일간

2.  일  반  시  방  서

2.  일  반  시  방  서

2.1 일반사항

가. 적용범위

이 시방서는 동해지방해양수산청에서 발주한 「가이암남방등표 보수보강공사」를 시행함에 있어 공사 계약서, 설계도서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약 내용의 이행을 확보하기 위한 것이며, 내용은 일반시방서와 특별시방서로 구분하여 구성된다.

2.2  적용 기준

가. 시방규정 및 관련 법규

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 제반 규정과 관련법의 규정을 준용하되, 규정 간에 상이한 사항이 있을 경우에는 항만 및 어항공사 전문 시방서를 우선하여 적용한다.

1) 항만 및 어항공사 전문시방서	7) 시설공사 검사업무 규정
2) 콘크리트 표준시방서	8) 항로표지장비․용품검사기준
3) 토목공사 표준일반시방서	9) 건설공사 관계법령 및 규정
4) 항만시설물 및 항로표지 구조물 설계기준	10) 건설산업기본법
5) 한국산업규격 (KS)	11) 건설기술진흥법
6) 건설공사 품질관리 검사기준	12) 기타 본 공사에 관련되는 각종 기준 및 규격

나. 본 공사에 관련되어 발주자가 제공하는 제 규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 간주한다.

다. 발주청에 제출하는 모든 서류는 반드시 공사감독자를 경유하여 제출하여야 한다.

2.3  공사 시행

가. 착공 시 서류 제출 사항

도급자는 공사 착공 시 다음 서류가 포함된 착공신고서를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(1) 현장대리인계

(2) 현장기술자 지정신고서 (안전관리자, 품질관리자)

(3) 공사 예정공정표

(4) 안전 및 품질관리 계획서

(5) 기타 발주자가 지정한 사항

나. 도급자의 의무

(1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

(2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 발주자가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

(3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제반 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주자의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

(4) 공사를 위한 보상을 하거나 임대 업무를 추진함에 있어, 도급자는 토지 소유자 등 이해관계인과 협의한 다음, 관련 사항을 조속히 조치하고, 발주자의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

(5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 공정표 및 시공계획서

(1) 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 예정공정표를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 기 수립된 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 공사감독자에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

(3) 공사 진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정 공정보다 지연될 경우, 도급자는 공사감독자의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입 등 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

라. 현장대리인 및 현장종사원

(1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법 등 관계법령에 의한 건설기술자라야 하며, 공사감독자의 승인 없이 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

(2) 공사감독자은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

(3) 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독자의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

(4) 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

마. 제보고 및 서류 양식

(1) 계약서에 지정한 것과 공사감독자가 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

(2) 공사감독자에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따라 정하지 않은 경우에는 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

바. 관계기관 등과의 협의

(1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인ㆍ허가나 협의는 공사감독자의 협조를 받아 도급자가 수행하여야 한다.

(2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 공사감독자를 경유하여 발주자에 제출하여야 한다.

사. 공사부지의 사용

(1) 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 부지는 발주자의 승인을 받아 무상으로 일시 사용할 수 있다.

(2) 공사를 시행하기 위해 발주자로부터 차용한 부지 외에 도급자의 필요에 의하여 설계 범위이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 발주자와의 협의에 따라 토지의 차용, 보상을 시행하되, 제반 사항은 도급자 책임으로 시행되어야 한다.

(3) 도급자는 공사 시행에 직접, 간접적으로 영향이 있어 철거가 불가피한 지장물에 대하여는 발주자와 협의, 당해 지장물의 소유주(기관포함)의 사전 승인을 받아야 한다.

아. 문화재 보호

(1) 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 그 즉시 공사를 중지하고 도난, 손괴 등을 방지할 수 있도록 현장보존조치를 하여야 하며, 이 사실을 공사감독자에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

자. 제법규의 준수

(1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

(2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임 하에 이루어지고, 투입된 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

차. 설계도서 등의 비치

(1) 공사 현장에는 해당공사에 관련된 계약서, 설계도서, 제반 표준시방서, 관계 법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 공사시행에 필요한 기구류 등을 비치하여야 한다.

2.4  시공기준

가. 설계도서 및 측량 기준

(1) 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 내용을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

(2) 도급자는 공사의 시공에 앞서 설계내역, 설계시방서, 구조계산서, 설계도 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

(3) 도급자는 상기와 같은 검토과정에서 수록된 내용의 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사감독자에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

(4) 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

(5) 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후의 형상과 치수를 나타낸다.

(6) 구조물의 표고는 약최저저조면을 기본 수준면으로 하는 해상 기본 수준면(APP. L.L.W DL(±)0.00)을 기준으로 한다.

(7) 공사수량의 단위 및 수량계산은 정부시설공사 건설표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

(8) 공사 시공 중 또는 준공 정리 시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도요령에 따라야 한다.

나. 사전조사

(1) 공사 장소에 인접한 시설물 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 공사감독자와 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

(2) 기타 공사에 관련된 환경에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

다. 공사용 자재

(1) 본 공사를 위한 주요 자재의 세부사항은 특별시방서에 따른다.

(2) 주요자재 보관중 도급자 귀책에 의해 자재가 변질, 변형, 오손되었을 경우에는 도급자 부담으로 제반 품질기준에 맞는 자재로 교체하여야 한다.

(3) 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 또는 산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

(4) 공사현장 반입 시 합격판정을 받은 자재라 할지라도 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 파손되었을 때는 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

2.5  가 시설물

가. 안내 표지판의 설치

(1) 도급자는 공사의 안내 표지판을 설치하여야 하며, 그 표지판의 규격, 재료, 표기 내용 및 설치 장소 등은 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

2.6  시공 관리

가. 공사기간

도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 공사감독자의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한, “나”항의 공사 중지사항 중 (1), (4), (5)항에 의해 공사기간 연장이 불가피할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 공사감독자에게 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

나. 공사의 일시 중지

공사감독자는 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

(1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

(2) 도급자가 설계도서대로 시공하지 않을 때

(3) 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

(4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

(5) 발주자의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

다. 작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 공사감독자에게 보고를 하여야 한다. 또한, 공사감독자에게 보고하였어도 이에 따른 추가비용 및 안전사고 발생 등에 따른 모든 책임은 도급자가 책임져야 한다.

라. 입회 및 자료 제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 시공 후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에 대하여는 공사감독자의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인받아야 한다.

마. 공사기록

(1) 도급자는 공사 진행에 따라 공사기록 사진을 촬영하고, 주요 공정에 대한 검사, 매몰부분 등에 대한 검사, 기성 및 준공 검사 장면을 사진으로 수록하며, 완공 후 제반 성과를 작성 편집하여 제출하여야 하며 기록 사진의 크기는 공정을 확인하기 위해 필요할 경우에는 변경 조정하여 제작한다.

(2) 시공 후 매설되거나 담수되어 확인할 수 없는 부분은 필히 사진촬영을 하여 수록하여야 하며, 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격 등을 판별할 수 있게 측량용 Pole이나 Staff와 함께 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

바. 현장관리

(1) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하고, 공사 시행중 발생되는 쓰레기 등 폐기물은 적법하게 처리하여 해양오염방지에 노력하여야 하며 부득이하게 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독자에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

(2) 공사 중 항상 관할 관계기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

(3) 화약, 휘발유, 전기등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

(4) 위험 때문에 일반인의 출입을 금지시킬 필요가 있는 공사 현장에는 공사감독자의 승인을 받아 그 구역에 적당한 방책을 설치하는 동시에 출입금지의 표지를 설치하여야 한다.

사. 분진 및 소음장치

(1) 도급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 분진 및 소음으로 공중에 피해가 없도록 하여야 한다.

아. 특허권의 사용

공사시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법 및 재료 등을 사용할 때에는 도급자가 그의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

자. 사고의 처리

공사 중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

차. 준공검사

(1) 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요한 제반 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 준공검사관의 지시에 따른다.

(2) 준공검사관의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

카. 비용부담에 관한 사항

공사 시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

(1) 공사시방서, 설계 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항

(2) 공사 착공 및 준공 시와 공사 진행 중 필요한 각종 측량

(3) 기성검사 및 예비준공검사, 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

(4) 공사 시행 상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험

(5) 교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대시설

하. 공사 준공후의 정리

공사가 완료되었을 때에는 공사감독자의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고 현장을 청소, 정리하여 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

2.7  품질관리 및 검사

가. 품질관리 일반

(1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술진흥법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당기준, 시험규정 등에 따라서 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

(2) 도급자는 착공 후 공종별 품질관리계획을 수립하여 시공단계별로 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(3) 규격 및 시험 방법은 계약서의 시방내용과 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

나. 공사용 재료의 품질

(1) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국산업규격에도 부합되어야 한다.

(2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 공사감독자가 변질 또는 불량품으로 판정한 때는 이를 사용할 수 없다.

다. 시공확인 및 검사

(1) 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 도급자 부담으로 제공하여야 한다.

(2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

(3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 공사감독자의 입회하에 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

라. 기성 및 준공검사

(1) 공사의 기성부분 검사 및 준공 검사는 현장대리인이 받아야 한다.

(2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

(3) 공사 준공기간

① 전체 공사는 설계설명서에 정하여진 바에 따라 입찰서에 기입할 착수일로부터 계산한 기간 내에 완전 준공되며, 공사기간은 휴일이 포함된 날짜를 기준하여 정한다.

② 천재지변, 국가전쟁, 화재, 전염병, 폭동, 공항 및 항구폐쇄와 같은 예기치 못한 불가항력의 원인에 의한 경우는 도급자의 공사 불이행으로 간주치 아니하며, 도급자는 원인 발생일로부터 10일 이내에 그 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

2.8 안전 및 환경관리

가. 안전관리

(1) 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 공사감독자의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

(1) 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립, 공사감독자의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 안전 조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독자의 승인과 검사를 받아야 한다.

(3) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

다. 안전표지 및 안전 보호구

(1) 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

(2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

라. 안전교육

산업안전보건법에 의거 공사 시공 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

마. 안전시공

도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 공사감독자의 지시를 따라야 한다.

바. 사고보고 및 응급조치

(1) 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 공사감독자에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 사상사고

② 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

③ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

(2) 전항의 경우에 인사사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 공사감독자에게 긴급보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

사. 안전관리비의 사용

(1) 도급자는 산업안전보건법 등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 공사감독자의 제출 요구 시에는 이에 따라야 한다.

(2) 당해 공사 금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안 된다.

(3) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용 내역서를 첨부하여야 한다.

아. 환경보호

도급자는 공사 중 또는 공사 준공 후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 또는 훼손이 발생치 않도록 공사장과 인근의 환경 보호에 만전을 기해야 한다.

2.9 준공검사

가. 준공 시 제출서류

(1) 준공신고서

(2) 준공검사원

(3) 공사비 정산동의서 및 내역서

(4) 준공사진(완료 전경)

(5) 안전관리비 및 환경보전비 사용내역

(6) 고용보험료 및 기타 납부증명원

(7) 준공사진첩(착공 전, 시공 중, 준공 후)

(8) 작업일지

(9) 기타, 감독관이 지시하는 사항

나. 준공검사 및 인수

(1) 도급자는 계약상 준공일전에 공사를 완료하고, 공사감독자에게 준공검사를 요청하여야 한다.

(2) 검사관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 실시할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다.

(3) 도급자는 준공검사 시 현장대리인이 입회하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 시공불량 개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단 시일 내에 재시공 하여야 한다.

다. 정산처리

(1) 도급자가 제출한 서류를 검토 후 설계서 및 도급내역서에 계상된 금액과 비교하여 정산처리하며, 품목별 추가사용 지출한 내역은 도급자 부담으로 한다.

(2) 국민건강보험료 및 국민연금보험료는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제73조 및 (계약예규)「정부 입찰·계약 집행기준」 제19장에 정한 바에 따라 사후정산 한다.

(3) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 의거 「산업안전보건법」 제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 정산처리 한다.

(4) 환경관리비는 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제61조(환경관리비의 산출 등), 별표 8(환경관리비 세부 산출기준) 등의 규정에 의해 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산처리 한다.

3.  특  별  시  방  서

3.  특  별  시  방  서

3.1 총칙

가. 일반사항

(1) 본 시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 특별한 사항만을 규정하며 제 시방서보다 우선한다.

(2) 본 공사와 관련된 제규정 및 본 공사도면은 본 시방서의 일부로 간주한다.

3.2 제거공

가. 적용 범위

(1) 본 항은 제거공을 위한 재료, 장비, 시공 등에 관한 사항을 규정한다.

나. 일반 사항

(1) 시공자는 제거공 작업 착수 전 제거공법 등이 명시된 작업계획서를 감독관에게 제출, 승인을 받은 후 작업에 착수한다.

(2) 보수·보강 구조물의 위치는 공사 착수 전 원설계자의 현장조사 결과(사진, 수심도, 암석시험)를 참고하고 필요 시 수중촬영을 실시하여 감독관과 협의하여 결정한다.

(3) 구조물 기초 하부 굴착 시 설계도면에 표시된 범위 외에는 손상을 최소화하며 굴착작업 완료 후에는 주변의 암반상태를 면밀히 조사하여 감독관에게 보고하여야 한다.

다. 폐기물 처리

(1) 기존 콘크리트 제거로 발생하는 폐기물(폐콘크리트) 「건설설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」의 건설폐기물의 처리기준 및 방법에 따라 적법하게 처리하여야 하고, 처리 확인서를 감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 콘크리트 폐기물의 처리 계획을 수립하여 감독관의 승인을 받아야 하고 외부 반출 시 감독관의 확인 후 진행하여야 한다.

3.3 기초하부 굴착

(1) 도급자는 지정된 구역의 암반을 소형브레이커를 이용하여 설계도서에 명시된 위치까지 굴착 하여야 한다.

(2) 암파쇄 사토 장소는 공사의 능률과 경제성 등의 제반조건을 충분히 검토하여야 한다. 사전 검토할 내용은 다음과 같다.

① 착공 전 수심측량에 의한 설계수량과 비교 검토

② 해당 어촌계를 방문하여 공사 전반에 대한 협의 후 주민 동의 여부 확인

③ 파쇄된 암은 백호우 그물망 형식의 버켓으로 제거하여 니토의 준설이 발생되지 않도록 하여야 한다.

④ 설계에 반영된 투기장의 사용 여부(주변 어항공사의 여건조사 및 변경 시 감독관 협의)

⑤ 주간 및 야간에 작업선의 위치를 주변을 왕래하는 어선이 확인할 수 있는 등화 장치설치

(3) 암 굴착 후 등표 거치 전 기초 면이 평탄한가를 확인하고, 감독관의 승인 후 거치하여야 한다.

(4) 암 굴착면은 굴착면 고르기를 통해 정밀하게 고르기를 시행하도록 한다.

(5) 암굴착 및 고르기 후 콘크리트 타설 전까지는 바닥면에 이물질이 채워지지 아니하도록 대책을 수립하여야한다.

3.3 콘크리트공

가. 적용범위

(1) 본 항의 시방은 수중 콘크리트를 시공하는 데에 따르는 재료, 장비, 시공 등에 관한 사항에 대하여 규정한다.

나. 콘크리트의 품질 및 규격

(1) 콘크리트는 반드시 KS F 4009에 준하며, 재령 28일의 설계기준강도는 다음 값을 기준으로 한다.

구 분	구 조 물	설계기준 강도	굵은 골재 최대치수	슬럼프	비 고
무근 콘크리트	기초굴착 외부 및 속채움 수중콘크리트	30 Mpa	25 mm	15 cm	펌프카 타설

다. 검  사

(1) 공사감독관이 본 시방서에 규정하는 콘크리트의 품질을 확인하기 위하여 도급자에게 아래와 같이 규정된 콘크리트의 품질관리시험에 대한 성과표를 요구할 시 도급자는 공사감독관의 요구에 따라 필요한 자료를 즉시 제출하여야 한다.

(2) 공사감독관은 제출된 성과표에 의하여 조건에 맞는 가를 검사하여 필요한 조치를 지시할 수 있다.

(3) 품질관리시험은 선정시험, 관리시험, 검사시험으로 구분하며 선정시험은 사용재료의 선정을 위하여 시공 전에 실시하는 시험이고 관리시험은 공사에 사용하는 재료의 품질을 검사하고 이를 관리하여 구조물의 질을 확보하기 위한 시험이다. 또한 검사시험은 선정시험 및 관리시험의 적부를 확인하고 구조물의 질을 조사하기 위하여 실시하는 시험이다.

(4) 해상믹서는 콘크리트 타설시 KS F 2455에 의한 비비기 성능시험을 하여 소요의 비비기 성능은 가지고 있음을 확인해야 한다.

(5) 가경식 믹서 및 강제식 믹서는 원칙적으로 각각 KS F 8008 및 KS F 8009에 적합한 것이어야 한다.

(6) 관리시험 결과, 콘크리트 강도가 소요 콘크리트 강도에 미달될 때는 기 시공된 부분을 완전히 제거하고 재시공 하여야 한다. 일반적으로 압축강도의 시험치가 설계 기준강도를 밑도는 확률이 5% 이하일 때는 소요 강도치로 본다.

(7) 슬럼프, 공기량 및 기타(골재의 입도, 함수율, 염화물 함량, 단위 중량등)의 시험은 공사감독관이 필요하다고 인정 할 때 수시로 할 수 있다.

(8) 슬럼프는 지정된 값의 ± 2.5cm의 범위를 넘어서는 않된다.

(9) 공사감독관이 필요하다고 할 때 타설된 콘크리트에서 시료를 채취하여 압축강도 시험(KS F 2405)을 해야 한다. 또, 공사감독이 지시하는 경우 공시체를 5개 제작하여 현장에서의 구조물과 같은 상태로 양생하고 그 중 1개는 재령 28일 강도를 확인하여야 한다.(거푸집 철거, 동바리 제거 등이 있는 주요구조물)

라. 콘크리트 펌프카의 이용

(1) 콘크리트의 타설은 콘크리트 치기를 능률적으로 하고 타 공사와의 간섭 등을 피하기 위하여 콘크리트 펌프카를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 콘크리트 펌프카의 규격은 콘크리트의 품질, 치기장소, 1회 타설량 등을 고려하여 이에 맞는 기종을 선택한다.

(3) 수송관의 배치는 될 수 있는 대로 굴곡을 적게 하고 가능하면 수평 혹은 상향으로 해서 수송 중 관내에 콘크리트가 막히지 않도록 해야 한다.

(4) 수송관의 지지는 견고하게 하고, 압송 중 진동으로 이미 쳐놓은 콘크리트, 거푸집 등에 영향을 주지 않도록 해야 한다.

(5) 거푸집내의 1개소에 다량의 콘크리트를 배출하므로서 횡방향으로 밀어내야 되는 일이 없도록 수송관의 배출구를 적당하게 이동시키면서 쳐야 한다.

마. 콘크리트 치기

(1) 콘크리트를 치기 전에는 납품된 수량, 타설할 장소, 운반장치, 치는 순서와 방법, 다짐방법 등에 대한 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 사전 승인을 받아야 한다.

(2) 콘크리트를 치기 전에 타설장소의 이물질을 제거하고 깨끗이 청소하며 철근, 매입자재 등이 정위치에 있는지를 다시 확인하여야 한다.

(3) 치기용 콘크리트를 현장에서 손수레를 사용하여 운반할 경우 운반 중에 재료의 분리가 일어나지 않도록 평탄한 운반로를 설치하여야 한다.

(4) 콘크리트는 원칙적으로 연직 슈트를 사용하여 타설할 경우 트레미 등을 이어대어 재료분리가 적은 것을 사용하여야 한다.

(5) 콘크리트의 타설은 재료의 분리 및 손실이 될 수 있는 대로 적은 방법으로 빨리 운반하여 경화되기 전에 즉시 쳐야 한다. 특별한 사정으로 즉시 칠 수 없는 경우 비비기를 시작한 후 1시간 이상 경과되었으면 거듭 비비기를 하여야 하고, 경화되기 시작한 콘크리트를 사용하여서는 않된다.

(6) 콘크리트를 치기 전에 거푸집, 기타 타설 순서 등에 관하여 계획서를 작성 감독관에게 제출하고, 한 구획내의 콘크리트는 연속적으로 쳐넣어야 한다.

(7) 거푸집 안에 투입된 콘크리트는 다시 이동시킬 필요가 없도록 쳐넣어야 하며, 1개소에 다량의 콘크리트가 배출된 경우 일지라도 진동기를 써서 콘크리트를 횡방향으로 이동시키는 일이 있어서는 않된다.

(8) 콘크리트 치기를 중단할 때에는 그 배출량을 조정할 호퍼 또는 기타 장비를 구비해야 한다.

(9) 균등질의 콘크리트 강도를 얻기 위하여는 한 구획내에서 연속적으로 치기작업을 해야하고, 그 표면이 거의 수평이 되도록 콘크리트를 치고, 균일하게 다짐을 해야 한다.

(10) 한꺼번에 한구간의 콘크리트를 치지 못할 때에는 수직면에서 중단토록 하고, 각층 표면은 거칠게 하여 그 다음 콘크리트 층과 줄눈(Cold Joint)이 생기지 않도록 다져야 한다. 하층 콘크리트가 응고하기 전에 치는 상층 콘크리트는 양측 콘크리트가 완전히 혼합되어 중간에 불연속 없이 밀착되도록 해야 한다..

(11) 거푸집의 높이가 높은 콘크리트를 칠 경우 재료 분리의 방지나, 쳐넣고 있는 층의 거푸집 등에 콘크리트가 부착하여 경화하는 것을 막기 위하여 거푸집에 투입구를 설치하거나, 연직 슈트 또는 펌프 배관의 배출구를 치기면 가까운 곳까지 내려서 콘크리트 치기를 해야 한다. 이 경우 슈트, 펌프배관 등의 배출구와 치기면까지의 높이는 1.5m 이하를 원칙으로 한다.

(12) 타설 도중 토사 등의 이물질이 혼입된 것이 발견될 시는 전부를 불량 콘크리트로 간주하고 콘크리트 전량을 제거해야 한다.

바. 다지기

(1) 콘크리트를 치는 도중이나 친 후에는 기계적인 진동에 의하여 충분히 다져야 하고 다짐에는 내부 진동기를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 사용하는 진동기의 규격은 KS F 8004 (콘크리트 봉형 진동기) 또는 KS F 8005 (콘크리트 거푸집 진동기)의 규정에 따라야 한다.

(2) 내부 진동기를 사용하여서 다짐을 할 때 한 장소에서의 진동이 10초 이상을 넘어서는 안되며, 찔러넣는 간격은 50cm를 넘어서는 안된다.

(3) 진동기는 거푸집에 부착시키거나 거푸집에 닿지 않도록 하여야 하고 진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시키는데 사용해서는 안된다.

(4) 평탄하고, 곰보가 없고, 골재분리가 없는 좋은 표면을 만들기 위하여 진동기 사용이 끝난 후 콘크리트가 경화되기 전에 거푸집의 모서리나 예각부의 거푸집 표면을 따라서 잘 다듬고 손질해야 한다.

(5) 2층 이상으로 나누어 치는 콘크리트 공사에서 내부 진동다짐의 경우에는 진동기를 먼저 친 아래층 콘크리트속에 10cm정도 찔러 넣고 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 해야 한다.

(6) 어느 정도 굳기 시작하고 있는 콘크리트 위에 덧치기를 할 경우에는 덧치기 면에 약한 이음이 생기지 않도록 해야 한다. 콘크리트가 어느 정도 굳기 시작한 때라 함은 진동기를 사용해도 다시 재성형되지 않는 상태를 말한다. 덧치기는 윗층, 아래층의 콘크리트가 일체가 되도록 공사감독관의 지시에 따라 꼼꼼하게 시공해야 한다.

(7) 콘크리트가 연속되어 있을 때 콘크리트의 수축 및 침하에 대비하기 위하여 콘크리트를 타설한 후 2시간 정도 기다린 후 콘크리트를 쳐서 변화되는 경계면에 균열이 생기지 않도록 해야 한다.

사. 매설물의 설치

(1) 콘크리트 타설 전에 구조물용 볼트, 앙카, 행거, WIRE ROPE 매설 등 본 공사에 필요한 관련품목은 거푸집안의 지정된 위치에 설치하고, 콘크리트 타설 작업과정의 충격이나 진동에 의하여 위치가 변하지 않도록 고정시켜야 한다.

아. 수중 콘크리트

(1) 범 위

① 평균해수면(M.S.L) 이하는 수중 콘크리트를 사용하여야 한다.

② 수중 콘크리트는 그 성질을 충분히 고려하여 재료, 배합, 치기 및 시공기계 등에 특히 주의하여 재료분리가 될 수 있는 대로 적게 되도록 시공해야 한다.

(2) 배 합

① 수중 콘크리트의 슬럼프 기준은 15cm를 기준으로 한다.

② 잔골재율은 40~45%를 표준으로 하고, 굵은 골재는 둥근모양의 입도가 좋은 자갈을 사용하여야 하며 굵은 골재로 사용할 부순돌은 KS F 2527에 적합한 것이어야 한다.

③ 강도저하 및 그에 따른 콘크리트의 제 성질의 저하를 막고 또한 시공성을 확보하기 위해, 물-시멘트비의 최대치를 50%, 단위시멘트량의 최소치를 370kg/m3 이상을 기준으로 하며, 외부콘크리트(세굴방지용) 타설 시에는 프롬시멘트로 배합하여야 한다.

(3) 콘크리트 치기

① 수중 콘크리트는 정수 중에서 치는 것을 원칙으로 하여야 한다.

② 시멘트의 유실, 레이탄스의 발생을 방지하기 위하여 적당한 물막이를 하여 물을 정지시켜야 한다.

③ 콘크리트는 수중에 낙하시켜서는 안 되며 콘크리트 면을 가능한 한 수평하게 유지하면서 소정의 높이 또는 수면 상에 이를 때까지 연속해서 쳐야한다.

④ 레이탄스의 발생을 적게 하기 위하여 치는 도중에 물을 휘젓거나 펌프의 선단부분을 이동시켜서는 안된다.

⑤ 수중 콘크리트 치기는 콘크리트 펌프를 사용해서 치는 것을 원칙으로 하며, 공사감독관의 승인을 얻은 경우에 한하여 트레미나 밑열림 상자, 밑열림 포대를 사용할 수 있다.

⑥ 콘크리트 품질이 떨어지는 것을 방지하기 위해 콘크리트 펌프의 배관은 수밀해야 한다.

⑦ 기초 외부콘크리트는 초속경 초강도 특수시멘트를 사용하여 저조면에서 콘크리트치기를 하여 콘크리트가 굳도록 한다.

자. 해상 믹서를 이용한 콘크리트 치기

(1) 콘크리트 믹서는 콘크리트 제조능력, 제조설비, 품질관리 상태를 고려하여 선정하고 사전에 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

(2) 믹서의 선정에 있어서는 시멘트, 골재, 콘크리트 배합용 물의 운반 및 저장방법과 저장능력, 콘크리트의 운반 및 치기 방법 등도 고려해서 제조설비 및 믹서선의 크기 등을 결정하여야 한다.

(3) 콘크리트의 품질 또는 배합, 저장에 대한 사항은 시공에 앞서 지정된 사항에 따라 시방배합을 정하여 그 자료를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(4) 공사감독관의 지시가 있는 경우에는 배합시험을 실시하여 그 시험 결과를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(5) 조수대기 작업의 경우에는 치기에 필요한 시간과 조위 관계를 충분히 파악, 검토하고 거푸집에 틈이 있는 경우에는 틈을 메꾸는 등 필요한 조치를 강구해야 한다.

차. 콘크리트 펌프에 의한 치기

(1) 수중콘크리트를 낮은 곳에서 압송할 때 배관 내에 부압이 걸리지 않도록 펌프 배관은 수밀해야 한다.

(2) 수송관 안지름은 10~15cm로 하며 수송관 1개로 칠 수 있는 면적은 5㎡정리한다.

(3) 치기 중에는 배관 내를 콘크리트로 채우며 배관의 선단부분은 콘크리트 상면부터 30~50cm 아래로 유지해야 한다.

(4) 배관의 이동 시에는 배관내로 물이 역류하거나 콘크리트의 수중낙하가 되지 않도록 선단부분에 역류 방지 장치등 조치를 강구해야 한다.

(5) 압송압력에 의해 관이 선단부분이 동요되어 콘크리트가 해수와 교란되지 않도록 선단부분에 충분한 중량을 붙여주거나 고정시켜 주어야 한다.

3.4  거푸집공

가. 적용범위

(1) 본 항은 구조물이 설계도서에 표시된 형상 및 치수가 정확하게 확보되며, 만족스러운 구조물이 되도록 하는데 필요한 거푸집에 관한 사항을 규정한다.

나. 재료 및 구조물

(1) 거푸집은 완성된 콘크리트 구조물의 위치 및 형상을 정확하게 유지할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 거푸집에 사용할 자재는 강도, 내구성, 강성, 작업성, 치기할 콘크리트에 대한 영향 및 경제성을 고려하여 선정해야 한다.

(3) 거푸집은 외력에 의한 변형, 파괴, 비틀림이 생기지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

(5) 거푸집은 콘크리트에 충격을 주지 않고 각 부분을 단독으로 떼어낼 수 있도록 조립, 설치하여야 한다.

(6) 거푸집을 다시 사용할 때는 파손된 것을 엄밀히 수리하고, 짜기 전에 콘크리트면에 접하는 부분은 깨끗이 청소하여야 한다.

다. 시  공

(1) 거푸집은 조립작업이 쉽고 정확하게 할 수 있어야 하며, 떼어내는 작업 시 콘크리트 구조물이나 기타 구조물에 진동이나 충격을 주는 일이 없도록 간편한 구조로 하여야 한다.

(2) 거푸집판 또는 패널의 이음은 이음부에서 몰탈이 새지 않도록 부재축에 직각 또는 평행으로 조립하여야 한다.

(3) 콘크리트를 치기 전에 거푸집의 콘크리트와 접하는 면은 항상 깨끗하게 청소하고 충분히 적셔져 있어야 한다.

(4) 가공, 조립된 거푸집 등 목재류는 사용하지 않을 때는 태양에 직접 노출되지 않게 보관하여야 한다.

(5) 거푸집에 콘크리트를 부어넣기 전 각 부분에 대한 이상유무를 검사하고 특히, 거푸집 Joint를 통한 시멘트풀의 누출이 없도록 조치한 후 콘크리트를 타설하여야 한다.

라. 검  사

(1) 거푸집은 콘크리트를 치기 전에 반드시 감독관의 검사를 받아야 한다.

(2) 콘크리트를 치는 작업 중에도 거푸집의 부풀음, 몰탈의 흘러나옴, 거푸집의 이동, 경사, 침하, 접속부의 느슨해짐, 기타 이상 유무를 검사하고, 이상이 발생 시는 즉시 필요한 조치를 취하고 공사감독관에게 보고하여야 한다.

3.5  유압잭공

가. 적용범위

(1) 본 항은 기울어진 등표를 바로세우기 위하여 필요한 유압잭 작업에 관한 사항을 규정한다.

나. 일반 사항

(1) 시공자는 유압잭 작업 착수 전 유압잭 설치 위치 등 작업계획서를 감독관에게 제출, 승인을 받은 후 작업에 착수한다.

(2) 유압잭 설치 위치는 공사 착수 전 현장조사 결과(사진 및 영상, 수심도, 암석시험)를 참고하고 필요 시 수중촬영을 실시하여 감독관과 협의하여 결정한다.

(3) 유압잭 설치를 위한 수중 작업 시 안전수칙을 반드시 지켜야 하며, 작업 중 잠수부와 수상 조장과의 통신이 원활하도록 한다.

(4) 유압잭은 잠금 밸브가 부착되어 있는 복동식 잭으로 1EA당 150톤 이상 3EA를 설치하여야 한다.

(5) 유압잭은 등표가 기울어진 하부면을 1/3으로 나누어 철판 등으로 단단히 지지하고 3EA 유압잭이 동시에 작동하여야 한다.

다. 등표 세우기

(1) 유압잭을 이용해 등표를 바로 세우는 작업 시 등표 구조물의 안전여부를 반드시 확인하면서 작업을 하여야 한다.

(2) 등표를 세운 후에는 계측기나 측량기 등을 이용해 등표의 기울기를 확인하여야 하며, 감독관의 승인 후 후속 공정을 진행한다.

(3) 수중 콘크리트 타설 시 등표 기초하부 공간에 콘크리트가 고르게 타설되도록 하여야 하며, 콘크리트가 거푸집 외부로 세어 나가지 않도록 한다.

4.  예  정  공  정  표

4. 예 정 공 정 표

기간 공종	제 30 일		제 60 일		제 90 일		제 120 일		비 고
작업준비
제거공
보강공
부대공
공 정(%)	3	7	15	15	20	20	10	10
누 계(%)	3	10	25	40	60	80	90	100

5.  설  계  예  산  서

2021년 3월

설계자

심사자

계장

과장

청장

2021년도

가이암남방등표 보수보강공사

설계예산서

○ 공 사 개 요 : 제거공 1식, 보강공 1식

○ 총사업비 : 일금 이억오천사백만원정[￦ 254,000,000)	총 공 사 원 가 :	일금 228,405,818원
	부 가 가 치 세 :	일금 22,840,581원
	폐기물 처리비 :	일금 2,753,601원
	총 공 사 비 :	일금 254,000,000원

동해지방해양수산청

6. 공 사 원 가 계 산 서

7.  일  위  대  가  표

8.  수  량  산  출  서

주요물량 총괄표

공 종	구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
보 강 공	철 재 거 푸 집 (원 형)	t=6㎜ 이상	㎡	75.40
	속 채 움 콘 크 리 트	fck=300MPa, 슬럼프 플로=400∼500mm) (5종 포틀랜트시멘트+수중불분리혼화제)	㎥	135.35
	폐 기 물 처 리	콘 크 리 트	ton	50.58

공 종	산 출 근 거	수 량
1. 기존 보강콘크리트 제거(수중)	(π × 8.02 / 4 - π × 6.02 / 4) × 1.0m = 21.99㎥	21.99㎥
2. 폐기물 처리 (콘크리트)	21.99㎥ × 2.3t/㎥ = 50.58tonf	50.58tonf
4. 등표 표면 해양생물 제거(수중)	등표구조물 : 2.0m × π × 6.0m = 37.70㎡ 기존 철재거푸집 : 1.0m × π × 8.0m × 2(양면) = 50.27㎡ 소계 : 37.70 + 50.27 = 87.97㎡	87.97㎡
5. 기초하부 굴착(t=0.3m)	V = 2π × d × A (파푸스-굴딘 정리) 2 × π × 6.0 × {(0.3 + 0.667) / 2 × 0.3} = 5.47㎥	5.47㎥
6. 철재거푸집 제작 (6㎜이상, 원형) 및 설치(수중)	π × 12.0m × 2.0m(여유치 고려) = 75.40㎡	75.40㎡
7. 속채움 보강 콘크리트 (fck=300kg/㎠,슬럼프 플로=400∼500mm) (5종 포틀랜드시멘트 +수중불분리혼화제)	(π × 12.02 / 4 - π × 6.02 / 4) × 1.5m(여유치 고려) + 5.47㎥(기초굴착 채움) + 11㎥(세굴부 채움) = 143.7㎥ (ADD 2%) = 146.5㎥	146.5㎥
8. 수중콘크리트 타설	146.5㎥	146.5㎥

9. 설   계   도   면

가이암남방등표 위치도

배치도(해도)