남항동2가 273-1번지 해안도로 호안파손지 정비공사

설        계        서

2021. 03

	부산광역시 영도구

해안도로호안파손지정비공사	남 항 동 2 가 2 7 3 ╻ 1 번 지
설계서
2 0 2 1 ․ 3
영도구	부산광역시

목 차

1. 설  계  설  명  서

2. 공  사  시  방  서

3. 예  정  공  정  표

4. 동 원 인 원 계 획 표

5. 설  계  예  산  서

6. 일  위  대  가  표

7. 단  가  산  출  서

8. 수  량  산  출  서

9. 설   계   도(별첨)

	1. 설 계 설 명 서

설  계  설  명  서

1.1 공  사  명  : 남항동2가 273-1번지 해안도로 호안파손지 정비공사

1.2 위      치  : 부산광역시 영도구 남항동 2가 273-1번지(부산남항) 일원

1.3 공 사 목 적  : 본 공사는 남항동 2가 273-1번지 일원(부산남항)의 항만시설(물양장) 노후화 등으로 인하여 일부구간의 지반침하 및 균열이 발생하여 항만시설 및 도로 등의 이용에 불편을 초래하고 시설물의 안정성 확보가 어려운 실정이어서, 상기 시설물에 대한 조속한 항만시설 유지보수공사로 주민의 안전사고 예방 및 불편사항을 해소하는데 그 목적이 있음.

1.4 공 사 개 요 :

1) 호안 복구공 : 콘크리트블록식 직립제 설치( L = 10.4m )

2) 호안 정비공 : - 절삭후 아스팔트덧씌우기( A = 517.0m2 )

- 안전난간 및 코핑 설치( L = 85.0m )

3) 부  대   공 : 1식

4) 폐기물 처리 : 1식

1.5 주요자재 내역

본 공사에 소요되는 주요자재 내역은 다음과 같다.

1) 관급자재

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
레 미 콘	25-24-120	m3	44	관 급
레 미 콘	25-27-120	m3	51	〃
아 스 콘	WC-2,가열,3등급	Ton	66	〃
안 전 난 간	W6000 x H750	m	85	〃

1.6 설계변경 조건

가. 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을 경우

① 계약에 정하는 작업량의 증감 및 생략, 작업의 성격 및 질과 종류의 변경이 있을 때

② 공사 일부의 고저, 선, 위치 및 치수의 변경이 있을 때

③ 공사의 완료에 필요한 추가작업이 요할 때

나. 현장조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경

① 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다르거나, 현장조건이 자연적 또는 인공적으로 장애를 받는 경우

② 공사현장의 상태가 일반적인 판단상태와는 아주 상이하거나, 불확실하거나, 공사기간 또는 공사금액에 차액이발생하여 서면으로 보고하였을 경우

다. 감독관의 지시로 인하여 물량의 증감이 발생하였을 경우

라. 기타 사항

① 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계되었으므로, 조사 불가능으로 인하여 부적합하거나 조사후 변경된 사항에 대하여는 시공 당시 현장여건에 맞추어 설계변경 조치한다.

② 시공도중 발주청의 방침이 바뀌었을 때

③ 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 운반거리 등의 변경이 있을 때

④ 관급자재의 수량, 인도장소 및 운반거리의 변동이 있을 때

⑤ 아스팔트 콘크리트 배합설계 시험치가 변경될 때

⑥ 공법 변경이 불가피할 때

1.7 공사기간

본 공사의 공사기간은 착수일로부터 3개월(90일)로 한다.

단, 다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.

가. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

나. 발주청의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때

다. 보상문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때

라. 관급자재 수급이 지연되었을 때

마. 기타 공사기간의 연장이 불가피할 때

바. 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때

	2. 공 사 시 방 서

	3. 예 정 공 정 표

예   정   공   정   표

○ 공사기간 : 착수일로부터 90일간

공 종			보 할 (%)	공 사 기 간 ( 90일 )						비 고
				15일	30일	45일	60일	75일	90일
1.	기존 구조물 제거공		4.10	2.1	2.0
2.	제체공		11.3		3.8	3.8	3.7
3.	구체공		7.1	2.4	2.4		2.3
4.	상부공		25.7				8.5	8.6	8.6
5.	포장공		3.7					1.9	1.8
6.	배수공		1.2				1.0	0.2
7.	가시설공		28.9	7.2	7.2	7.2		7.3
8.	부 대 공		18.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
공 정 율(％)			소 계	14.7	18.4	14	18.5	21	13.4
			누 계	14.7	33.1	47.1	65.6	86.6	100.0

	4. 동 원 인 원 계 획 표

동 원 인 원 계 획 표

(단 위 : 인)

구 분	계	공 사 기 간(90일)						비 고
		15일	30일	45일	60일	75일	90일
보 통 인 부	112	16	21	16	21	23	15
기 술 인 부	179	26	33	25	33	38	24
합 계	291	42	54	41	54	61	39

	5. 설 계 예 산 서

설    계

년 월 일

2021년 03월   일

설 계 자

심 사 자

팀  장

과  장

2021년

남항동2가 273-1번지 해안도로 호안파손지 정비공사

설     계     예     산     서

○  공 사 개 요

◈ 호 안 복 구	: 콘크리트블록식 직립제 설치( L = 10.4m )
◈ 호 안 정 비	: - 절삭후 아스팔트덧씌우기( A = 517.0m2 )
	- 안전난간 및 코핑 설치( L = 85.0m )
◈ 부 대 공	: 1식
◈ 폐 기 물 처 리	: 1식

총   공   사   비

:

일금 이억일천삼백오십사만원정     (￦ 213,540,000-)

도      급     액

:

일금 일억육천팔백이십오만이천원정 (￦ 168,252,000-)

관 급 자 재 대

:

일금 사천오만오천원정             (￦  40,055,000-)

폐 기 물 처 리 비

:

일금 오백이십삼만삼천원정         (￦   5,233,000-)

	6. 일 위 대 가 표

	7. 단 가 산 출 서

	8. 수 량 산 출 서

	9. 설 계 도(별첨)

중    기    손    료

자    재    단    가

노    임    단    가

견 적  및  기 타 자 료

	폐기물처리시방서

	폐 기 물 처 리