목    차

제 1 장	총 칙
제 2 장	콘 크 리 트 공 사

제1장  총    칙

1-1	공 사 일 반
1-2	계 획 및 관 리
1-2-1		공 사 협 의 및 조 정
1-2-2
		공 사 관 리
1-2-3		제 출 물
1-2-4		공 무 행 정 서 류
1-2-5		검 사
1-3	자 재 관 리
1-4	품 질 관 리
1-5	안 전․보 건 및 환 경 관 리
1-5-1		안 전 관 리
1-5-2		환 경 관 리
1-6	임 시 가 설 시 설 물
1-7	준 공

제1장 총   칙

1-1 공사일반

1-1 공사일반

1-

1. 일반사항

1.1 적용범위

1-1 공사일반

1.1.1 적 용

본 시방서는 건설기술진흥법 및 인공어초 표준설계 및 제작·시공 등에 관한 지침에 의거 작성한 인공어초설치공사시방서로서 본 공사 시공관리에 대한 기준은 본 시방서를 적용한다.

1.1.2 적용순서

(1) 설계서에 누락, 오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 인공어초의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완한다.

(2) 설계도서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

(3) 이 공사시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

(4) 이 공사시방서에서 제시되지 않은 사항은 전문시방서, 표준 시방서의 순으로 적용하며,표준시방서간 상호모순이 있는 경우에는 발주기관의 의견에 따른다.

1.1.3 법규 우선 준수

시공자는 본 시방서를 포함한 설계도서의 내용이 관련법규의 내용과 상호모순이 있을 경우, 관련법규를 우선 적용하여야 한다. 다만, 본 시방서에서 특별히 “○○은 관련법규의 규정에도 불구하고 본 시방서에서 정하는 바에 따른다.”라고 명기한 경우에는 이를 따른다.

1.1.4 발주자 대리인 경유

시공자가 발주청에 통지 또는 제출하는 서류는 반드시 공사감독관을 경유하여야 한다.

1.2 용어의 정의

1.2.1  “건설기술 진흥법”의 규정에 의한 업무를 수행하기 위하여 발주청이 임명한 기술직원 또는 그 대리인으로 “공사계약일반조건의 공사감독관”을 말한다.

1.2.2 “시공자”라 함은 “공사계약 일반조건에 명시된 계약상대자”를 말한다.

1.2.3 “보증인”이라 함은 계약상대자의 책임을 보증하는 계약상대자 이외의 자를 말한다.

1.2.4 “현장기술자”라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 시공자가 지정 또는 고용하여 현장시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

1-1 공사일반

1.2.5 “건설기술자”라 함은 건설기술진흥법 제2조 8호에 의해 국가기술자격법등 관계법령에 의한 건설공사 또는 건설기술용역에 관한 자격을 가진 자와 일정한 학력 또는 경력을 가진자로서 대통령령이 정하는 자를 말한다.

1.2.6 “현장대리인”이라 함은 “공사계약 일반조건에 명시된 공사현장대리인”을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

1.2.7 “하도급자”라 함은 시공자로부터 건설공사를 하도급 받은 자를 말한다.

1.2.8 “표준시방서”라 함은 정부가 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 일반적인 시공기준으로서 발주청 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다. (건설기술진흥법 시행규칙 제40조의 1 제3항)

1.2.9 “전문시방서”라 함은 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공기준을 말한다. (건설기술진흥법 시행규칙 제40조의 1 제3항)

1.2.10 “공사시방서”라 함은 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성․지역여건․공사방법 등을 고려하여 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하는 시공기준을 말한다. (건설기술진흥법 시행규칙 제40조의 1 제3항)

1.2.11 “설계도서”라 함은 “건설기술진흥법 시행규칙 제40조의 1 제3항”에 따른 발주청에서 발주한 건설공사의 설계 등 실시설계도면․공사시방서 및 발주청이 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

1.2.12 “시공상세도”라 함은 “건설기술진흥법 시행규칙 제42조 2항”에 따라 본 시설물의 안전에 관한 구조계산을 필요로 하지 않고 입찰시 물량 내역서를 구성하지 않는 시공에 관한 사항으로서 공사의 진행단계별로 작성하여 현장에 종사하는 기능공 및 기술직원들이 설계도면 및 시방서 등에 불명확하게 되어있는 부분을 쉽게 이해할 수 있고, 시공시의 유의사항 등을 표기한 도면을 말 한다.

1.2.13 “입찰내역서”라 함은 제시된 공종 및 공사물량에 대하여 입찰단가를 기입하여 제출하는 입찰서류를 말한다.

1.2.14 “승인”이라 함은 시공자로부터 제출, 계출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 발주자 대리인이 그 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

1.2.15 “지시”라 함은 발주자 대리인이 시공자에 대하여 그 권한의 범위내에서 필요한 사항을 지시하여 실시토록 하는 것을 말한다.

1.2.16 “검사”라 함은 설계도서 및 물량내역서에 따라 계약이행에 관하여 공사 단계별로 시공자가 발주자에게 제출하는 사항을 근거로 완성부분에 대하여 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.

1.2.17 “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서 대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인검사 이후 실행한 결과에 대하여 공사감독자는 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

1.3 공사감독관의 업무

1.3.1 공사감독관의 업무

(1) 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 시공자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 “건설기술 진흥법 시행령 제67조, 동법시행규칙 제48조”와 “공사계약 일반조건 제5절4-다” 규정이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

(2) 공사감독관이 시공자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

(3) 공사감독관은 “건설기술진흥법 제40조의 1”에 의거 시공자가 건설공사의 설계도서·시방서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 해당건설공사를 시공하는 경우에는 재시공·공사중지명령 등 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

1-

(4) 공사감독관은 시공자에게 재시공·공사중지명령 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 시공자에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 공사재개지시 등 필요한 조치를 해야 한다.

(6) 공사감독관은 건설공사가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장 지도점검을 시행하게 할 수 있다.

(7) 공사감독관은 점검결과 지적사항에 대하여 시공사에게 시정을 요구할 수 있으며 이 때, 시공자는 시정조치하고 시정조치내용에 대하여 시정전, 시정후의 천연색 사진을 포함하여 공사감독관의 확인을 받아 발주청의 장에게 제출하여야 한다.

(3) 시공자는 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 공사감독관의 확인을 받아야 하며, 지적사항이 주요사항인 경우에도 공사감독관의 확인 승인을 받아야 한다.

(4) 지적사항에 대하여 시정조치가 완료되기 전까지는 기성 또는 준공검사원을 제출할 수 없다.

1.4 시공자의 책무

1.4.1 설계도서 검토

(1) 시공자는 공사 착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 생기거나 공사가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

(2) 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공사 착수예정일로부터 15일 까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 통지하고 발주청의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

가. “1.8.1 (1) 설계변경 사유”에 명시한 사유가 있는 경우

나. 1-2-1 “공사협의 및 조정”에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

다. 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

라. 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

마. 기타 시공자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

바. 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

(3) 시공자가 발주청에 통지하지 아니하거나 발주청의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또 시공자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주청의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 시공자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

1-

1.4.2 책임한계

(1) 시공자는 현장대리인 등 시공자가 당해공사를 위하여 임명·지정·고용한자 및 시공자와 납품계약(철근 기계가공업체 포함) 또는 하도급계약을 체결한자의 해당공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 시공자는 공사감독관이 서면으로 공사를 인수하기 전까지 인공어초 제작부지 및 제작된 인공어초를 보호해야 한다. 시공자는 공사중 또는 공사중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구해야 한다.

(3) 시공자는 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료해야 한다.  이에 소요된 비용은 시공자의 태만이나 과실이 없는 경우 (예를 들어 지진, 해일, 태풍이나 기타 천재지변과 같이 예견하거나 대처할 수 없는 불가항력적인 경우나 전쟁이나 적에 의한 경우 또는 발주청의 귀책사유에 의한 경우 단, 태풍의 경우는 사전에 충분히 대체할 수 있는 상당한 이유가 있는 경우는 제외한다)를 제외하고는 시공자가 부담해야 한다.

(4) 시공자는 공사기간이 연장되는 경우에도 제작부지 및 제작품을 관리할 책임이 있으며, 제작품의 피해를 방지하기 위한 필요한 예방조치를 취해야 하며 민원이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

(5) 발주청의 장이 임명한 검사자가 검사를 완료하였다고 하여 시공자의 책임이 완료되는 것이 아니고 계약요건에 따라 공사를 수행해야하는 시공자의 책임은 하자보증기간까지 책임이 감면되지 않는다.

(6) 공사목적물을 해상투하하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 시공자 등의 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 시공자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

(7) 공사감독관이 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

(8) 공사감독관이 발행한 업무지시서에 대하여는 시공자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고해야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가조치를 취할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

(9) 시공자가 발주청에 시행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

1.4.3 인공어초의 중간투하

(1) 시공자의 요청에 의하여 발주청의 승인이 있어 공사의 완전 준공 이전에 인공어초 제작품에 대하여 중간투하를 할 수 있으며, 이는 당초 공사계약조건 또는 시공자의 공정계획의 변경에 따라 상호 협의하여 실시할 수 있다.  그러나 이러한 인공어초의 일부 중간투하가 해당공사에 대한 공사의 준공사유나 계약조건의 규제가 면제되는 것은 아니다.

(2) 중간 투하되는 인공어초는 제반검사가 완료된 제품에 한하며, 시공자는 준공에 앞서 중간 투하된 인공어초에 대하여 일체의 추가비용을 발주청에 요구할 수 없으며, 다만 발주청의 지시가 있을 경우에 한하여 시공자와 협의하여 최소한의 경비를 지불할 수 있다.

1.4.4 응급조치

(1) 시공자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 사전에 발주자 대리인의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 시공자는 시공기간중 재해가 발생 하였을 시에는 필요한 응급조치를 취하여야 하며, 발주자 대리인에게 우선 보고하여야 한다.

(3) 공사감독관은 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 시공자 또는 연대보증인에 대하여 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 있어서 시공자는 즉시 이에 응해야 한다.  다만 시공자 또는 연대보증인이 요구에 응하지 아니할 때에는 발주청 일방적으로 시공자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

(4) (1)항 및 (2)항의 조치에 소요된 경비에 대하여는 발주청이 인정하는 경우에 한하여 관련법규에 준용하여 처리할 수 있다.

(5) 하자보수 기간중에 발생하는 하자에 대하여 발주청으로부터 보수 또는 수리의 요구가 있을 때에는 시공자 또는 보증인은 지체없이 그 요구에 응하여야 한다.  다만, 시공자 또는 보증인이 그 요구에 응하지 아니할 때에는 발주청은 시공자 부담으로 제3자에게 일방적으로 보수 또는 수리시킬 수 있다.

1.4.5 현장대리인 등의 현장상주

(1) 시공자가 지정·배치한 현장대리인등은 현장에 상주해야하며 “현장에서 이탈시에는 공사감독관의 승인을 받아야 한다.”

(2) 공사의 전부 또는 일부의 착공지연기간 동안의 인원 및 현장상주여부에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

1.5 공공에 대한 책임 및 의무

1.5.1 법령의 준수

(1) 시공자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 있어야 한다.

(2) 시공자는 항상 이를 준수해야 하며 시공자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 여하한 민원이나 책임문제가 야기되지 않도록 해야 하며 문제발생시 시공자의 책임하에 해결하여야 한다.

1-

가. 공사시공과 관련된 각종 인·허가 사항

나. 특허권 및 실용신안등록, 의장등록권의 사용

다. 위생, 보건 및 안전의 준수

라. 재산의 보호와 복구의무

마. 손해배상 청구에 대한 책임

바. 채권양도의 금지

사. 해양구조물의 손괴 및 기타 어업인에게 피해를 준 사항

1.6 각종시방서의 적용

본 공사는 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서 및 규정에 따라 시행하여야 하고, 시공자는 본 시방서 및 규정을 숙지, 활용하여야 한다.

1.6.1 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

(1) 토목공사 일반 표준시방서

(2) 콘크리트 표준시방서

(3) 항만공사 표준시방서

(4) 항만 및 어항설계기준

1.6.2 건설공사 관련법령 및 규정(건설기술진흥법등)

1.6.3 한국 산업 규격

1.6.4 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

1.6.5 산업안전 보건법

1.6.6 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

1-

1.7 설계 적용 기준

1.7.1 노임단가 : 대한건설협회에서 조사, 공표한 시중노임단가

1.7.2 환    율 : 2021년 3월 1일 발표한 환율 적용

1.7.3 자재단가 : 조달청 가격정보지 및 물가자료, 유통물가, 물가정보

- ‘21년  3월호

1.7.4 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 추후 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 발주자 대리인과 협의하여 산출하고 그 결과를 발주청장에게 보고한다.

1.8 설계변경

1.8.1 설계변경 사유

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주청 승인을 득하여 변경시행 할 수 있다.

(1) “공사계약 일반조건 제6절 1-가-1”에 따라 시공자가 발주청에 통지한 다음 각호의 사유,  설계도서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

(2) “공사계약 일반조건 제6절 1-가-4”에 따라 발주청이 시공자에게 통보한 다음 각호의 사유

가. 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

나. 특정공종의 삭제

다. 공정계획의 변경

라. 시공방법의 변경

마. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

(3) 본절 1.1.3의 법규 우선준수에 따라 설계도서의 내용이 관련법규 및 조례와 다른 사항

(4) 본 시방서 1-2-1절 1.1.1의 공사협의 및 조정에 따른 설계변경

(5) 설계도서와 당해공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 적합되지 않는 사항

(6) 기타사항

가. 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

나. 제작장의 위치 및 운반거리가 변경될 경우

다. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우

라. 품질시험비는 공사기간 및 물량에 따라 변경

마. 지자체 등 공공기관에서 고시하는 제작부지의 고시단가 변동시

바. 레미콘 슬럼프치는 공사시방서를 원칙으로 하며, 계절별 타설시기 타설조건에 따라 배합설계에 의해 기준 슬럼프치를 변경할 때

사. 발주청의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사설계비 반영 및 시공비 변경

아. 안전점검비 및 건전성 평가비용은 조사비용에 따라 변경

자. 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시

차. 강판과 철근의 할증은 발주청장의 승인된 재단도의 결과에 따라 정산

1.8.2 설계변경 여건 보고서류

설계변경요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 본 시방서 1-2-4 공무행정서류 1.5.1에 따른다.

1-

1.9 제작부지 및 선적항

1.9.1 제작부지 : 신안군 점암항 인근

1.9.2 선 적 항 : 신안군 점암항

1.10 기성량의 조정

공사의 검사결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.11 공사기간

본 공사의 공기는 150일로 하고 본시방서 1-1절 1.12에 의거 발주청의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

1.12 공사기한 연기

1.12.1 연기요청일수

시공자는 “공사계약 일반조건 8절2”에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주청에요청할 수 있는 일수는 본 시방서 1-2-2절 1.1.7의 공정계획변경에 의한 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며, 준공일을 감안하여 발주청과 협의하여 정한다.

1.12.2 제  출

공사기간 연기요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 본 시방서 1-2-4절 1.5.2에 따른다.

1.13 공사계약의 분쟁

1.13.1 당해 계약에서 발생하는 모든 문제에 관한 분쟁은 계약당사자간 쌍방의 협의에 의하여 해결한다.

1.13.2 1.13.1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 당사자가 관계 법률의 규정에 의하여 설치된 조정위원회 등의 조정 또는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의하여 해결할 수 있다.

1.14 하도급

1.14.1 하도급자 선정

시공자가 공사부분을 하도급하는 경우에는 그 시공을 담당하기에 적합한 기술 및 능력이 있는 자로서 해당 공사의 면허소지자를 시공자로 선정하여, 해당 공사 착수전에 동 면허 사본과 실적증명서를 제출하여 발주청에 신고 또는 승인을 받아야 한다.

1.14.2 하도급자의 주지

시공자는 발주청 또는 공사감독권의 지시, 승인, 협의로 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련한 사항에 대하여 하도급자에게 철저히 주지시킨다.

1-

1.14.3 하도급 시행계획서 등

(1) 시공자는 하도급을 시행하기 전에 하도급 시행계획서를 발주청에 제출하여야 한다. 또한, 해당 공사 착수예정일 30일전까지 하도급 계약을 체결하여야 한다.

(2) 하도급 시행계획서는 다음 사항이 포함되어 있어야 한다.

가. 하도급 예정업종

나. 하도급 계약금액

다. 하도급계약 예정일

(3) 하도급에 관한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1-2-4 공무행정서류 1.8 하도급 관련서류”에 따른다.

1.14.4 안내판 설치

시공자는 시공자 사무실 입구에 1.2m×1.5m크기로 공사현황을 알리는 안내판을 설치하여야 한다.

1.14.5 어초의 실명표지

시공자는 제작물량의 10%는 어초의 제작년도, 사업지구명, 발주처 및 공사감독관, 제작회사 및 대표, 현장대리인등의 내역을 아크릴판에 표시하여 어초중앙 상부에 부착하여야 한다.

(1) 어초의 제작 및 감독 등에 관한 사항에 대한 실명표시는 가로 30㎝, 세로 20㎝, 두께 1㎝인 직사각형 흰색 아크릴판에 아래 “예시”와 같이 표시하되 글자는 검정색으로 음각되도록 하여야 한다.

(2) 표지판은 직경 5㎜ 이상인 동선을 이용하여 어초 내 주철근과 연결하여 결합한 후 거푸집을 설치하고 콘크리트를 타설하여 영구 보존되도록 견고하게 시공하여야 한다.

(3) 표지판은 어초의 중앙상부에 위치하도록 하되 표지판의 표면과 어초의 콘크리트 표면과 일치되도록 하여야 한다.

사 업 명	00년 ○○ ○○지구 인공어초 설치공사
발 주 처	전라남도 해양수산국 수산자원과	제작회사 및 대표	○○○○(주) ○○○
공사감독관	직급 : ○○○ 성명 : ○○○	현장대리인	토목기사 ○○○

1-2-1 공사협의 및 조정

1-2 계획 및 관리

1-2-1 공사협의 및 조정

1-

1. 일반사항

1.1 공사 상호간의 마찰방지

1.1.1 협의 및 조정

시공자는 당해공사와 연관된 발주청 소속의 공무원, 발주자대리인을 포함한 공사관련자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 모든 공사관련자들과 면밀히 협의․조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다.

1.1.2 시공자의 책임

(1) 시공자는 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정·보완공사에 대한 책임을 진다.

1.1.3 발주처의 업무분야

(1) 전라남도 : 발주·변경·준공 및 검사, 공정확인 및 감독업무

1.2 신 자재·공법의 시험시공

1.2.1 시공자는 발주청이 신 자재·공법의 개발 및 적용을 위하여 지시하는 시험시공을 적극적으로 이행하고, 시험시공에 관한 공사진행 과정, 소요인력품 및 성과를 기록·비치하여야 한다.

1.2.2 시공자는 시험시공과 관련하여 공사감독관이 시행하는 현장교육 및 기술지도와 사후관리 점검에 협조하여야 한다.

1-2-2 공사관리

1. 일반사항

1.1 공정관리

1.1.1 시공자는 공사계약일반조건 제5절5-가에 의한 예정공정표를 작성하여 공사감독관에게 제출해야한다.

1-2-2 공사관리

1-

1.1.2 시공자는 매일 공사작업내용을 발주자대리인에게 익일 09:00전까지 정기적으로 구두 및 서면으로 통보하여야 하며, 공사감독관은 예정공정과 실시공정을 확인하여 공사의 부진여부를 검토한다.

1.1.3 공사감독관은 투하지여건, 기상조건, 제작장 부지 등에 따른 관계기관과의 협의사항이 정상적으로 추진되는지를 시공자와 상호 협의하여 검토, 확인한다.

1.1.4 공사감독관은 필요한 경우 현장소장을 포함한 관계직원 합동으로 진행 작업에 대한 실적을 분석, 평가하여 공사추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와 재발방지 대책, 공정진도의 평가, 기타 공사 추진상 필요한 내용의 협의를 위한 공사추진회의를 개최할 수 있다.

1.1.5 공사감독관은 설계변경 등으로 인한 물량의 증감, 공법변경, 공사중의 재해, 천재지변 등 불가항력에 의한 공사중지, 지급자재 공급지연, 제작부지 제공지연 등의 현장실정 또는 시공자의 사정 등으로 인하여 공사진척이 부진할 경우 시공자로 하여금 공정계획을 재검토하여 수정공정계획을 수립토록 할 수 있다.

1.1.6 1.1.5항에 따라 공사감독관은 시공자로부터 수정공정계획을 제출받아 검토 후 타당할 시에는 승인하여야 한다.

1.1.7 공사감독관은 1.1.5항의 검토시 수정 목표준공일이 당초 계약준공일을 초과하지 않도록 조치하여야 한다. 다만 계약준공일을 초과할 경우에는 자체검토안을 작성하고 필요시 수정공정계획안과 함께 공사기간 연기요청하여야 한다.

1.1.8 시공자는 공사 착수전에 표준어초를 미리 제작하여 발주자 대리인의 검사를 받은 후 어초제작 현장마다 비치하여 주2회 이상 공사 직전 현장 인부들에게 견실시공에 관한 교육을 실시한 후 공사에 착수토록 하여야 한다.

1.2 현장요원 관리

1.2.1 시공자는 “공사계약일반조건 제5절4-가에 의거 해당 공사의 현장대리인을 발주청에 통지해야 하며, 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사에 관한 모든 사항을 처리해야 한다.

1.2.2 시공자는 당해 계약공사의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야한다.

1.2.3 시공자는 채용한 근로자에 대하여 발주자 대리인이 당해 계약공사의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고 인정하여 이의 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며, 공사감독관의 승인 없이는 교체된 근로자를 당해 계약공사의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

1.3 하도급 관리

1.3.1 공사감독관은 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 할 때에는 “공사계약 일반조건 제11절1”에 의거 공사감독관의 검토를 받아 발주청의 서면승인을 받아야 한다. 다만,“건설산업기본법 제29조 제2항”에 의하여 전문공사를 당해 전문 공사업자에게 하도급하는 경우에는 발주청에 통지하여야 한다.

1.3.2 1.3.1항의 규정에 의하여 하도급한 경우에도 계약상의 시공자의 책임과 의무가 면제되지는 아니하며, 시공자는 하도급인·하도급인의 대리인·근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

1.3.3 발주청은 1.3.1항에 의하여 시공자로부터 하도급계약에 대한 승인신청 또는 통지를 받은 때에는 하도급 계약금액이 하도급 하고자 하는 부분의 산출내역서상의 계약단가를 기준으로 산출한 금액(일반관리비 및 이윤을 포함한다.)의 100분의 88미만(“국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제19조”의 규정에 의한 공사는 제외)인 때에는 당해 하도급계약내용을 심사하여 당해 공사의 적정한 이행이 되지 아니할 우려가 있다고 인정되는 때에는 시공자에게 하도급계약내용의 변경을 요구할 수 있으며, 이 경우 특별한 사유가 없는 한 신청일 또는 통지 일부터 15일 이내에 그 결과를 시공자에게 통지해야 한다.

1.3.4 시공자는 1.3.1항에 의거 하도급계약에 대한 승인신청 또는 통지를 할 때에는 “공사계약일반조건 제11절2”에 해당될 경우 당해 하도급부분에 대한 대가를 발주청이 시공자에게 직접 지급하는 것을 용인한다는 내용의 문서를 제출하여야 하며, 동 문서를 제출하지 아니한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 하도급계약의 승인 등을 하지 않아야 한다.

1-2-2 공사관리

1-

1-2-3 제출물

1. 일반사항

1.1 제출절차 등

1.1.1 협의 및 확인

(1) 시공자는 각 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 공사감독관과 협의·조정한다.

(2) 시공자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(3) 시공자는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집·정리 및 전문가에 대한 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다)에 대하여 공사에 추가로 청구할 수 없다.

1.1.2 규격 등

서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정양식을 제외하고는 시공자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 상철하여 제출하여야 한다.

1.1.3 추가요구 및 변경

발주청은 공사의 원활한 진행 등을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 이 공사시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록유지를 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

1-2-3 제출물

1-

1.1.4 내용변경

모든 제출물은 내용의 변경을 수반하는 사유가 있어 발주자 대리인이 이를 인정한 때에는 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

1.1.5 미제출시의 제한

본 시방서가 정한 제출물을 공사감독관에게 제출하지 않고서는 공사감독관의 승인 또는 확인을 받을 수 없으며, 해당 공사를 진행할 수 없다.

1.2 공사예정 공정표

1.2.1 PERT/CPM 공정표

공사예정공정표는 PERT/CPM 방식으로 작성되어야 한다.

1.2.2 제출시기 및 부수

(1) 제출시기

가. 정상착공의 경우 : 시공계획서 제출시

나. 착공지연의 경우 : 실 착공과 동시

(2) 제출 부수 : 2부(공사감독관의 검토를 받아 1부는 계약부서에 제출)

1.3 시공계획서

1.3.1 승  인

1-2-3 제출물

시공자는 절(Section)별 절에 명시한 공사에 대한 시공계획서를 작성하여 공사감독관의 확인을 받은 후 공사를 착수하여야 한다.

1-

1.3.2 포함 내용

(1) 공사개요

(2) 시공관리체제(현장기술자 조직표 포함)

(3) 품질관리계획서 : 품질관리조직, 실시방법

(4) 안전관리계획 및 환경관리계획(필요시)

(5) 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

(6) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

1.3.3 제출시기 및 부수

(1) 제출시기 : 각 공종공사 착수 후 15일 까지

(2) 부수 : 2부

1.4 시공 상세도면

1.4.1 제출 및 승인

공사감독관은 공사여건과 계약문서 조건 및 설계도서와의 적합성 여부를 확인하고 공사 수행상의 잘못 또는 부분공사의 누락을 방지할 필요가 있다고 인정되는 경우 시공자로 하여금 시공 상세도면을 작성, 제출토록 할 수 있다. 이 경우 공사감독관의 승인을 받기전에 선시공하여서는 않된다.

1.4.2 작성방법

시공 상세도면은 설계도서의 요구사항이 종합되어야 하며, 부위별 재료명과 시공 또는 설계도서대로 시공하기 위해 조정하여야 할 조건이 있을 경우는 이를 명시하여야 한다.

1.4.3 제출시기 및 부수

(1) 제출시기 : 각 공종공사 착수 7일전까지

(2) 부수 : 1부(청사진 또는 복사물)

1.5 자재 제품자료

1.5.1 제  출

공사감독관이 지정하는 공사용 자재(시험·연구어초에 사용되는 재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)에 대해서는 사용 또는 설치 전에 설계도서의 요구조건 및 품질기준에의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 자재 제품자료를 제출하여 발주청의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.

1.5.2 포함 사항

자재 제품자료에는 아래의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은 사항은 공사감독관과 협의하여 생략할 수 있다.

(1) 자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)

(2) 당해 자재가 설계도서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류 중 하나를 제출하여야 한다. 이 증빙서류에 대한 사항은 “1-4 품질관리 1.3.1 품질시험기준 (3)”의 별도 명시나 지시가 없을 경우에는 품질시험·검사를 실시하지 않는 자재에 대한 기준과 같다.

가. 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 자재. 다만, 발급한 날로부터 1년이 경과되지 않았고, 공공기관 사업장에서 공사감독관의 서명·날인을 받아 시험 의뢰하여 발급 받은 시험성적에 한한다.

나. 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료나 자재 제조자의 시공 또는 설치시방서

(3) 설계도서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류, 적합하지 않을 경우 등은 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계도서 및 현장여건의 조정 요구사항

(4) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시 되어 있는 사항

1.5.3 제출시기 및 부수

1-

자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 1부를 발주자 대리인에게 제출한다. 다만, 시설공사에 최초로 사용되기 전에 품질시험·검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어 있는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

1.5.4 증빙서류 사본

“본절 1.5.3 (2)”의 증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명·날인이 있어야 한다.

1.6 견  본

1.6.1 제출 및 비치

공사감독관이 지정하는 공사용 자재에 대하여 설계도서에 명시한 기준에 적합한 자재의 견본을 제출, 발주청의 승인을 득하여 선정하여야 하고, 선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용할 수 있도록 시공자 사무실에 준공시까지 비치하여야 한다.

1.6.2 포함 사항

(1) 자재의 견본(이 공사시방서 각 절에 명시된 자재에 한한다)

(2) 해당 시방번호 및 품질 기준

(3) 기타 이 공사시방서의 각 절에 명시되어 있는 사항

1.6.3 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 1세트를 공사감독관의 확인을 받아 현장사무실에 비치하여야 한다. 다만, 건설공사에 최초로 사용되기 전에 품질시험·검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어 있는 경우에는 그 시험·검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

1.7 공사 사진

1.7.1 비치 및 제출

공사시공과정은 수시로 천연색 사진(규격 9㎝ × 12㎝)으로 기록, 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며,  준공시 “1-8 준공 1.4 준공서류”에 따라 발주청에 제출하여야 한다.

1-

1.7.2 촬영방법

공사시공 후 확인이 불가능한 부분은 눈금자가 나올 수 있는 측정도구(직선자 등)를 사용하여 촬영하여야 하며 공사감독자가 지정하는 특정공정에 대하여는 사진촬영시 공사명, 촬영일자, 사진설명이 기재된 사진설명판이 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

1.8 공무행정서류

공무행정서류에 대하여는 “1-2-4 공무행정서류”에 따른다.

1.9 신고 및 인․허가 신청서류

1.9.1 대행

시공자는 계약 이행을 위하여 필요한 관계기관 신고 및 인·허가(도시계획시설 변경을 포함한다.)에 관련한 설계도서 작성, 신청서류 제출, 관계기관과의 협의 및 착공·준공에 필요한 수속업무를 발주청을 대신하여 수행하여야 한다.

1.9.2 제출

신청서에 시공자 또는 설치자란이 있을 경우에는 시공자 대표가 기록 날인하고 신청란은 필요시 발주청의 장의 직인 날인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및 인허가 필증을 교부받아 준공시 “1-8 준공 1.4 준공서류”에 따라 발주청에 제출하여야 한다.

1-2-4 공무행정서류

1. 일반사항

1.1 비치 및 제출

1.1.1 관련 절

본 절은 “1-2-3 제출물 1.8 공무행정서류”에 대한 세부사항을 정한 것이다.

1.1.2 비치 및 제출

시공자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준거하여 작성하여야 하며, 공사감독관이 필요시 수시로 열람할 수 있도록 비치하고 공사가 준공되면 지체없이 발주청에 제출하여야 한다.

1-2-4 공무행정서류

1-

1.2 착공서류

1.2.1 착공신고서

(1) 정상착공시 제출서류

가. 착공신청서 : “양식 1” 참조

나. 현장기술자 지정신고서 : “양식 2” 참조

현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 시험사를 통합하여 작성한다.

다. 현장기술자 경력증명서 (한국건설기술인협회 발급) 및 자격증 사본

라. 내역서

마. 착공전 사진

착공전 제작부지현황을 확인할 수 있도록 촬영한다.

(4) 제출시기 및 부수

공사 착공시 (착공지연시는 당초 착공예정일) 각 3부를 작성하여 공사감독관을 경유하여 2부를 전라남도 경리관에게 제출하여야 한다.

1.2.2 공사계획서류

(1) 제출서류

가. 공사예정공정표 (PERT/CPM)

“1-2-3 제출물 1.2 공사예정공정표”에 따른다.

나. 시공계획서

“1-2-3 제출물 1.3 시공계획서”에 따른다.

다. 자재수급계획서

공사에 사용할 가공된 철근(공장가공 철근에 한한다) 및 공사감독관이 지정하는 자재의 적기반입을 위하여 시공자는 철근가공 공장등과 반입자재의 품명, 규격, 수량, 사용예정일 및 반입예정일 등을 포함한 자재수급계획을 충분히 협의하여 공사예정표에 부합되도록 작성하여야 하며 철근가공공장 및 자재수급자의 사정에 의하여 자재공급이 지연될 경우라도 시공자의 자재조달의 책임이 감면되는 것은 아니다.

(2) 제출시기

공사 착공후 15일 이내와 계획변경시“양식3”참조

(3) 제출부수

각 2부

1.3 현황보고

1.3.1 일반사항

(1) 공사감독관은 다음사항을 시공자로 하여금 제출토록 할 수 있다.

가. 월별공정율 및 수행공사금액

나. 인력․장비 및 자재현황

다. 계약사항의변경 및 계약금액의 조정내용

라. 공사 진행상황을 나타내는 천연색 사진

1.3.2 공정현황

(1) 제출서류

가. 공정현황보고 : “양식 6” 참조

(2) 제출시기 및 부수

매월25일 1회 1부를 공사감독관에게 제출해야 한다.

1.4 기성검사원 및 준공검사원

1.4.1 기성검사원

(1) 제출서류

가. 기성검사원 : “양식 7” 참조

나. 기성부분 내역 : “양식 8” 참조

다. 기성부분 준공내역 : “양식 9” 참조

라. 시 험 성 과 표 : “양식 10 참조”

(2) 제출시기 및 부수

기성검사 요청서 각 3부를 작성 공사감독관을 경유하여 전라남도 경리관에 제출

(3) 기성검사원 제출시 공사감독관의 확인을 받아야 하는 서류

가. 표준안전관리비 사용내역

나. 공정현황

1-

다. 현장점검 지적사항 조치완료 여부

라. 관련 공무행정서류 기록 및 비치에 관한 사항

1.4.2 준공검사원

(1) 제출서류

가. 준공계 : “양식 11” 참조

나. 준공 사진

다. 준공부분 내역서 : “양식 8” 참조(금액변경시)

라. 공사비 준공내역 : “양식 9” 참조(금액변경시)

마. 품질시험 성과표 : “양식 10” 참조

바. “1-8 준공 1.4 준공서류”에 명시된 서류

(2) 제출시기 및 부수

준공검사 요청시 각 3부를 공사감독관의 확인을 받아 2부를 전라남도 경리관에 제출

(3) 준공검사원 제출시 공사감독관의 확인을 받아야 하는 사항

가. 안전관리비 및 표준안전관리비 사용내역

나. 공정현황

다. 현장점검 지적사항 조치완료 여부

라. 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

마. 기술지도 완료증명서

(4) 미준공시

가. 미준공 확인서 1부 제출

1.5 변경승인 요청

1.5.1 설계변경승인 요청

(1) 제출서류

가. 변경요청 공문

1-

나. 변경 사유서

다. 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

라. 변경 설계도면(필요시)

마. 계산서(수량) 및 공사시방서(개선공법인 경우에 한함)

바. 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

(2) 설계변경 승인요청시에 각2부를 작성하여 공사감독관을 경유하여 전라남도 경리관 제출

1.5.2 준공기한 연기원

(1) 제출서류

가. 준공기한 연기원 : “양식 13” 참조

나. 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

다. 공사중단 사실확인서 및 증빙자료 (공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출시)

라. 기타 관련증빙자료

(2) 제출시기 및 부수

가. 준공기한 연기 요청시 각 3부를 공사감독관을 경유하여 전라남도 경리관에 제출

나. 착공 지연시는 실착공 후 15일 이내 제출

1.6 시공확인 및 점검서류

1.6.1 현장 지도점검

현장지도점검대장 : “양식 15” 참조

공사 지도점검자의 시공부분 및 반입자재 부실여부에 대한 지도점검결과 지적사항 및 시정완료 확인에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다. 현장지도 점검결과 지적사항에 대하여 재시공 내용과 재시공전 및 후의 사진을 촬영하여 공사감독관을 경유하여 결과 보고하고, 그 결과 보고자료를 상시 비치하여야 한다.

1.7 품질시험·검사 및 자재 관리서류

1.7.1 품질시험계획

건설기술관리법 시행규칙 제15조 2의 3항에 따른다.

1-

1.7.2 자재 관련서류

(1) 공급원 승인 요청서 : “양식 16” 참조

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 선정을 위하여 자재품질 검토 요청서 1부 제출한다.

이 요청서에는 해당제품에 대한 “1-2-3 제출물 1.5 자재제품자료” 및 “1-2-3 제출물 1.6 견본”을 첨부하여야 한다.

(2) 품질시험·검사대장 : “양식 17” 참조

공사용 자재에 대한 품질시험·검사 결과에 대하여 시험사 및 현장대리인이 날인하여 상시 비치한다.

(3) 시험 성과표 : “양식 10” 참조

기성검사원, 준공검사원에 첨부하여 제출하고, 예비준공검사 신청시 제출한다.

(4) 자재 검수부 : “양식 23” 참조

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 반입 시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지 여부를 확인한 후, 품질시험·검사를 실시하고 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

(5) 품질시험·검사 불합격자재조치표 : “양식 21 참조”

품질시험·검사 불합격된 자재의 장외반출 사진 및 내용을 기록하여 비치한다.

1.8 하도급 관련서류

1.8.1 일부하도급 승인신청 및 통지서류

(1) 승인신청서류

가. 하도급 승인신청서

나. 하도급 사유서

다. 하도급 예정금액(하도급 비율)

라. 시공자의 면허증 및 면허수첩 사본

마. 시공자의 관련공사 시공실적

(2) 통지서류

가. 하도급계약 통지서

나. 하도급 계약서

다. 공사내역서

라. 예정공정표

마. 하도급 대금지급보증서 사본

바. 하도급 이행(계약) 보증서 사본

사. 시공자의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩 사본

아. 시공자의 건설기술자 경력증명서(건설기술인 협회 발급)

(3) 시기

가. 승인신청시기 : 하도급 계약을 체결하기 전

나. 통지시기 : 하도급계약을 체결, 변경 또는 해제한 날로부터 30일 이내

(4) 부수

공사감독관을 경유하여 1부를 보관한다.

1.8.2 전문공사 하도급 통지

(1) 통지서류

가. 하도급계약통지서

나. 하도급계약서

다. 내역서

라. 예정공정표

마. 하도급 이행(계약) 보증서 사본

바. 시공자의 건설업 면허수첩 사본

사. 시공자의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩 사본

1-

아. 시공자의 건설기술자 경력증명서 (한국건설기술인 협회발급)

(2) 통지시기

하도급계약을 체결, 변경 또는 해제한 날로부터 30일 이내

(3) 부수 : 일부하도급 승인신청 및 통지서류와 동일

1.9 안전관리서류

1.9.1 안전관리계획서

계획서의 작성기준은 “1-5-1 안전관리, 1.1.1 안전관리계획서”에 따르고 시공자가 자체기록 및 관리하여야 한다.

1.9.2 정기안전점검 결과

시공자가 건설안전전문기관에 의뢰하여 정기안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과를 현장사무실에 비치하여 공사감독관이 볼 수 있도록 하여야 한다.

1.9.3 안전일지

시공자가 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

1.9.4 안전관리비와 표준안전관리비의 사용내역 및 집행영수증

시공자는 안전관리비와 표준안전관리비의 항목별 세부 사용내역 및 집행영수증 사본을 기성검사원 및 준공검사원 제출시 1부를 제출하여야 한다.

1-2-5 검    사

1. 일반사항

1.1검사의 종류

1.1.1 기성부분검사

공사준공 이전에 계약공사의 일부에 대하여 행하는 검사

1-2-5 검 사

1.1.2 예비준공검사(투하입회)

인공어초를 투하하기 이전에 행하는 제작된 인공어초를 확인하는 검사

1.1.3 준공검사

공사가 완공되었을 때 전부분에 대하여 행하는 검사

1.2 검사원 제출

1.2.1 시공자는 공사비를 청구하기 위하여 해당공사의 기성부분 또는 준공검사를 받고자 할 때에는 제출물에 의한 공사 기성검사원(“양식 7” 참조) 또는 준공계(“양식 11” 참조)를 공사감독관을 경유하여 계약부서에 제출해야 한다.

1.2.2 시공자는 제작된 인공어초를 적지에 투하코자 할 경우 투하예정일 20일 이전에 예비준공검사예정일과 투하예정일을 명기한 예비준공검사 신청서를 공사감독관을 경유하여 서면으로 제출하여야 한다.

1.3 검사원의 의무

1.3.1 검사원은 당해공사의 공사감독관 및 현장소장 또는 현장대리인 등을 입회하게 하여 계약문서, 설계서, 기타 관계서류에 따라 다음 각 사항을 검사해야 한다.

(1) 기성부분검사

가. 품질시험 및 검사성과의 총괄표

나. 공사설계도서와 시설물과의 일치

다. 지급자재의 사용

라. 확인이 불가한 부분의 시공기록(사진, 비디오, 기타 확인자료)

(가) 기성부분검사원 내역서

(나) 안전관리비 및 표준안전관리비 집행내역서

마. 기타 기성부분을 입증하는 사항

(2) 예비준공검사

가. 준공내역이 설계도서대로 시공되었는지의 여부

나. 부실제작어초 발생여부

다. 인공어초 투하일정 확인

라. 준공검사 검사사항중 준공검사자(발주청 소속직원)가 필요하다고 판단하는 사항.

마. 인공어초 투하지 및 수량 적정여부

(3) 준공검사

가. 준공검사원 적정 여부

나. 공사시공 당시 공사감독관의 제기록

다. 발생품의 유무 및 처리

라. 지급자재의 사용과 잔량 처리여부

마. 현장관리용 가시설물의 제거와 현장 정리상태

사. 기타 준공을 입증하는 사항

1.3.2 검사원은 시공된 부분이 시공 후 사후검사가 곤란한 부분과 재시공 행위를 요하는 경우의 검사는 공사감독관 조서와 검토, 확인서류 등을 근거로 검사를 행한다. 이 경우 검사원은 실제 검사한 사항에 대하여만 책임을 진다.

1.4 검사조서

검사원이 검사를 실시한 경우에는 검사부분 수량 확인 등을 검토한 후 다음 각호에서 정한 서류를 작성하여 발주처의 장에게 보고하여야 한다.

1.4.1 기성부분검사

(1) 기성부분검사조서

(2) 기성부분내역서

(3) 시험성과표

(4) 하도급 현황(필요시)

(5) 기타 참고자료

1.4.2 준공검사

(1) 준공검사조서

(2) 시험성과표

(3) 하도급현황(필요시)

(4) 사진첩

(5) 기타 참고자료

1.5 감독조서

공사감독관은 시공자로부터 기성부분검사원 또는 준공계를 접수했을 때에는 접수된 날로부터 소정기일 이내에 감독조서를 작성해 발주처의 장에게 다음 서류를 첨부하여 보고해야 한다.

1.5.1 공사감독조서 2부

1.5.2 시공자가 작성한 준공검사조서 2부

1.6 부실어초 판단기준

1.6.1 다음 각1호에 해당하는 어초에 대하여는 부실제작어초로 분류하여 폐기 등 조치를 취하고 재시공토록 하여야 한다.

가. 콘크리트표면에 철근이 노출된 어초

나. 콘크리트의 압축강도가 기준치(21Mpa) 미만인 어초

다. 모서리 등이 파손되거나 재료 분리 현상이 있는 어초

라. 균열이 되거나 철근피복 두께가 얇아 철근에 염해를 줄 우려가 있는 어초

마. 설계도서의 어초 규격과 다르게 시공된 어초

바. 표준설계기준 및 중요 설계지침에 적합하지 않은 원료로 제작된 어초

사. 기타 발주처의 장이 별도로 정하는 기준에 의하여 부실제작어초로 판단된 어초

1.7 검사불합격

1.7.1 검사원은 예비준공검사결과 불합격으로 인정될 때에는 그 지적사항을 상세히 조서로 작성하여 발주처의 장에게 보고하여야 한다.

1.7.2 발주처장은 검사결과 불합격내역을 시공자에게 통보하여 시공자로 하여금 재시공하도록 지시하여야 한다.

1.7.3 1.7.2항에 의하여 시공자는 재시공후 공사감독관의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 한다.

1-

1.7.4 재시공에 소요된 기간은 시공자의 귀책사유로 간주한다.

1.8 검사합격

1.8.1 시공자는 제작 완료된 어초 중 합격품에 한하여 상단 중앙 정면에 적색 페인트로 지구명, 제작년도,  및 일련번호를 기입 표시하여야 한다(○○○○지구 2021-○○○)

1-3 자재관리

1-3 자재관리

1. 일반사항

1.1 적용기준

1.1.1 사용자재

공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 본시방서에서 같다.)중에서 본시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가시설물용 자재를 제외한다.)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

1-

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제품 등”이라 한다.)를 우선 사용한다.

가. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 “KS 표시품”이라 한다.)

나. “건설기술진흥법 제61조”에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비)

다. “산업표준화법”에 의한 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 건설교통부령이 정하는 것.

(2) 가. 및 나.에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용한다.

1.1.2 사용제한

품질시험·검사시험 결과 불합격율이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주자는 사용제한을 지시할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

1.1.3 자재 선정

시공자는 공사에 사용하는 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여 “1.2.3 제출물 1.5 자재 제품자료” 및 “동 1.6 견본”에 따른 자재 제품자료 및 견본을 제출하여 공사감독관에게 품질, 색상, 무늬, 질감을 확인받은 것 중에서 임의대로 선정, 사용한다.

1.1.4 단일규격자재 사용

하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용한다.

1-3 자재관리

1.2 반  입

1-

1.2.1 반입시기

(1) 자재(지급자재를 제외한다)는 사용예정일 7일전까지 현장에 반입한다. 다만, 선정시험이 필요한 자재는 선정시험 소요기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

(2) 파동이 예상되는 자재는 공사에 지장이 없도록 사전에 구매하여 비축한다.

1.2.2 시험결과 등이 기재된 납품서

“건설기술진흥법”에 따라 아래 자재는 반입시 시험결과 등이 기재된 납품서를 납품자로부터 받아 공사감독관에게 확인할 수 있도록 비치하여야 한다.

(1) 레디믹스트 콘크리트

(2) 가공된 철근

(3) 기타 특허 및 사용실안으로 규정된 제품

1.3 지급자재관리

1.3.1 검사 및 확인

시공자는 반입된 지급자재(지급자재가 설치도인 경우에는 설치 완료된 상태)는 다음의 사항에 대하여 검사 및 확인을 시행하고, 그 결과 문제점이나 이의가 있을 경우에는 그 내용을 공사감독관에게 보고하여야 한다.

가. 납품서

나. 품질, 규격, 성능 및 수량 등

다. 설계도서와의 적격여부 및 제품자료․견본과의 일치여부

라. 납품기일

마. 시험성과표 또는 품질검사서(관리시험 또는 검사를 필하여 납품되는 품목)

1.3.2 지급자재의 품질 등

발주청이 공급하는 지급자재와 지급에서 사급으로 변경된 자재 및 사급에서 지급으로 변경된 자재의 품질, 규격 및 납품방법 등은 발주청이 별도로 정한 것 이외에는 해당 자재의 “자급자재 구입시방서”에 따른다.

1-

1.3.3 잔재 및 부족재

지급자재(설치도인 지급자재를 제외한다)중 공사에 사용하고 남은 자재는 발주청이 지정하는 장소에 시공자 부담으로 수송하여 전환하고, 부족재가 있을 경우에는 발주청에 설계변경을 요청한다. 다만, 부족자재는 파손 및 분실된 것을 제외한 절대 부족량에 한한다.

1.3.4 전환된 자재의 수령

시공자는 다른 곳에서 전환된 지급자재에 대하여 품질상태의 특별한 하자가 없는 한 이를 수령하여야 한다.

1.4 자재의 보관, 운반, 취급

1.4.1 품질변화방지

자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

1.4.2 화기위험자재의 분리보관

시공자는 자재중 화기위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방대책을 수립하고 시행하여야 한다.

1.4.3 지급자재의 관리 책임

시공자는 지급자재(설치도인 지급자재를 제외한다)의 인수, 출고 및 재고상태를 지급자재관리기록부에 정확히 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대한 보관 및 관리의 책임을 진다.

1-4 품질관리

1-4 품질관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

1-

시공자는 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다.)에 대한 품질관리는 관련법규의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다. 다만, 이 절에 명시되지 아니하는 사항은 해당 절(Section)의 시방에 따른다.

1.2 품질관리계획

1.2.1 계획수립 및 제출

(1) 시공자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질시험계획을 수립하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(2) 시공자는 품질시험계획을 발주청에 제출하여야 하며, 제출시기 및 부수 등은 “1-2-4 공무행정 1.8.1 품질시험계획”에 따른다.

(3) 공사감독관은 시공자가 제출한 “(2)”의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 시공자에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

(4) 품질시험계획의 내용은 “표 1-4-1”와 같다.

1.2.2 계획이행 확인

(1) 시공자가 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무를 적정하게 수행하고 있는지 여부를 공사감독관이 지정하는 사람들로 하여금 확인 점검하게 할 수 있으며, 이 때 시공자는 입회하여야 한다.

(2) 공사감독관은 확인결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있다.

1.2.3 품질관리비 사용

(1) 시공자는 품질관리비를 당해 목적에만 사용하여야 한다.

(2) 공사감독관은 시험성적 등의 품질관리활동 실적에 따라서 품질관리비를 정산할 수 있다.

1.3 품질시험․검사

1.3.1 품질시험기준

(1) 시공자는 건설공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(2) 설계변동에 따라 품질시험기준에 명시되지 않은 자재를 사용할 경우에는 시험을 추가로 시행하여 당해 공사 설계도서에 규정된 품질성능을 확인하여야 한다. 시공자 사유로 인하여 설계변경하는 경우, 이에 따른 품질시험·검사 비용은 시공자 부담으로 한다.

1.3.2 시험장소

(1) 품질시험 중 건설공사현장에서 실시함이 적절한 시험은 현장시험을 실시하여야 한다.

(2) 현장시험실에서 시행할 수 없는 자재 품질시험은 품질검사전문기관(전라남도도로안전관리사업소 등)에 의뢰하여 시행한다.

(3) 현장시험실 또는 품질검사전문기관에 의뢰하여 시험하는 것이 부적합한 자재는 제조공장에서 품질시험·검사를 시행할 수 있다. 이 때에는 공사감독관을 입회시켜 직접 확인케 하여야 한다.

1.3.3 결과기록

(1) 시공자는 품질시험·검사대장 및 품질시험·검사의 결과를 기재하여 관리하여야 한다.

(2) 시공자는 품질시험 또는 검사를 완료할 때에 품질시험·검사 성과총괄표를 작성하고, 당해 건설공사에 대한 기성 검사원, 준공검사원 제출시 또는 예비준공검사 신청시 발주청에 이를 제출하여야 한다.

(3) 품질시험·검사대장, 품목별 시험작업일지 및 품질시험·검사총괄표의 서식, 제출시기 및 부수 등은 “1-2-4 공무행정서류 1.7.2 사급자재 관련서류”에 따른다.

1.3.4 불합격 자재의 장외반출

(1) 시공자는 품질시험·검사결과가 설계도서의 기준에 부적합한 경우(이하 이 공사시방서에서 “불합격”이라 한다)에는 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후 즉시 공사감독관에게 보고하고, 불합격된 자재는 지체없이 장외로 반출하여야 한다.

(2) 시공자는 불합격되어 장외 반출된 자재에 대한 품질시험·검사 불합격자재조치표를 작성하여 보관하여야 한다. 품질시험·검사 불합격자재조치표의 서식은 “1-2-4 공무행정서류 1.8.2 사급자재 관련서류”에 따른다.

1.3.5 재시험

(1) 시공자는 사용할 자재가 품질시험·검사에 불합격된 경우 시험결과 확인 등을 이유로 동일자재에 대하여 반복하여 시험을 요구하거나 시행할 수 없다.

(2) 품질시험·검사에 불합격된 경우 시공자는 재시험을 시행하여야 하며, 이에 따른 추가비용은 시공자가 부담한다.

1-

1.4 현장시험실

1.4.1 인력·장비기준

시공자는 현장에서 품질시험 및 검사를 실시하여 필요한 시험실의 규모, 시험·검사장비의 설치와 시험 및 검사요원의 배치기준은 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 따른다.

1.4.2 비치서류

현장시험실에는 아래 서류를 비치하고 기록·유지하여야 한다. 각 서류의 양식 등은 “1-2-4 공무행정서류 1.8 품질시험·검사 및 자재관리서류”에 따른다.

(1) 품질시험계획

(2) 품질시험·검사대장

(3) 품질시험·검사성과 총괄표

1.5 품질시험·검사 의뢰

1.5.1 의뢰절차

(1) 품질검사전문기관에 시험·검사를 의뢰하는 시료는 공사감독관 입회하에 시공자가 채취하여 날인하여야 한다.

(2) 품질검사전문기관에 시험을 의뢰할 경우에는 공사감독관이 시공자와 동행하거나 공사감독관이 지정한 사람에 한한다.

표 1-4.1

1-4 품질관리

품 질 시 험 계 획

공 사 명 :	작 성 일 : 년 월 일
시 공 자 :	현장대리인 : (인 또는 서명)

1-

1. 시험계획회수

공 종	시험종목	사업계획물량	시험빈도	계획시험회수	비 고

2. 시험시설 및 인력배치계획

가. 시험시설 (※ 첨부 : 시험실 배치평면도)
장 비 명		규 격	단 위		수 량		비 고
나. 시험인력
등 급	품질관리업무 수행기간			성 명		비 고
						※ 기술자격 또는 학․경력사항 기재

1-5 안전․보건 및 환경 관리

1-5-1 안전관리

1-5-1 안전관리

1-

1. 일반사항

1.1 안전관리 계획

1.1 안전관리조직

시공자는 공사착수 전 건설기술관리법, 산업안전보건법, 총포·도검·화약류단속법 및 공해대책관련법 등 관련법규를 철저히 준수하고 안전관리조직을 구성, 운영해야 한다.

1.2 안전점검 등의 확인

1.2.1 표준 안전관리비의 사용

(1) 시공자는 하도급자와 공사계약을 체결할 때 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상해야 한다.

(2) 발주청은 시공사와 하도급자가 안전관리비를 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 아니한 금액에 대하여 계약금액에서 감액 조정하는 등의 방법으로 안전관리비의 목적외 사용을 방지할 수 있다.

(3) 시공자는 공사계약을 체결할 때 계상된 금액이상을 안전관리비로 사용해야 한다.

(4) 시공자는 공사의 일부를 도급 시행할 때에는 계상된 안전관리비의 범위안에서 하도급자에게 위험도 등을 고려하여 적정하게 안전관리비를 지급하여 사용하게 할 수 있다.

(5) 공사감독관은 시공자와 하도급자의 안전관리비의 사용관리에 대하여 공사도중 또는 종료 후 안전관리비 사용내역서(“양식 27 참조”)의 제출을 요구할 수 있으며 시공자와 하도급자는 이에 응하여야 한다.

(6) 표준안전관리비의 항목별 사용기준은 표1-5.2와 같다.

표 1-5.2 표준안전관리비 사용기준

항 목	사 용 기 준	비 고
안전보건관계자의 인건비 및 각종 업무수당 등	안전관리비 총액의 40% 이하
안전시설비등(공사설계 내역서 및 건설공사 표준품셈에 명기되어 있는 사항 제외)	안전관리비 총액의 50% 이하
개인보호구 및 안전장구 구입비 등	안전관리비 총액의 30% 이하
사업장의 안전진단 등	안전관리비 총액의 30% 이하
안전보건교육비 및 행사비 등	안전관리비 총액의 30% 이하
근로자의 건강관리비 등	안전관리비 총액의 10% 이하
건설재해예방 기술지도비	안전관리비 총액의 20% 이하

(7) 기술지도

가. 공사금액 150억미만(토목공사) 건설공사를 시행하는 시공사가 표준안전관리비를 사용하고자 하는 경우에는 “산업안전보건법 제30조 4항”의 규정에 의한 건설재해예방 전문기관의 지도를 받아야 한다.

나. 건설재해예방 지도기관의 기술지도를 받아야 하는 시공자는 공사착공 후 14일 이내에 건설재해예방 지도기관과 기술지도에 관한계약을 체결하고 기술지도 계약서를 발주자 대리인에게 확인하여야 하며, 공사 종료시에는 건설재해예방 지도기관의 기술지도를 받았음을 증빙할 수 있는 기술지도 완료 증명서를 발주자 대리인에게 제출해야 한다.

다. 발주청은 기술지도 계약을 체결하지 아니한 시공자에 대하여 계상된 안전관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수 할 수 있다.

1-

1.4.3 안전교육

(1) 시공자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 노동부령이 정하는 바에 따라 교육을 실시하여야 한다.

1.4.4 해상안전

(1) 작업중 해상장비의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의 하여야 하며 적절한 안전대책을 강구하여야 한다.

(2) 발주자 대리인은 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 시공회사의 안전에 대한 제반의 관리상태를 점검하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대하여 시정 또는 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때 시공자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정 조치해야 한다.

(3) 발파작업, 중장비 사용등 공사로 인한 인명․재산의 피해는 도급자 책임하에 적절한 조치를 취하여야 한다.

1-5-2 환경관리

1. 일반사항

1.1 생활환경 보전

시공자는 국민의 건강을 보호하고 공사장주변의 쾌적한 환경을 조성하기 위해 정부가 제시하는 환경기준이 유지되도록 해야 하며 이 기준을 초과할 시는 주민과의 협의를 위한 대화의 장을 마련하고 공사전 사전양해를 요청해야 한다.

1.2.1 대기질

(1) 인공어초제작에 따라 비산먼지가 발생할 우려가 있을 경우 대기환경보전법에 의한 신고 또는 인·허가를 득한 후 설치·운영하여야 하며 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

1-5-2 환경관리

1-

1.2.2 수  질

(1) 공사현장에서 폐수배출이 발생할 경우 수질환경보전법에 의한 신고 또는 인·허가를 득한 후 설치·운영하여야 한다.

1.2.3 토  양

(1) 각종 사용장비에 의하여 발생하는 폐유 등의 무단투기를 방지하기 위하여 환경부 고시 제94-95호(폐기물 회수 및 처리방법에 관한규정)에 따라 작업장내에 폐유 회수통을 비치, 발생폐유를 회수하여 처분토록 한다.

1.2.4 소음·진동

(1) 시공자는 소음·진동배출 시설을 설치하고자 할 때에는 소음·진동규제법에 의한 신고 또는 인·허가를 득한 후 설치·운영하여야 한다.

(2) 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며 작업장에서는 사용장비의 작업시간 조사 등 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

1-

1.2.5 폐 기 물

시공자는 공사현장에서 배출되는 폐기물에 대하여는 폐기물관리법 및 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법에 의하여 처리되도록 하여야 하며 해당 행정기관의 최종 처리사항에 대하여도 이를 확인하여야 한다.

1.3 환경분쟁의 조정

시공자는 공사현장에서 배출되는 환경오염피해의 발생원에 대한 책임이 있으며, 시공자와 민원인의 사이에서 조정되지 않는 사항에 대하여는 환경분쟁조정위원회의 조치에 따라 조정될 수 있도록 노력하여야 한다.

1-6 임시가설시설물

1-6 임시가설시설물

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 공사중 사용될 임시가설시설물의 설치와 이후의 제거

1.1.2 현장임시시설물로서 진입도로 및 주차장, 청소, 표시판 등

1.1.3 현장 사무실, 현장 시험실, 창고 등의 가설건물 설치 등

1.2 관련시방서

1.2.1 1-8 준공 : 최종현장청소

1.3 임시방호벽

1.3.1 시공구역에 무단출입을 방지하고, 기존시설물과 인접한 재산이 시공작업으로 손상을 입을 우려가 있을 경우 방호책을 설치하여 제삼자의 차량통행, 공급된 재료, 현장 및 구조물 등이 손상되지 않게 보호해야 한다.

1.4 현장보안

1.4.1 공사착수 후 조속한 시일 내에 현장인원이 아닌 자가 공사장에 배회하지 못하게 하고, 도난에 대비할 수 있도록 보안시설을 한다.

1.5 공사표지판

1.5.1 공사표지판은 공사감독관이 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작해야 한다.

1.5.2 표지판에는 공사명, 발주청, 발주자 대리인 및 시공자와 주요 하도급 건설사업자의 명칭, 공사기간 등을 명시해야 한다.

1.5.3 표지판은 현장에서 발주자 대리인이 지정한 위치에 설치해야 한다.

1.5.4 현장에는 법규로 요구된 경우를 제외하고,  공사감독관의 허가 없이 다른 표지판을 설치해서는 아니 된다.

1.6 공사중 현장청소 및 폐기물 제거

1.6.1 공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지해야 한다.

1.7 시공자의 현장사무소

1.7.1 실내마감, 가구 및 냉․난방 시설을 갖추고 현장관리직원 및 하도급 직원용 사무실을 세워야 한다.

1.7.2 근무인원수를 감안한 책상 및 의자와 공정관리 등에 소요되는 비품을 갖추어야 한다.

1.7.3 공정표 및 기타 자료를 부착할 수 있는 상황판과 승인받은 견본을 보관할 수 있는 선반을 마련해야 한다.

1.7.4 전기공급시설, 통신시설, 화재예방시설, 기타보안 및 안전방재시설을 설치하여야 한다.

1.7.5 한쪽벽면에서 상황판을 설치 관리하여야 하며 응접시설을 갖추어야 한다.

1.10 현장 시험실

1.10.1 시공자는 공사의 품질관리에 필요한 각종 시험을 할 수 있는 현장시험실을 설치하여야 한다.

1.10.2 시험실의 면적은 현장시험 실시에 충분한 면적이어야 한다.

1.10.3 시공자는 현장시험에 필요한 시험 사무실, 공시체 양생수조, 시험작업대 및 시험기기등을 준비하여야 한다.

1.11 가설 사무실 규격

가설건물 규격은 설계도서에 명시된 규격이상의 면적을 확보하여야 하며 공사감독관이 필요하다고 인정할 때는 공사감독관의 지시에 따라 시행하여야 하며 시공자는 가설 사무실 유지관리를 공사가 완료될 때까지 하여야 하며, 공사가 완료되면 원상복구를 하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다.

1-7 준  공

1-8 준 공

1. 일반사항

1.1 준공 예비점검

1-

1.1.1 공사감독관은 시공자의 예비준공검사 요청서에 의하여 인공어초 투하예정일 20일전까지 발주청에 준공 예비점검을 의뢰하여야 하며 발주청 소속공무원으로 하여금 준공 예비점검에 임하도록 하여야 한다.

1.1.2 발주청 소속 공무원은 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 시공자에게 요구 할 수 있으며, 시공자는 이의 시정조치를 완료한 후 발주자 대리인을 경유하여 재점검의뢰를 하여야 한다, 이 경우 재점검에 따라 소요되는 제반 사항은 시공자의 책임으로 한다.

1.1.3 준공 예비점검을 받은 인공어초에 대하여는 제작중인 인공어초와 분리하여 보관하여야 하며, 준공검사관의 검사를 받았다고 하여 시공자의 유지관리 책임이 면책되는 것이 아니므로 시공자는 투하완료까지 인공어초를 유지·관리할 책임을 진다.

1.2.3 시공자는 검사 및 입회에 필요한 모든 경비는 시공자 부담으로 한다.

1.2 투하입회

1-

1.2.1 시공자는 준공 예비검사를 받은 인공어초 대하여 운반조건·해상기후·투하지 상태를 고려 빠른 시일 내에 공사감독관과 투하일정을 확정하여야 한다. 투하예정일이 변경된 경우 공사감독관은 변경된 투하예정일 14일전까지 발주청에 통보하여야 한다.

1.2.2 발주청은 인공어초 설치사업집행 및 관리규정 제21조의 규정에 의한 투하 입회자가 입회할 수 있도록(투하일이 변경된 경우도 동일함) 해당기관에 투하 입회를 요청하여야 한다. 단 해상여건을 고려 투하 입회자가 동의시 투하예정일을 변경할 수 있다. 이 경우 시공자는 이에 따라야 한다.

1.2.3 어초투하 및 시설

(가) 어초 투하시는 중앙에 부표를 설치하여야 하며, 부표에는 90㎝×50㎝ 규격으로 2016년 인공어초 시설지라는 표기를 하여야 한다.

(나) 어초의 시설은 어초를 실은 선박을 고정시켜 바람이나 파도, 조류 등으로 선박이 움직이지 않은 상태에서 단지의 중앙에 정확히 시설하여야 한다.

(다) 완성된 어초의 단지별 시설방법은 적지 2ha당 1개 단지를 조성하여 시설하여야 하며 단위어초당 시설량은 총면적 500㎥이상으로 한다.

(라) 어초를 현수 투하할 때에는 기중기에 매달아 해저 지반까지 내린 다음 거치하여야 한다.

(마) 도급자는 어초를 수중에 투하하는 경우 반드시 감독관을 비롯한 입회공무원의 확인 및 지시에 따라야 한다.

1.2 준공검사

1.2.1 준공검사원

준공검사원의 제출은 “1-2-4 공무행정서류 1.5.2 준공 검사원”에 따른다.

1.2.2 준공검사 내용

발주청이 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

(1) 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

(2) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

(3) 제출물 및 공무행정서류 처리상태

(4) 인·허가 완료상태

(5) 준공전 청소 이행상태

(6) 기타 계약문서에 명시된 사항

1.4 준공서류

1.4.1 종류 및 내용

(1) “1-2-3 제출물 1.7 공사사진”의 공사사진첩

(2) “1-2-3 제출물 1.9 신고 및 인·허가 신청서류”에 의하여 발급받은 신고 및 인·허가 필증 원본

(3) 시험 및 검사보고서

이 공사시방서 각 절에 명시된 사항에 한한다.

1.4.2 제출시기 및 부수

“1-2-4 공무행정서류 1.5.2 준공검사원”에 따른다.

1-

양식 1

착 공 신 고 서

	공사감독관
	경유일자	날 인

공 사 명	:
계 약 금 액	:	일금 원
계 약 년 월 일	:	20 년 월 일
계 약 상 착 공 일	:	20 년 월 일
계 약 상 준 공 일	:	20 년 월 일
실 착 공 (예정) 일	:	20 년 월 일
착 공 지 연 사 유	:
첨 부	:	1. 현장기술자 지정신고서 3. 경력증명서 및 자격증 사본 3. 내역서 4. 착공전 사진

20    년       월       일

시 공 자	주 소	:
	상 호	:
	대 표 자	:	□

전라남도지사 귀하

양식 2

현장기술자 지정신고서

1. 공  사  명 :

2. 기술자현황

구 분	현장대리인	현 장 요 원	안전관리자	시 험 사	품질관리자
성 명
생 년 월 일
주 소
자격종목 및 등급
자 격 번 호
자격등록 년월일

첨부 : 1. 현장기술자 경력사항 확인서(건설기술관리법 시행규칙 별지 제2호 서식참조)

2. 자격증 사본

양식 3

가공철근 수급계획(변경요청)서

공사명 :

품 명	규 격	단 위	수급계획		변 경		변 경 사 유
			수량	납기	수량	납기
가공철근

20    년       월       일

시 공 자	업 체 명	:
자재공급자		:	□

양식 4

하도급 시행계획서

1.	공 사 명		:
2.	계 약 금 액		:		일금 원
3.	계 약 일		:		20 년 월 일
4.	착 공 일		:		20 년 월 일
5.	준 공 예 정 일		:		20 년 월 일
6.	하도급공종 및 계약일정
									(단위 : 천원)
	전문건설업종	해당공종		도 급 액		예 상 하도급액	하도급계약 예 정 일		하 도 급 공사기간	비 고
	계									비율 %

상기와 같이 하도급 시행계획서를 제출합니다.

200 년       월       일

시 공 자	주 소	:
	상 호	:
	성 명	:	□

(발주청의 장) 귀하

양식 7

공사 기성부분 검사원 (제   회)

공사감독관 :              (인)

1.	공 사 명	:
2.	위 치	:
3.	계 약 금 액	:	일금 원
4.	착 공 년 월 일	:	20 년 월 일
5.	착 공 년 월 일	:	20 년 월 일
6.	준 공 기 한	:	20 년 월 일
7.	현 재 공 정	:	20 년 월 일	현재 %
8.	첨 부 서 류	:	기성공정내역서, 기성부분사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20    년       월       일

주 소	:
상 호	:
성 명	:	□

귀하

양식 8

공사 기성부분 내역서 (제   회)

1.	도 급 액				:		일금 원
2.	공 사 명				:
3.	기 성 부 분 금 액				:							20 년 월 일 현재
4.	내 역				:
	공사 내역	규격	도 급 액					금 회 기 성 액			전회까지의 기성액				적용
			수량	단가		금액		수량	금액	비율(%)	수량		금액	비율(%)

양식 10

시 험 성 과 표

공사명 :                                         (공사기간   .   . ～    .   . 공정   %)

공 종	시 험 종 류	시 험 횟 수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

작성일자	:	20 년 월 일
작 성 자	:	현 장 대리인 □

양식 11

준     공     계

	경유	일 자
		공사감독관

1.	공 사 명	:
2.	도 급 액	:	일금 원
3.	계 약 년 월 일	:	20 년 월 일
4.	착 공 년 월 일	:	20 년 월 일
5.	예 정 준 공 년 월 일	:	20 년 월 일
6.	실 준 공 년 월 일	:	20 년 월 일

위와 같이 준공되었기에 준공계를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20    년       월       일

	첨 부	:	내 역 서 시험성과표 사 진 첩

시공자	□

(발주청의 장) 귀하

Ⅲ. 자재 품질관리

1. 사급자재 사용현황

공종	품명	규격	단위	생산업체	설계량	반입량	불합격	불합격자재 처리내용	비 고
									K.S 여부

2. 지급자재 사용현황

공종	품명	규격	단위	생산업체	설계량	반입량	불합격	불합격자재 처리내용	비 고
									생산업체 연 락 처 기 재

Ⅳ. 품질시험 성과표

(양식생략)

Ⅴ. 안전관리

1. 안전관리비 사용내용(총괄)

사 용 항 목	사용금액 비율(%)	월 별 사 용 실 적
		1	2	3	4	․	계
1. 법령에 의거 선임하는 안전관계자의 인건비 및 각종수당에 집급하는 비용	40% 이하
2. 안전시설비 등(공사설계 내역서 및 건설공사 표준품셈에 명기되어 있는 사항 제외)	50% 이하
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	30% 이하
4. 사업장의 안전진단비 등	30% 이하
5. 안전보건 교육비 및 행사비용	30% 이하
6. 근로자의 건강관리비 등	10% 이하
7. 건설재해예방 기술지도비	20% 이하
합 계

※ “건설공사 안전관리 지침서” (5. 안전관리비 사용기준)를 참조하여 작성.

Ⅵ. 건설공사 특기사항

양식 13

준공기한 연기원

	공사감독관
	경유일자	날 인

공 사 명	:
계 약 금 액	:	일금 원
계 약 년 월 일	:	20 년 월 일
계 약 상 착 공 일	:	20 년 월 일
준 공 예 정 일	:	20 년 월 일
연 기 요 청 일	:	20 년 월 일
첨 부	:	공사기간 조정 산출내역

20    년       월       일

시 공 자	주 소	:
	상 호	:
	대 표 자	:	□

(발주청의 장) 귀하

양식 14

현 장 지 도 점 검 대 장

공사명 :                                시공자 :

지적부위
시 정 전	지적사항
시 정 후	조치내용

20    년       월       일

현장대리인	□

(발주청의 장) 귀하

양식 16

공 급 원 승 인 요 청 서

문서번호 :           호

품 명	규 격	설 계 수 량	제조회사명	K.S 여부	비 고

첨    부 : 제품자료 및 견본

위 자재에 대하여 공급원 승인을 요청합니다.

20    년       월       일

공 사 명	:
현장대리인	:	□

양식 17

품질시험․검사대장

일련 번호	년월일	시험·검사 구 분	자 재	시험·검사 항 목	시험성과	시험․ 검사자	현 장 대리인	비 고

양식 21

품질시험·검사 불합격자재 조치표

반 출 현 황
∙	품 명		:
∙	규 격		:
∙	수 량		:
∙	불 합 계 내 용		:
∙	반 출 입 자
	장외반출전경사진

주) 사진 촬영시는 차량번호를 포함하여 촬영.

확 인 자	:	현장대리인 □

양식 23

자 재 검 수 부

년월일	품명	규격	단위	생산업체	설계량	반입량	불합격량	품질기준	품질확인 내 용	검수자	비고

양식 24

하 도 급 관 리 대 장

∙	공 사 명(공구)	:
∙	수급업체(대표)	:
∙	계 약 일 자	:		계약금액(낙찰률) :		공사기간 :

(단위 : 천원)

공종	하수도급 공 사 명	전문건설 업 종	하수급 업 체 (대표)	전화번호	원도급액	하도급액	비율	하 도 급 계 약		계약시행 촉 구 일	통지일	도 급 한도액	비고
								예정일	시행일

양식 25

안전교육실시 증명보고서

교육구분	1. 신규 채용자 교육 ( )								2. 작업내용 변경시 교육 ( )
	2. 안전보건특별교육 ( )								4. 일 반 교 육 ( )
	3. 발주자대리인 교육 ( )								6. 기 타 ( )
교육인원	구 분			계		남		여		교육대상 공종 (협력업체)
	교육대상 근로자수
	교육실시 근로자수
	교육미실시 근로자수
교육내용	과목 또는 사항		교육방법				교육내용의 개요				교육시간	사용교재 등
교육강사 및 장소	직위(직책)	성 명			교육장소				비 고

양식 27

[노동부고시 제96-36호 별지 제1호 서식]                                           (앞면)

표준안전관리비 사용내역서
건설업체명		공 사 명
소 재 지		대 표 자
공 사 금 액	원	공 사 기 간
발 주 자		누계공정율	%
계 상 된 안전관리비	원	공사진척도에 따른 사용 기준금액	원 (안전관리비/공정율)
사 용 금 액
항 목			금 액
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당
2. 안전시설비 등
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
4. 안전진단비 등
5. 안전보건교육비 및 행사비 등
6. 근로자 건강진단비 등
7. 건설재해예방 기술지도비
건설공사표준안전관리비 계상 및 사용기준 제10조에 의거 위와 같이 사용내역을 제출합니다. 20 년 월 일 제출자 직책 성명 □

양식 28

항 목 별 사 용 내 역

항 목	사용일자	사 용 내 역	금 액
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당
2. 안전시설비 등
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
4. 안전진단비 등
5. 안전보건교육비 및 행사비
6. 근로자 건강진단비 등
7. 건설재해예방기술 지도비

주) 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서로 작성

제2장  콘크리트

2-1	콘 크 리 트 생 산 및 타 설
2-2	거 푸 집
2-3	철 근 및 보 강 재
2-4	기 계 가 공

제 2 장   콘크리트 공사

6-1 콘크리트 생산 및 타설

6 -

2-1 콘크리트

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 인공어초 구조물의 콘크리트 공사에 적용한다.

1.2 참조규격

KS F 2401 (굳지않은 콘크리트의 시료채취방법)

KS F 2402 (포틀랜드시멘트 콘크리트 슬럼프 시험방법)

KS F 2405 (콘크리트의 압축강도 시험방법)

KS F 2421 (공기 함유량 시험방법(공기실 압력방법))

2. 재 료

2.1 콘크리트

콘크리트는 레디믹스콘크리트 사용이 가능한 지역은 레디믹스콘크리트를 사용하여야 하며 그 규정은 한국산업규격(KSF) 4009에 따른다.

3. 시 공

6-1 콘크리트 생산 및 타설

3.1 시공일반

3.1.1 콘크리트 타설전에 타설위치, 소요인원, 타설장비, 타설순서 및 다짐방법 등을 포함한 콘크리트 타설계획에 대하여 발주자대리인과 협의하여야 한다.

3.1.2 거푸집 제거와 동시에 구조물 부위별 균열조사 및 면조사를 하여 그 기록을 공사감독관에게 보고하여야 한다. 또한 균열이 발생되었을 경우에는 다른 인공어초와 분리하여 공사감독관 입회하에 폐기처분하여야 한다.

3.2 운 반

3.2.1 콘크리트 비비기로부터 치기가 끝날때까지의 시간은 외기온도 25℃이상일때 1.5시간, 25℃ 이하일 때 2시간을 넘어서는 안 된다.

3.3 콘크리트 치기

3.3.1 콘크리트를 치기전 철근 및 거푸집 등에 대한 공사감독관의 검측결과 확인을 받은 후 치기작업을 하여야 한다.

3.3.2 콘크리트를 치기전에 물청소를 하여 이물질을 제거하여야 한다.

3.3.3 콘크리트 배출구로 부터 치기면까지의 높이는 1.5m이하를 원칙으로 한다.

3.3.4 치기도중 콘크리트 운반차량 또는 생산장비의 고장 등으로 타설이 중단된 경우에는 시공이  음(Cold Joint)이 생기지 않도록 하여야 한다. 부득이 시공이음(Cold Joint)를 두어야 하는   경우에는 타설된 콘크리트면이 수평이 되도록 면을 정리하고 표면의 레이탄스나 뜬돌 등을  제거하고 발주자대리인의 확인을 받은 후 치기를 시작하여야 한다.

3.3.5 콘크리트 치기의 속도는 30분에 1～1.5m를 원칙으로 한다.

3.3.6 타설되는 부재의 두께가 50cm이상일 때는 특히 침하균열이 발생되지 않도록 타설속도를 저감시켜야 하며, 치기종료 후 표면 조사를 하여 균열이 발생할 경우 공사감독관의 확인을 받아 조치하여야 한다.

3.3.7 거푸집 제거 후 바로 콘크리트면을 조사하며, 골재분리 등을 발생한 어초에 대하여는 즉시 별도의 장소에 이동시킨 후 공사감독관의 검사를 받아 조치하여야 한다.

3.3.8 콘크리트 진동기는 소형구조물용과 대형구조물용을 구분하여 장비를 사용하여야 한다.

3.4 시공이음

3.4.1 시공이음은 설계도서에 표시된 지점에 위치하여야 하며 시공이음이 추가될 때는 반드시 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

3.4.2 시공이음은 주응력선에 직각으로 설치하여야 하며 전단력이 최소가 되는 지점에 설치하여  야 한다.

3.4.3 시공이음은 이음선이 직선이 되도록 하여야 한다.

3.4.4 콘크리트 타설시 시공이음면은 모래뿜기나 쇠솔로 레이탄스나 느슨한 골재를 제거하고 깨  끗한 물을 고압 살수한 다음 모르터에 의한 콘크리트의 결합이 보장되도록 하여야 한다.

3.4.5 구조적으로 일체가 되도록 하기 위해서는 이음면에 하중을 전달하고 이음을 튼튼하게 할   수 있는 적절한 조치를 하여야 한다.

3.5 표면의 끝마무리

3.5.1 굳지 않은 콘크리트 표면의 마무리

(1) 상단 표면은 나무 흙손으로 두드려 모르터가 표면에 떠오르게 한 다음 요철이 없도록 고르기를 하여야 하며, 그 표면을 젖은 솔로 약하게 문질러야 한다.

(2) 표면이 굳어지기 전에 직선자를 사용해서 요철검사를 하여야 하며 이 결과 4㎜이상의 변형은 즉시 고쳐야 한다.

3.5.2 경화된 콘크리트 표면의 마무리

(1) 콘크리트의 표면은 거푸집을 제거한 즉시 마무리하여야 한다.

(2) 거푸집의 이음 때문에 생긴 불규칙한 면은 갈아 내어야 한다.

(3) 구조물의 강도에 현저한 영향을 미칠 수 있는 부분은 시공자 부담으로 일부나 전부를 제거하여 재시공하여야 한다.

3.6 양 생

3.6.1 양생방법과 순서 및 이에 소요되는 자재와 장비는 사전에 공사감독관의 승인을 얻어야 한다.

3.6.2 양생기간동안 하중을 싣거나, 충격을 가하거나 기타 압력이 발생되는 일이 없도록 충분히 보호하여야 한다.

3.6.3 노출면은 양생용 가마니, 마포, 비닐 등을 덮고 살수하여 습윤 상태로 한다.

3.6.4 콘크리트 내부와 외부, 박스거더 내부와 외부의 온도차가 생기지 않도록 살수시 온도를 조절하여야 한다.

3.6.5 습윤양생이 곤란할 경우에는 공사감독관이 확인을 득한 후 피막양생재를 사용할 수 있다.

3.7 레디믹스트 콘크리트

3.7.1 일반사항

(1) 본 시방서는 레디믹스트 콘크리트에 대해 적용한다.

(2) 참조규격

KS F 4009 (레디믹스트 콘크리트)

3.7.2 재 료

(1) 콘크리트의 품질에 관한 지정 및 지시

가. 콘크리트의 설계기준 강도, 슬럼프 및 굵은 골재의 최대치수는 설계도서에 따르며, 기타 필요한 사항에 대하여는 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

(가) 콘크리트 강도는 1회의 시험결과는 설계도서에 명시된 호칭강도 값의 85% 이상되어야 한다.

(나) 콘크리트 강도는 3회의 시험결과 평균치가 설계도서에 명시된 호칭강도 이상되어야 한다.

(다) 강도 시험에서 공시체의 재령은 28일로 한다.

(라) 슬럼프 및 공기량은 설계도서에 명시한 것에 대하여 표 6-1.2, 표 6-1.3의 허용차 범위 이내이어야 한다.

표 6-1.2 슬럼프의 허용오차

항 목		허 용 오 차
슬 럼 프 (㎝)	12	±2.5

표 6-1.3  공기량의 허용차

항 목		허 용 차	허 용 오 차
공 기 량 (%)	보통 콘크리트	4..5	±1.5

3.16 품질관리

(1) 품질관리시험

가. 일반사항

시공자는 콘크리트 구성재료 및 콘크리트의 품질관리를 확실히 하기위하여 필요한 모든 시료채취, 시험 및 검사를 수행하여야 한다. 품질관리시험은 한국산업규격(KSF) 규정에 따라야 한다.

나. 시료채취 및 시험

콘크리트의 시료채취 및 시험은 공사감독관의 지시에 따라 시공자가 시행하며  공사감독관은 검사시험방법으로는 시공자에게 1회 또는 그 이상의 품질관리 시험을 지시할 수 있다.  아래와 같은 콘크리트 공기량, 슬럼프 및 압축강도에 기준을 두어 허용여부를 결정한다.

(가) 콘크리트의 공기량 및 슬럼프

콘크리트 치기를 시작하기 전 공기량 및 슬럼프 시험을 실시해야 한다.

(다) 콘크리트 압축강도

콘크리트의 압축강도의 시험은 한국산업규격 KSF 4009에 의거 콘크리트 1일 타설량이 100㎥미만인 경우 1일 타설량 마다 또는 1일 타설량이 100㎥이상인 경우 100㎥ 마다 1회 실시하며, 1회 공시체 3개를 제작하여 그 산술평균치를 그 로트(Lot)의 대표치로 하여 그 대표치가 설계기준강도의 85%이상, 3회 연속 시험결과의 평균치가 설계기준강도 이상이 되어야 한다.

3.16.2 규격의 품질관리

(1) 철근의 가공 및 배근

가. 설계도서에 철근의 구부리는 반지름이 명시되어 있지 않을 경우 철근의 가공기준은 「콘크리트 표준시방서 시공편 10.2」에 따라 철근을 구부려야 한다.

나. 철근배근시 유효높이의 시공정밀도는 설계치수의 ±3% 또는 ±30㎜중에서 작은 값 (단, 최소덮개는 확보하는 것으로 함)

3.16.3 콘크리트 균열관리

(1) 균열발생의 조사

구조물의 부재에 균열이 발생할 경우 시공자는 이를 콘크리트 생산조건, 치기 및 다짐, 양생, 균열현황도 및 기타 필요사항을 세밀하게 조사하여 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 균열의 대책

구조물에 균열이 발생할 경우 허용 균열폭 이내이더라도 전문기술자의 자문을 받아 원인규명 조사를 실시하고 전문기술자의 의견서를 첨부하여 공사감독관의 승인을 받은 후 조치하여야 한다.

2-2 거푸집

1. 일반사항

1.1 적용범위

6-2 거푸집

본 시방서는 거푸집 시공에 따른 작업에 적용한다.

2. 재  료

(해당 사항 없음)

3. 시  공

3.1. 거푸집

3.1.1 거푸집은 철재거푸집을 사용하는 것을 원칙으로 하되 제작현장 여건상 부득이한 경우에는 목재 거푸집을 사용할 수 있으며, 콘크리트 바닥면에 대한 요철부분 발생을 방지하기 위하여 최소한의 바닥거푸집을 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 하며, 설계에 반영된 수량의 철재거푸집을 착공과 동시에 제작 후 공사감독관의 확인을 받아 사업을 시행하여야 한다.

3.1.2 거푸집은 모르터가 새어나오지 않아야 하며, 콘크리트의 중량과 작업에 수반되는 하중으로  인한 변형이 생기지 않도록 튼튼하고 강재의 수축으로 인한 틈이 생기지 않도록 조립하고 유지하여야 하며, 콘크리트의  손상 없이 쉽게 제거할 수 있도록 설치하여야 한다.

3.1.3 거푸집은 조립 후에도 비틀림이나 수축을 막기 위해 잘 유지하여야 한다.

3.1.4 콘크리트 치기 직전에 거푸집의 치수와 상태에 관해 공사감독관의 확인을 받아야 하며, 수정이나 재시공의 지시가 있을 때에는 시정 후에 재검사를 받아야 한다.

3.1.5 콘크리트의 작업중이나 작업완료 후에 거푸집이 처지거나 불룩한 곳이 발견되면 콘크리트를 제거하여 거푸집을 수정한 후 다시 콘크리트를 쳐야 한다. 이때에 추가 작업은 시공자 부담으로 한다.

3.1.6 표면이 매끄럽지 못하거나 직선을 유지하지 못하는 낡은 거푸집은 사용할 수 없다.

3.1.7 모든 거푸집의 안쪽은 콘크리트의 표면을 변색시키거나 기타 손상을 끼치지 않는 확인된 박리제로 도포하여야 한다. 박리제 도포는 철근조립 후, 거푸집 설치 전에 시행하여야 한다.

3.1.8 재사용할 거푸집은 깨끗이 청소한 후 박리제를 다시 발라야 하며 필요한 경우에는 수정을 하던지 다시 제작하여야 한다. 재사용이 불가능하다고 결정한 거푸집은 현장으로부터 즉시 반출하여야 한다.

3.1.9 설계도서에 따로 표시하였거나 별도의 지시가 없는 경우 노출 모서리는 직각변의 길이가   20㎜되는 삼각형의 쫄대 등을 사용하여 모따기를 하여야 하며, 곡면은 확인된 철판으로 거푸집 안쪽을 대어야 한다.

3.2. 거푸집의 제거

3.2.1 거푸집은 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중에 충분히 견딜만한 강도를 가질 때까지 제거하여서는 안 되며, 특수양생공법(증기양생 등)을 이용하는 경우 발주자 대리인과 사전 협의하여 시간을 조정할 수 있다.

6-2 거푸집

3.2.2 거푸집의 제거시기와 순서는 시멘트의 성질, 콘크리트의 배합, 구조물의 종류와 중요도, 부재의 종류와 크기, 부재가 받는 하중, 기온, 기후, 통풍 등을 고려하며 공사감독관의 확인을 받아야 한다.

3.2.3 거푸집은 조심스럽게 해체하여 모서리 파손이나 실금 발생 등 흠결이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.3. 마무리 작업

3.3.1 거푸집을 제거한 즉시 거푸집 이음매에 생긴 돌출부는 제거하여야 한다.

2-3 철근 및 보강재

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 철근의 가공 및 조립설치와 보강재를 시공하는 작업에 적용한다.

2. 재 료

2.1 철근의 저장

2.1.1 철근은 적절한 창고 내에 저장하거나 고임대 위에 두고 적절한 덮개를 씌워 저장하여야 한다.

2.1.2 철근은 또한 그 품질 및 규격별로 분리하여 저장하여야 한다.

2.1.3 모든 철근은 항상 손상을 입지 않도록 조치를 강구해야 하며 사용시에는 먼지, 도료, 유류, 기타 이물질이 붙어 있어서는 안 된다.

3. 시 공

3.1 철근의 가공

3.1.1 철근은 설계도서에 표시된 형상과 치수에 반드시 일치하도록 하여 재질을 해치지 않는 방법으로 가공해야 하며, 불명확한 부분은 철근 시공 상세도를 작성하여 공사감독관의 서면승인을 받아야 한다.

3.1.2 설계도서에 철근의 곡률반경이 표시되어 있지 않은 경우에는 본시방서 기준에 따라 철근을 구부려야 한다.

6-3 철근 및 보강재

3.1.3 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 가열가공이 피할 수 없을 때는 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

3.2 철근의 조립

3.2.1 철근은 조립하기 전에 잘 닦고, 들뜬 녹이나 그밖에 철근과 콘크리트와의 부착을 해칠 위험이 있는 것은 완전히 제거해야 한다.

3.2.2 철근의 간격은 설계도서에 표시된 바와 같이 소정의 위치에 정확하게 배치하고 콘크리트를 칠 때에 움직이지 않도록 견고하게 조립하여야 한다.

3.2.3 철근과 거푸집판과의 간격은 반드시 간격재를 사용하여 설계도서에 적합하도록 정확하게 유지하도록 하고, 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 설치해야 한다.

3.2.4 철근조립이 끝난 후 공사감독관으로부터 검사를 받아야 한다.

3.2.5 철근을 조립한 후 오랜 시일이 경과한 경우에는 콘크리트를 치기 전에 깨끗이 청소하고, 조립검사를 다시 받아야 한다.

3.3 철근의 이음

3.3.1 철근의 이음은 설계도서에 따라 시공을 하며, 도면에 표시되어 있지 않은 철근의 이음을 할 때에는 구조물의 강도가 저하하지 않도록 철근의 이음위치와 방법은 본시방서 기준에 따라 실시한다.

3.3.2 철근의 겹이음은 소정의 길이를 확보하고, 풀림철선을 이용하여 견고하게 결속하여야 한다.

3.3.3 굳지않은 콘크리트 위에서는 이음을 하거나 콘크리트를 치는 동안 충격을 가해서는 안 된다.

3.3.5 주철근은 설계도서에 표시한 지점에서만 이음할 수 있으며, 위치 변경시 전문기술자의 검토와 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

4. 기계가공

4.1 가공의뢰

4.1.1 철근가공은 전문공장 기계가공을 할 수 있는 공장등록 업체에서 가공함을 원칙으로 하며 전문공장 기계가공시 하도급계약을 체결하여 발주청에 신고하여야 한다.

4.1.2 철근기계가공도 작성 및 주문은 철근조립자(시공자) 이하 “시공자”로 하며, 주문에 따른 현장 납품은 공장기계가공 업체로 한다.

4.1.3 시공자는 가공 상세도 작성시 도면, 시방서 및 공정계획에 의거 철근의 종류별, 부위별, 규격별 형상을 작성하여 공사감독관의 승인을 득한 후 철근 공장기계 가공업체로 SPEC 주문함을 원칙으로 한다.

4.1.4 철근가공을 전문공장에 의뢰하였다 하여 시공자의 관급자재 관리의무나 가공된 철근의 규격관리 의무가 감면되는 것이 아니므로 시공자는 수시로 지급된 철근의 보관실태와 철근가공 상황을 파악하여야 한다.

4.2 철근취급

4.2.1 철근 절단은 필히 철근 절단기를 사용하고 철근 LOSS를 최소한 적게 하여야 한다.

4.2.2 철근 공장기계 가공시 소요되는 꼬리표 및 부재료 일체는 철근 공장 기계가공 단가에 포함한다.

4.3 공장가공

4.3.1 철근은 KS규격품을 사용하고 굽은 철근이나 손상이 있는 철근은 사용하지 않는다.

4.3.2 철근의 가공은 가열가공을 금하고 상온에서 냉각 가공한다.

구 분	절단길이	띠철근, 스크립, 나선철근폭,높이	단부 굽힘높이	중앙부 밸트높이
허용오차	±5	±5	±5	±5

4.3.3 공장기계가공에 따른 철근 LOSS율은 2.5%(장척포함총량) 적용한다.

4.3.4 현장 납품시 정확한 가공으로 확신한 품질을 확보하고 정밀도를 최대한 유지한다.

4.3.5 철근 구조도면 설계시 가공 상세도

가. 슬라브 및 개구부 주위 매입물로 인한 단면 결손부분 등 균열 발생이 우려되는 부위에 대한 보강

나. 늑근 및 대근의 위치

다. 정착, 이음의 위치 및 길이

라. 간격재 배치 및 피복 두께

마. 폭 고정근의 배치

4.3.6 운반 보관 및 관리

가. 철근의 운반은 각 부위별, 공정별로 상차하여 현장 도착시까지 안전하게 현장에 반입한다.

나. 규격 및 사용부위별로 보관하고 표지판을 설치하여 식별이 용이하게 하여야 한다.

다. 보관장소의 지면을 평탄하게 정리하고 주위에 배수로를 두어야 하며, 비닐지를 깔고 각목 등으로 받쳐 눈이나 비에 노출되지 않도록 해야 한다.

라. 현장에 납품된 철근은 시공자가 관리한다.

4.3.7 철근 가공 및 출하

가. 철근 가공도 작성은 공사감독관의 승인을 득한 후 시공자가 가공공장으로 납품일 3일전까지 FAX로 요구하여야 한다.

나. 시공자는 철근출하 1일전까지 공장기계가공 담당자에게 유․무선으로 통보한다.

다. 돌발상황이 발생하지 않도록 공정계획 검토를 철저히 한다.

4.3.8 관급자재 입고

가. 공장 기계가공시 시공자는 기계가공에 소요되는 철근을 발주자로부터 출고증을 교부받아 철근공장에서 철근을 인수하여 철근가공공장에 입고하여야 한다.

나. 시공자는 가공에 소요되는 자재를 규격별 길이별로 주문 가능하도록 전문공장 기계가공업체와 상호 협의한다.

4.3.9 철근 공장기계가공품의 검수

가. 기계가공하여 출고된 철근가공품은 현장도착시 공사감독관의 확인을 득한 후 하차하여야 한다.

나. 시공자는 공장기계가공 철근을 인수하여 형상별․치수별로 지급자재대장에 기재하여 관리하도록 하여야 한다.

다. 공사감독관이 현장에 반입된 가공품중 불합격가공품(심한 녹, 형상, 규격, 가공불량)에 대하여 반품을 지시할 수 있으며 이 경우 시공자부담으로 신규철근으로 재가공하여 현장에 반입하여야 한다. 이때 시공자는 재가공으로 추가되는 비용을 발주청에 요구할 수 없다.

4.3.10 정 산

가. 철근 투입수량은 이론중량에 할증 2.5%를 더한다.

나. 가공비 정산은 총 투입수량에 할증 2.5%를 제외한 이론 중량으로 정산한다.

4.3.11 기타

가. 철근 공장기계가공을 위해 상호 협조, 신뢰하여 원활한 공사가 이루어질 수 있도록 최선을 다한다.

나. 기타 명시되지 않는 사항은 공사감독관과 상호 협의하여 처리한다.