조 정 사 유 서

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 해삼 특화양식단지 조성사업

○ 위    치 : 강릉시 주문진읍 주문5리 일원

○ 공사개요 : 해삼 중간육성장 조성 1식

○ 공사기간 : 착공일로부터 90일

2. 심사결과

(단위: 천원)

구 분	요청금액	심사금액	조정금액	조정률
총 공 사 비	238,200,000	222,230,000	-15,970,000	-6.70
도 급 액	165,207,000	93,443,000	-71,764,000	-43.44
관 급 액	72,993,000	128,787,000	55,794,000

3. 적용기준

○ 2021 건설공사 표준품셈

○ 2021년 토목, 조경, 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준

○ 항만 및 어항공사 표준시방서

4. 주요 조정내용

○ 피복석(1,009㎥) 조정

(당초) 사급자재 → (변경) 관급자재

○ 품질관리비 조정

- 경비로 계상

○ 제비율표 조정

- 간접노무비, 기타경비